<4-16-2>	「탁구도시」천안, 탁구 전용체육관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진 계획	탁구전용 체육관 건립		ㆍ공모사업. 신청 준비	ㆍ문체부 공모 사업 예산반영 ㆍ기본 및 실시설계	ㆍ지방재정 투자 심사 대응	ㆍ공사 착공	ㆍ공사 준공
추진 실적			ㆍ건립 적정 장소 및 추진 방법 협의(9월) ㆍ예산협의 (11월)	ㆍ생활SOC 지원 사업 공모 선정 ㆍ기본 및 실시설계 추진	ㆍ지방재정 투자 심사 재검토

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2025. 6.(국비 3년간 분할지원)

○ 사 업 비 : 20억원(국 10, 시군 10)

- 동부 스포츠센터 부지 내 공약사업인 탁구 전용 체육관을 조성, 생활체육시설 확충지원 공모사업 선정 국비 30억원 확보

○ 사업내용 : 연면적 1,000㎡(다목적체육관, 다목적실, 관리공간 등)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 8. : 탁구전용 체육관 건립 건의(천안탁구협회 → 천안시)

○ 2022. 9. : 건립 적정장소 및 추진 방법 등 협의(도-천안시)

○ 2022. 11. : ’23년 국비 공모사업 준비를 위한 예산협의(도-천안시)

○ 2023. 2. : 공모사업 준비를 위한 협의(도-천안시)

○ 2023. 4. : 동부스포츠센터 부지 내 탁구전용체육관 건립 협의

○ 2023. 5. :  ’23년도 생활SOC 지원사업 공모 신청

○ 2023. 9. :  ’23년도 생활SOC 지원사업 공모 선정(동부스포츠센터)

○ 2024. 3. : 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)

○ 2024. 10. : 제3차 정기 지방재정투자심사(중앙) 회신(재검토)

※ 사업규모의 적정성 및 사업부지 등 사업계획 구체화 사유

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 2차 지방재정투심사 결과 편익과다 추정, 경제성 분석오류를 사유로 반려

⇨ 사업내용 보완 3차 지방재정투자심사(중앙) 추진(ʼ25년 3월 말)

□ 향후 추진계획

○ 2025. 3. :지방재정투자심사(중앙) 의뢰

○ 2025. 6. : 건축기획 용역

⇨ 기본 및 실시설계(’25년), 공사 착공 및 준공(’26년)

체육진흥과   체육시설지원팀   팀장 이용석   담당자 이창희 (☎3866)