<5-18-3>	충남산림자원연구소 이전대상지 확정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남산림자원 연구소 이전		타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
추진실적			연구용역 착수	이전 후보지 공모 용역추진 완료 (’22.11.∼’23. 12.)	이전 대상지 선정 완료, 기본계획 수립 착수

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	70	0	70	0	0	0	0
24년	확보	243	0	243	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2027년(6년간)

○ 사 업 비 : 68,500백만원(도비)

○ 사업내용 : 행정구역상 세종시 편입에 따른 지역적 불일치 해소 및 선도 연구기관으로 발전을 위한 연구소 도내 이전

	< 산림자원연구소 현황 >
□ 위 치 : 세종특별자치시 금남면 산림박물관길 110 □ 재산가치 : 약1,601억원(’24년 공시지가기준) - 토지 89필지/269ha(1,285억원), 건물(112억원), 시설(204억원) 등 ※ 탁상감정 기준(’23.9.) : 3,054억원(토지 2,958억, 건물 96억)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산림자원연구소 이전 추진계획(안) 수립(’22.7.)

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진(’22.11.~’23.12.)

※ (용역사) 한국산업경쟁력연구원, (용역비) 70백만원

○ 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 자문회의 개최(’23.4.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 공모(’23.5.23.~6.30.)

⇨ 5개 시군 신청 : 공주시, 보령시, 금산군, 청양군, 태안군

○ 산림자원연구소 이전 공모 신청지 현장확인 및 서류 검토(~'23.8.)

- 신청 후보지별 여건, 장·단점 분석, 관련법규 등 입지분석 실시

○ 산림자원연구소 이전 추진을 위한 팀 신설(연구소 내) ('24.1.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성운영 계획(안) 수립('24.3.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가위원회 구성('24.5.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 평가설명회 개최('24.6.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 현지실사 추진('24.7.~8.)

○ 산림자원연구소 이전 대상지 선정('24.8.30.)

※ 청양군 청양읍 군량리 389-2번지 일원(391.5ha)

○ 연구소 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진계획 착수('24.12.)

□ 향후 추진계획

○ 산림자원연구소 이전 절차 추진

- 이전 기본구상(계획) 및 타당성 조사 용역 추진('24.12.~'25.10.)

○ 現 산림자원연구소 부지 매각을 위한 행정절차 등 추진

- 산림자원연구소 임시이전(~'26.6.) 및 행정재산 용도폐지 등

①기본구상 및 기본계획 수립 ('24.12.~’25.10.)	➡	②타당성조사 및 투자 심사 ('25.4.~12.)	➡	③자연휴양림 등 산림복지시설 지정 ('25.6.~12.)	➡	④ 임시이전 및 재산 용도폐지 ('26.1.~6.)	➡	⑤공유재산심의 및 관리계획 ('26.2.~’26.5.)

⑥ 공공건축 기획 및 심의 ('26.5.~’26.8.)	➡	⑦이전 대상지 토지 매입 ('26.6.~10.)	➡	⑧실시설계 및 영향평가 등 협의 ('26.6.~'27.6)	➡	⑨청사 및 연구시설 조성 ('27.6.~’28.6.)	➡	⑩휴양림 등 산림 복지시설 조성 ('27.6.~’29.12.)

산림자원과   연구소이전TF팀   팀장 김창기   담당자 강동훈 (☎2574)