<2-5-8>	당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	중장기 계획 반영	기초조사 수립	종합계획 수립대응	종합계획 수립	기본계획 수립대응	기본계획 수립	개별사업 개발 추진	개별사업 개발
추진실적		종합계획 수립대응	종합계획 수립 관련 수요조사	종합계획 수립(5월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 추후확정(’25년 기본계획 완료 후 확정)

○ 사업내용 : 당진항 미래발전전략

- 지역 내 증가하는 항만 물동량 처리 부두 확충(양곡, 잡화 등)

- 정부 탄소중립 정책 및 충남 그린에너지 산업 선도를 위한 수소․암모니아 부두 조성

- 항만물류와 해양관광이 공존하는 복합항만으로 전환하기 위한 항만친수시설 조성

- 유휴부두 효율적 운영 및 수리조선단지 조성 등을 통해 항만 내실화 도모

○ 수혜대상 : 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 당진항 종합발전계획에 일부반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22.09.19. : 당진항 항만기본계획 변경고시(유휴부두 효율적 운영 반영)

- 고대 1번부두 유휴시설 해저케이블 제조시설로 변경(대한전선 기업유치)

- 고대 10번부두 접안능력 확대(5만톤→10만톤)

○ ’22.11.22. : 당진항 종합발전계획 수립 관련 항만물동량 수요조사 실시

- 항만물동량 수요 설문조사 추진

○ ’22.12. 2. : 당진항 수소‧암모니아부두 업무협약 체결

- 도지사, 당진시장, 현대산업개발 대표이사 등 민간참여사 대표 등 12명

○ ’22.12.19. : 당진항 신규사업 발굴 및 기본계획 반영 대책회의 개최

- 도, 당진시, 지역민간단체, 민간전문가 등

○ ’23.1.26. : `23년 항만활성화 지원사업 계획수립

○ ’23.3.10. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(1차)

- (협력사항 토론) 사업부서간 협의 및 협력 추진방향 논의 등

○ ’23.3.13. : 당진항 항만구역 확장을 위한 협의

- 당진항 항만구역 확장을 위한 자료 작성 및 추진방향 협의

○ ’23.3.28. : 당진항 종합발전계획 수립 용역 중간보고회

- ‘당진항 기초조사용역 결과’미반영 사업 재검토 요청

○ ’23.4.11. : 당진항 종합발전계획 수립용역 현안사업 건의

- 석문지구 잡화·양곡 부두 항계밖 항만구역 지정, 부곡지구 항만배후단지 지정, 고대부두 유휴부지 활용방안 검토 등

○ ’23.5. 1. : 당진항 종합발전계획 수립용역 완료

- 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설)

○ ’23.06.20. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(2차)

- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

○ ’23.09.06. : 항만기본계획 반영을 위한 전문가 자문(5개사업)

- 송산 수소부두(기능변경), 부곡지구(신에너지 연관산업), 음섬포구(친수시설) 등

○ ’23.09.20. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(3차)

- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

○ ’23.11.30. : 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 요청서 제출(도➝해수부)

- 송산 수소부두, 부곡지구, 음섬포구 등 당진항 도 현안사업 제출

○ ’23.12.12. : 당진항 수소(암모니아) 부두 조성 업무협약 실천을 위한 실무협의회 개최(4차)

- (협력사항 토론) 추진현황 공유 및 사업부서간 협력사항 논의 등

□ 향후 추진계획

○ 해수부 제4차 항만기본계획 수정계획에 道 현안사업 반영

해운항만과   항만계획팀   팀장 석형일   담당자 배경민 (☎4821)