11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 충청남도에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
홍성의료원 지하주차장 증축공사	7,500	3,600	2,000	1,900	2014	2012(도)	40
장고도항 방파제 및 물양장	8,284	1,000	3,075	4,209	2016	2012(도)	30
고대도항 방파제 및 물양장	14,538	1,000	3,500	10,038	2016	2012(도)	20
다사항 방파제 및 물양장 축조공사	18,700	100	800	17,800	2017	2012(도)	-
국방대진입도로(양촌 ~연산)지방도 확포장	46,000	900	2,483	42,617	2017	2012(도)	-
도립도서관 건립	57,073	2,300	8,224	46,549	2015	2012(중앙)	5
창업및중소벤처기업 육성을 위한 투자조합조성	25,000	10,200	8,800	6,000	2019	2011(중앙)	59.2
백제문화제 지원 (제57회～제60회)	27,092	11,483	5,609	10,000	계속사업	2011(중앙)	100%
충남보훈회관 건립	6,115	4,315	1,800	-	2013. 8	2011(도)	100
공주마곡사 진입도로 선형개량	7,000	2,730	4,270	-		2011(도)	50
공주 호계도로 선형개량	6,030	1,330	4,700	-		2011(도)	53
당진 성북도로 선형개량	2,850	700	2,150	-		2011(도)	20
예산 용리도로 선형개량	3,870	900	2,970	-		2011(도)	45
홍성 남장도로 경사완화 공사	4,500	1,100	3,400	-		2011(도)	25
공주소방서 신축 이전사업	7,551		1,000	6,551	2014	2012(도)	4
태안소방서 신축	6,800	1,280	5,520		2014	2011(도)	10
내포신도시 119안전센터 신축	6,020	3,010		3,010	2016	2011(도)	50
가축위생연구소 아산지소 신축이전	560	119	76	474	2014	2011(도)	-

‣ ‘13.6월말 현재 추진 중에 있는 사업입니다.

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	홍성의료원 지하주차장 설치공사	담당자	식의약안전과 성만제 (☎635-4343)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 지역內 거점병원으로 자리매김 하면서 진료환자 및 장례식장 이용객 지속적으로 증가 - 1일 1,800명 이용(진료환자 1,231명, 장례식장‧보호자 569명) ○ 現)주차시설은 174면으로 1일 이용객 약 600명 정도 이용 - 의료원 이용객들이 인근 도로변 주차로 주민마찰과 안전위협 ○ 의료시설용지의 효율적인 활용과 주차 195면을 증설하여 이용객 편의제공 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 3 ～ 2014. 6 ○ 위 치 : 홍성의료원 지상주차장 ○ 사업규모 : 지하2층(6,143㎡, 195면) ○ 시공사 : 미주건설(주) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,500백만원(국비 3,750, 도비 3,750) ○ 지금까지 집행액 : 5,600백만원(2013년, 국비 2,800백만원, 도비 2,800백만원) ○ 향후 소요액 : 1,900백만원(2014년, 국비 950백만원, 도비 950백만원) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%) ○ 1차 발주 : 토목공사, 철근콘크리트 공사 - 토사반출 완료, 외벽 및 기초 콘크리트 완료 □ 향후계획 ○ 2차 발주 : 방수, 창호 및 기타 마감공사 - 2014년 예산확보(연차사업, 1,900백만원, 국비 950, 도비 950) □ 사업변경 내역 ○ 해당없음.

사업명	장고도항 건설공사	담당자	수산과 서유덕(☎635-2774)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적․인적 피해가 많아 어려움에 처한 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대 ○ 수산업의 경쟁력을 강화하고 어촌지역 생활환경 개선으로 지역주민 생활의 중심지로서 미래 지향적인 종합기능 수행 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 12. ～ 2016. 11. ○ 위치 : 보령시 오천면 장고도리 ○ 시 공 사 : 네오서진건설(주) ○ 사업규모 : 방파제 50m, 물양장 145m, 호안 45m, 선착장 52m, 선양장 20m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,300백만원(광특 7,440, 시도비 1,860) ○ 지금까지 집행액 : 1,000백만원(2012년 1,000) ○ 향후 소요액 : 7,284백만원(2013년 3,075, 2014년 이후 4,209) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 2012. 12. : 공사 착수 ○ 2013. 8. : 기초지반처리공 완료, 가호안 축조 중 □ 향후계획 ○ 2012. 8. : 2012년분 준공 □ 사업변경 내역 ○ 당초 : 9,300백만원, 변경 : 8,284백만원 ➯ 입찰차액 발생

사업명	고대도항 건설공사	담당자	수산과 배경민(☎635-4140)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적․인적 피해가 많아 어려움에 처한 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대 ○ 수산업의 경쟁력을 강화하고 어촌지역 생활환경 개선으로 지역주민 생활의 중심지로서 미래 지향적인 종합기능 수행 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 12. ～ 2016. 11. ○ 위치 : 보령시 오천면 고대도리 ○ 시 공 사 : (주)도원이앤씨 ○ 사업규모 : 북방파제 50m, 물양장 110m, 선착장 165m, 남방파제 167m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 17,700백만원(광특 14,160, 시도비 3,540) ○ 지금까지 집행액 : 1,000백만원(2012년 1,000) ○ 향후 소요액 : 13,538백만원(2013년 3,500, 2014년 이후 10,038) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ 2012. 12. : 고대도항 건설공사 착수 ○ 2013. 8. : 북방파제 사석 투하, 피복석 시공중 □ 향후계획 ○ 2012. 8. : 2012년분 준공 ○ 2012. 9. : 고대도항 남방파제 건설공사 착공 □ 사업변경 내역 ○ 당초 : 17,700백만원, 변경 : 17,538백만원 ➯ 실시설계결과 사업비 축소 및 입찰차액 발생

사업명	다사항 건설공사	담당자	수산과 서유덕(☎635-2774)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적․인적 피해가 많아 어려움에 처한 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대 ○ 수산업의 경쟁력을 강화하고 어촌지역 생활환경 개선으로 지역주민 생활의 중심지로서 미래 지향적인 종합기능 수행 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 10. ～ 2016. 10. ○ 위치 : 서천군 비인면 다사리 ○ 시 공 사 : - ○ 사업규모 : 방파제 200m, 호안 58m, 물양장 263m, 선양장 20m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 18,700백만원(광특 14,960, 시도비 3,740) ○ 지금까지 집행액 : 100백만원(2012년 100) ○ 향후 소요액 : 18,600백만원(2013년 800, 2014년 이후 17,800) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %) ○ 2013. 8. : 환경영향평가(본안) 작성중 및 실시설계 중 □ 향후계획 ○ 2013. 10. : 환경영향평가 협의 완료 및 실시설계 완료 ○ 2013. 11. : 공사착수 □ 사업변경 내역 ○ 해당사항 없음

사업명	국방대 진입도로(양촌~연산) 지방도 확,포장	담당자	도로교통과 이효신 (☎635-4686)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 국방대 진입도로 개설로 국방대의 원활한 이전 및 조기정착을 위한 기반 시설 제공 ○ 양촌I.C 개통에 따른 상위도로와 연계교통망 구축으로 도로이용자 편의 제공 및 지역경제 활성화 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 10 ~ 2017. 12(5년간) ○ 위치 : 논산시 연산면 신암리~양촌면 거사리 ○ 시공사 : 미착공 ○ 사업규모 : L=4.2km, B=20.0m(2차로→4차로) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 46,000백만원(시도비 46,000) ○ 지금까지 집행액 : 3,383백만원(‘12년 900, ’13년2,483, 재원 : 도비) ○ 향후 소요액 : 42,617백만원(‘14년 5,000, ’15년15,000 ‘16년이후22,617 재원:도비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %) ○ 2012. 5 : 지방재정 투·융자사업 심사 ○ 2012.11 ~ 2014.. 4 : 기본 및 실시설계용역 중 ○ 2014. 3 : 보상 추진 ○ 2014. 5 ~ 2017. 12 : 공사발주 사업추진 □ 향후계획 ○ 2013. 12 : 실시설계 완료 ○ 2014. 3 : 보상착수 및 공사발주 ○ 2014. ~ 2017 : 공사추진 및 개통(원활한 공공기관 지방이전 지원) □ 사업변경 내역 ○ 없 음

사업명

충청남도 도립도서관 건립

담당자

문화예술과 백상엽 (☎635-2413)

□ 필요성 및 기대효과

○ 도단위 종합적인 도서관 자료의 수집․정리․보존 및 제공

○ 지역주민의 정보접근서비스 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ∼ 2015

○ 위치 : 내포신도시 홍예공원 내 문화시설부지

○ 사업규모 : 부지 39,441㎡, 지하1층 지상4층 연면적 11,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 57,073백만원(국비 14,080, 시도비 42,993 )

○ 지금까지 집행액 : 2,300백만원(2012년, 도비)

○ 향후 소요액 : 54,773백만원

구 분	계	2013	2014	2015
계	54,673	8,224	29,974	16,575
광 특	14,080	360	9,700	4,020
도 비	40,693	7,864	20,274	12,555

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 현상설계 공모 준비

□ 향후계획

○ 2013. 12 : 현상공모설계

○ 2014. 4 ∼ 2015. 12 : 건립공사

○ 2015. 12이후 : 개관

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명	창업및중소벤처기업 육성을 위한 투자조합조성	담당자	전략산업과 박황진(☎635-3449)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 지역기업 투자자금 애로해소와 벤처생태계 조성을 위한 투자환경 마련 ○ 창업 및 중소벤처기업 육성 투자재원 공급으로 충청권 경제활성화 및 신성장동력산업 성장․발전 도모 □ 사업개요 ○ 기간 : ‘12. 2～‘19. 1 ○ 투자대상 : 대전, 충남지역 비상장 중소벤처기업 ○ 운용사(업무집행조합원) : 대덕인베스트먼트(주) ○ 조합원 : (재)대전경제통상진흥원, (재)충남테크노파크, (사)과학기술인 공제회, 골프존, ㈜인텍플러스, ㈜참저축은행, 대덕인베스트먼트(주) 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 25,000백만원(국비 8,000, 시도비 6,000, 기타 11,000) ※충남도 30억원(도비 10, 충남TP 20), 대전시 30억원 ○ 투자액 : 14,800백만원(2012～2013/출자비율※에 따라 투자) ○ 향후 소요액 : 14,700백만원(2014년 까지, 3년간 투자/4년간 회수) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59.2%) ○ 10개기업 148억원 투자(충남 2개사 39억, 대전 7개사 92억, 기타 1개사 17억) ○ 충남도 출자금 10억원 및 충남TP 11억원 출자완료 □ 향후계획 ○ 충남투자의무비율(25%/75억원 이상)에 따라 충남기업 신규투자 ○ 충남TP 잔여분 9억원 추가 출자 □ 사업변경 내역 ○ 총사업비 : 당초 250억원 → 변경 295억원(※출자비율 참조) - 국비/모태펀드 140억(47.46%), 충남TP 30억(10.17%), 대덕인베스트먼트 20억 (6.78%), 대전경제통상진흥원 30억(10.17%), 과학기술인공제회 30억(10.17%), 골프존 20억(6.78%), 인텍플러스 10억(3.39%), 참저축은행 10억(3.39%), 황재식 5억(1.69%)

사업명	백제문화제 지원(제57회～제60회)	담당자	문화산업과 윤정일 (☎041-635-3845)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 백제문화의 우수성과 국제성 홍보 및 대국민 인식 제고 ○ 지역민의 자긍심 고취와 축제의 부가가치 지역민 향유 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011. 1. ~ 12월 ○ 위치 : 공주, 부여 일원 ○ 시공사 : (재)백제문화제추진위원회 ○ 사업규모 : 5,772백만원(도비 2,000 시군비 2,000, 기타 1,772) □ 소요재원 및 사업비 집행현황(‘11년도～’14년도) ○ 총사업비 : 27,092백만원(도비 9,670, 시군비 9,000, 기타 8,422) ○ 지금까지 집행액 : 11,483백만원 ○ 향후 소요액 : 15,609백만원(도비 5,420, 시군비 5,000, 기타 5,189) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 기본계획 및 실행계획, 프로그램별 연출계획 수립‧시행 ○ 백제문화제 개최(2011. 10. 1. ~ 10. 9. / 9일간) ○ 사업 결산 및 평가 용역 보고(분석 결과 다음년도 사업에 반영) □ 향후계획 ○ 역사성을 바탕으로 참여와 흥미를 유발하는 킬러콘텐츠 개발 ○ 기업, 유관기관 등 민간부문 참여 확대 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음.

사업명	충남보훈회관건립	담당자	사회복지과 이종엽(☎635-4242)
□ 필요성 및 기대효과 ○「충남도청」이전사업 추진과 연계하여 도청 신도시 내 도내 보훈단체가 함께 입주하는 「통합보훈회관」을 건립 ⇨ 보훈단체 운영의 활성화를 도모하고, 오랜 숙원사업을 해소 □ 사업개요 ○ 기간 : □10. 4. ～ □13. 8 ○ 위치 : 내포 신도시내(업무-2블록 4-4공구) ○ 시공사 : 일산종합건설주식회사 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상4층(연면적 3,534㎡, 부지 1,615㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,115백만원(국비 1,430, 도비 4,685) - 부지매입비 1,354, 설계용역비 205, 공사비 4,556 ○ 지금까지 집행액 : 6,115백만원(연도별, 재원별 등) ○ 향후 소요액 : 없음 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 충남(통합)보훈회관 건립 수정안 확정 (’11. 5. 2) - (건축규모) 부지 1,615㎡ 건물 3,203㎡ / 지하 1층, 지상 4층 - (총사업비) 6,115백만원(국비 1,430, 도비 4,185, 자담 500) ※ 전국보훈회관 신축 평균수준으로 보훈회관 건립추진위원회와 협의, 당초안의 20% 축소 조정 ○ 공사착공(’12. 4.23) : 일산종합건설(주), 논산 연산면 소재(박재현) ○ 충남통합보훈회관 건립 기공식(’12. 5. 3) □ 향후계획 ○ 2013. 9월. 보훈단체 사무실 기능보강(집기구입) ○ 소유권 보존등기(충남보훈회관건립추진위원회) □ 사업변경 내역 ○ 충남통합보훈회관 건립사업비 조정(’12. 4. 2) : 자부담 5억 도비부담

사업명	마곡사 진입도로 선형개량	담당자	공주지소 박현필(☎635-7616)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 불량한 도로 선형을 바로잡아 양호한 도로 기하구조로 개선 ○ 빈번하게 발생하던 교통사고가 현저히 줄어 들 것으로 예상 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011.02 ~ 2013.12 ○ 위치 : 공주시 사곡면 가교리(지629호) ○ 시공사 : 서대종합건설(주), 대진건설(주) ○ 사업규모 : 선형개량 L=1.78km, B=10.0m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 8,300백만원(국비 4,150 시도비 4,150) ○ 지금까지 집행액 : 2,730백만원 - (2011년) 국비 865 시도비 865, (2012년) 국비 500 시도비 500 ○ 향후 소요액 : 4,270백만원 - (2013년) 국비 2,135 시도비 2,135 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ○ 선형개량 총 L=1.78km 중 (1공구) L=1.1km 보상 중 (2공구) L=0.68km 사업 완료 □ 향후계획 ○ 선형개량 총 L=1.78km 중 (1공구) L=1.1km 사업 완료 □ 사업변경 내역 ○ 총사업비 - (당초) 8,300백만원 (변경) 7,000백만원 (증감) 1,300백만원 감조정 ○ 사업규모 - (당초) 개착식 터널 1개소 (변경) 개착식 터널 0개소

사업명	호계도로 선형개량	담당자	공주지소 성현석(☎635-7623)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 선형이 불량한 구간을 개량하여 양호한 도로 기하구조를 형성함으로 도로의 안전성 및 원활한 교통환경을 제공하고, 국도32호선 사곡교차로와 고속국도30호선 마곡사IC와의 연계성을 향상시킴 ○ 교폭(인도폭) 및 하천시설기준에 부적합한 태화교를 개선하여 재해예방 및 교통사고 예방 등 주민불편 해소 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 6. 12. ~ 2014. 12. 11 ○ 위 치 : 공주시 사곡면 호계리(지629호) ○ 사업규모 : 선형개량 L=0.64km(교량 L=154m), B=11.0m ○ 시 공 사 : 대림종합건설(주) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,030백만원(국비 3,015, 시도비 3,015) ○ 지금까지 집행액 : 1,330백만원 - (2011년) 국비 125 시도비 125, (2012년) 국비 540 시도비 540 ○ 향후 소요액 : 4,700백만원 - (2013년) 국비 2,350 시도비 2,350 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%) ○ 교량 하부구조 완료 및 상부 거더 설치 ○ 선형개량부 토공 완료 □ 향후계획 ○ 교량 상부(슬라브 등)구조 시공 ○ 선형개량부 및 부체도로 포장 시공 □ 사업변경 내역 ○ 총사업비 - (당초) 7,930백만원 (변경) 6,030백만원 (증감) 1,900백만원 감조정 ○ 실시설계 용역 결과에 따른 감조정

사업명

당진 성북도로 선형개량

담당자

종건소 홍성지소 박민규(☎635-7668)

□ 필요성 및 기대효과

○ 교차로 시거개선과 협소교량 재설치로 교통사고 위험 감소 및 지역주민

교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011~2013년        ○ 위    치 : 충남 당진시

○ 시공사 : 에스엔티건설(주)    ○ 사업규모 : 선형개량 L=360m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,850백만원(국비 1,425, 도비 1,425)

○ 지금까지 집행액                                     (단위:백만원)

연 도	예산액	지 출 액			비 고
		계	국 비	도 비
계	2,850	954	655	299
2012까지	700	649	350	299
2013	2,150	305	305	0

○ 향후 소요액 : -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2011. 01. 07 : 주민설명회 개최

○ 2013. 08. 현재 : 보상협의 중(공사 중지)

□ 향후계획

○ 2014. 03. : 보상협의 완료(수용 등)

○ 2014. 12. : 공사 준공예정

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비(백만원)	사유
당초	0.68㎞	3,850	위험도로 구조개선사업 계획변경
변경	0.36㎞	2,850

사업명

예산 용리도로 선형개량

담당자

종건소 홍성지소 이경환(☎635-7664)

□ 필요성 및 기대효과

○ 차로 폭이 협소한 지역의 교통사고 위험이 높아 통행이 불편한 구간을

개량하여 도로 이용자의 안전성을 제공하고 교통사고 위험요소 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011~2013년        ○ 위    치 : 충남 예산군

○ 시공사 : (유)리도종합건설    ○ 사업규모 : 선형개량 L=1.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,870백만원(국비 1,935, 도비 1,935)

○ 지금까지 집행액                                     (단위:백만원)

연 도	예산액	지 출 액			비 고
		계	국 비	도 비
계	3,870	1,210	840	370
2012까지	900	751	450	301
2013	2,970	459	390	69

○ 향후 소요액 : -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2012. 05. 21. : 1차분 준공

○ 2013. 06. 19. : 2차분 착공

□ 향후계획

○ 2014. 03. : 보상협의 완료(수용 등)

○ 2014. 12. : 공사 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

홍성 남장도로 경사완화

담당자

종건소 홍성지소 신동명(☎635-7662)

□ 필요성 및 기대효과

○ 종단구배가 급하고, 겨울철 결빙으로 열악한 홍성읍 접근로를 개선하여

도로 이용자의 안전성을 제공하고 교통사고 위험요소 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011~2013년        ○ 위    치 : 충남 홍성군

○ 시공사 : (유)리도종합건설    ○ 사업규모 : 선형개량 L=1.1m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 2,250, 도비 2,250)

○ 지금까지 집행액                                     (단위:백만원)

연 도	예산액	지 출 액			비 고
		계	국 비	도 비
계	4,500	775	625	150
2012까지	1,100	700	550	150
2013	3,400	75	75	0

○ 향후 소요액 : -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2011. 06. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2012. 03. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2014. 03. : 보상협의 완료(수용 등)

○ 2014. 12. : 공사 준공예정

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비(백만원)	사유
당초	1.1㎞	3,800	실시설계 결과 공사비 및 보상비 증액
변경	1.1㎞	4,500

사업명	공주소방서 신축이전사업	담당자	소방행정과 이학민(☎635-5567)
□ 필요성 및 기대효과 ○전국 최고령 노후 소방청사 ⇀ 청사 증축 및 개보수 한계 도달 ○청사 주변 도로망 열악 지역에 위치 ⇀ 신속성 저해 및 교통사고 상존 ○국립공원 계룡산 및 마곡사 등 고찰이 위치 ⇀ 관광객의 안전사고 증가 → 화재․구조․구급 등 신속대처로 인명과 재산 피해 최소화 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. ～ 2014. ○ 위치 : 공주시 웅진동 260번지 일원 ○ 시공사 : 미 선정(8월 예정) / 건축․토목설계 중 ○ 사업규모 : 지하 1층 지상 3층 철근 콘크리트조 3,100㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,550백만원(도비) ○ 지금까지 집행액 : 0백만원 ○ 향후 소요액 : 7,550백만원(2013년, 2014년 / 도비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 도정조정위원회 부의 가결(2013. 09월) ○ 공유재산 관리계획 도의회 승인(2013. 10월) ○ 청사 신축 건축비 예산 확보(2013. 1,000백만원) ○ 공주소방서 건축 설계 발주 (2013. 3월 / DS그룹종합건축사사무소) □ 향후계획 ○ 공주소방서 부지 조성공사 추진(2013. 11월 / 도 종합건설사업소) ○ 공주소방서 건축공사 발주 및 착공(2013. 3월 / 도 종합건설사업소) □ 사업변경 내역 ○ 해당 없음

사업명	태안소방서 신축	담당자	소방행정과 이학민(☎635-5567)
□ 필요성 및 기대효과 ○태안기업도시 건설계획에 따른 안전인프라 구축 필요 ○최근 택지개발로 인한 고층아파트 증가 및 밀집화 형성 ○해안지역 중심 관광․레저시설 증가에 따른 사계절 관광객 급증 → 신속한 출동태세 확립으로 인명 및 재산피해 경감 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011. ～ 2014. ○ 위치 : 태안군 태안읍 장산리 432-1번지 일원 ○ 시공사 : 미 선정(8월 예정) / 부지조성 중 ○ 사업규모 : 지하 1층 지상 3층 철근 콘크리트조 3,100㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,800백만원(도비) ○ 지금까지 집행액 : 300백만원(2012년 / 도비) ○ 향후 소요액 : 6,500백만원(2012년 / 도비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 도정조정위원회 부의 가결(2011. 09월) ○ 공유재산 관리계획 도의회 승인(2011. 10월) ○ 청사 신축 건축비 예산 확보(2012. 1,280백만원, 2013. 5,520백만원) ○ 태안소방서 건축 설계 완료 (2012. 12월 / 성지건축 설계사무소) □ 향후계획 ○ 태안소방서 부지 조성공사 완료(2013. 8월 / 태안군) ○ 태안소방서 건축공사 발주 및 착공(2013. 9월 / 도 종합건설사업소) □ 사업변경 내역 ○ 해당 없음

사업명	내포신도시119안전센터 신축	담당자	소방행정과 이학민(☎635-5567)
□ 필요성 및 기대효과 ○내포신도시 개발로 인한 인구 팽창속도 가속화 ○대형건축물 증가 및 대규모 아파트단지 밀집화 형성 ○소방수요 급증에 따른 안전한 도민의 삶의 질 확보 → 안전한 내포신도시 건설을 통한 질 높은 소방서비스 제공 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. ～ 2015. ○ 위치 : 홍성군 홍북면․예산군 삽교읍 일원 ○ 시공사 : 비케이건설 / 제1 내포119안전센터 준공(2012. 12월) ○ 사업규모 : 지상 3층 철근 콘크리트조 981㎡ 2식 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,020백만원(도비) ○ 지금까지 집행액 : 3,010백만원(2012년 / 도비) ○ 향후 소요액 : 3,010백만원(2015년 이후 추진 / 도비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ○ 도정조정위원회 부의 가결(2011. 09월) ○ 공유재산 관리계획 도의회 승인(2011. 10월) ○ 청사 신축 건축비 예산 확보(2012. 3,010백만원) ○ 제1 내포119안전센터 준공 (2012. 12월) □ 향후계획 ○ 제2 내포119안전센터 사업 추진(2015. 이후 / 도 소방행정과) □ 사업변경 내역 ○ 해당 없음

사업명

가축위생연구소아산지소신축이전

담당자

방역과 허 인(☎635-7021)

□ 필요성 및 기대효과

○ 現 아산지소 소재지(아산 배방)가 「아산 탕정지구 신도시 택지개발사업」

지구 지정(’05.12월)에 따른 이전요인 발생 및 건물 노후화(32년)로 인한

신축 필요

○ 가축위생연구소의 위상정립과 지역 양축농가에게 최상의 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012～2013  ○ 위    치 : 아산시 음봉면 동암리 590-1

○ 시공사 : 미정        ○ 사업규모 : 부지 7,154㎡, 연면적 1,690㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원(국비 0, 시도비 5,900, 시군구비 0, 기타 0)

○ 지금까지 집행액 : 1,950백만원(‘12년 : 1,190백만원, ‘13년 : 760백만원)

○ 향후 소요액 : 4,740백만원(‘13년 : 4,740백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0 %)

○ 2012. 6 : 신축예정부지 매매계약 체결

○ 2013. 1 : 신축예정부지 매입 완료

○ 2013. 3 : 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2013. 12 : 공사 입찰 및 시공사 선정

○ 2014. 12 : 청사 준공 및 청사 이전 완료

□ 사업변경 내역

구 분	당초	현재	변경사유
사업규모	1,690㎡	1,999㎡	부지 매입비 추가 소요 및 예산배정 지연에 따른 사업기간 연장 불가피
총사업비	5,900백만원	6,690백만원
사업기간	2012～2013	2012～2014

11-2. 지방채 발행사업

우리 충청남도에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음.

11-3. 민간투자사업

우리 충청남도에서 현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 없습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				‘12년까지 부담액	‘13년 부담 예정액	‘14년 이후 부담 예정액
BTL, BTO		해	당	없	음