－ 2013년도 지방재정 －

특 수 공 시 목 록

1		충남도청(내포)신도시 진입도로 개설공사

2		도 본청 및 의회청사 신축공사

3		선장~염치(국지70호)국지도 확,포장

4		홍성~덕산(지609호)지방도 확,포장

5		서산~부석(지649호)지방도 확,포장

6		긴급구조표준시스템 및 통합상황실 구축

7		편안한 물길(소규모농업기반시설지원)

8		공공하수처리시설

9		재해위험지구 정비 지원사업

10		생태하천 조성사업

11		하천재해 예방사업(수해상습지, 하도준설)

12		소하천정비사업 추진

1		충남도청(내포)신도시 진입도로 개설공사

○ 충남도내 전 지역이 1시간 이내 접근이 가능한 교통망 구축

○ 내포신도시 조기 활성화를 위한 주 진입도로 기능 수행

○ “신도시～예산수덕사IC” 연결을 통한 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 홍북면 대동리∼예산군 오가면 월곡리

○ 사업기간 : 2011. 7. 5 ∼ 2015. 6. 30

○ 사업내용(규모) : L=8.43km(B=20.5∼31.3m)

○ 사 업 비 : 1,424억원(공사비 1,067, 보상비 357)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	142,363	70,103	72,260
기 투 자	32,288	16,144	16,144
‘12년도	56,000	28,000	28,000
향후투자	54,075	25,959	28,116

□ 추진상황

○ ‘11년  7월 : 공사 착수 ⇒ 주요구조물(교량, 터널) 시공 중

○ ‘14년  6월 :「산수교차로~예산수덕사IC」구간 부분개통 예정

○ ‘15년  6월 : 공사 완료 및 전면개통

□ 성과 및 기대효과

○ 내포신도시 개발촉진 및 지역발전을 견인하는 거점도시 육성

○ 당진~대전 간 고속도로와 국도를 연계하는 교통수요 분담

□ 위 치 도

내포신도시

충남도청(내포)신도시 진입도로(L=8.43km)

□ 완공사진(현재 공사중)

담당부서	신도시개발지원과 기반시설담당
책 임 자	담당 김미환(☏031-635-4872) 담당자 박상돈(☏031-635-4888)

2		도 본청 및 의회청사 신축공사

○ 행정구역과 도청소재지 불일치 해소, 도민의 품으로 돌아온 전환점

○ 내륙에서 서해안으로 발전축이 이전, 지역균형발전 계기 마련

○ 도민들에게 신속하고 원활한 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 홍성군 홍북면, 예산군 삽교읍 충남도청(내포)신도시 내

○ 사업기간 : 2009. 7. 3 ∼ 2012. 12. 13.

○ 사업내용(규모) : 지하2층, 지상7층/104,933㎡

○ 사 업 비 : 3,277억원(공사비 2,327 토지매입비 등 950)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	327,700	151,400	176,300
기 투 자	223,700	77,000	146,700
‘12년도	88,277	74,400	13,877
향후투자	15,723	0	15,723

□ 추진상황

○ ‘09년  7월 : 건축공사 착공

○ ‘10년 12월 : 골조공사 완료

○ ‘11년 12월 : 내․외부 마감공사 추진

○ ‘12년 12월 : 공사완료 및 입주(’13. 4. 4. 개청식)

□ 성과 및 기대효과

○ 2012년까지 차질 없는 청사 준공으로 도청이전 마무리

○ 환황해권시대를 맞아 충남이 대중국 교역의 중심지로 부상

□ 위 치 도

도 청사 및 의회청사 건립

□ 완공사진

담당부서	신도시개발과 건축계획담당
책 임 자	담당 나윤수(☏041-635-4874) 담당자 박상훈(☏041-635-2924)

3		선장~염치(국지70호)국지도 확,포장

○ 국지도70호선(서산~춘천)중 아산시 선장면 ~ 염치읍 구간에 대한

신설 4차로 국가지원지방도를 건설하여 국도34호선과 국도21호선의

교통량을 일부 흡수 국도의 간선기능 유지 및 교통소통에 원활을 기하여 지역 간의 규형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 아산시 선장면 선창리 ~ 염치읍 서원리(국지70호)

○ 사업기간 :  2010. 03. 03 ∼ 2016. 04. 05

○ 사업내용(규모) : L=11.34km(B=20.0m)

○ 사 업 비 : 1,487억원(공사비 1,032, 보상비 등 455)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	131,382	92,180	39,202
기 투 자	41,154	16,037	25,117
‘12년도	15,100	6,000	9,100
향후투자	75,128	70,143	4,985

□ 추진상황

○ 2005년 12월 : 실시설계 완료

○ 2009년 09월 : 도로구역결정 고시

○ 2013년 08월 : 공사 중(종합진도 14%)

※ 2016. 4월 준공예정

□ 성과 및 기대효과

○ 교통불편구간 해소에 따른 교통소통 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모

○ 충남 서북부 지역의 접근성 강화와 지역개발 촉진

위   치   도

□ 완공사진(현재 공사중)

담당부서	도로교통과 도로계획담당
책 임 자	담당 윤병환(☏041-635-4672) 담당자 석형일(☏041-635-4687)

4		홍성~덕산(지609호)지방도 확,포장

○ 내포신도시 주요 진입도로인 지방도609호선 도로의 차로폭 협소 및  선형이 불량한 기존 2차로를 4~6차로로 확·포장하여 원활한 교통소통 및 내포신도시 조기정착을 위한 기반시설 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 신리~덕산면 읍내리(지609호)

○ 사업기간 :  2004. 12. 10 ∼ 2012. 11. 23

○ 사업내용(규모) : L=3.08km(B=19.5∼26.5m)/덕산천교 L=489m

○ 사 업 비 : 605억원(공사비 436, 보상비 169)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	58,641		58,641
기 투 자	51,533		51,533
‘12년도	7,108		7,108
향후투자	-		-

□ 추진상황

○ 2004년 12월 : 시설공사 착수

○ 2012년 12월 : 토목공사 완료 개통

○ 2012. 11. 23 : 공사중지(보상 미협의 토지 수용재결 신청에 따른 중지)

※ 2013. 9월 : 토지수용 재결완료/공사 준공

□ 성과 및 기대효과

○ 교통불편구간 해소에 따른 교통소통 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모

○ 내포신도시의 접근성 강화와 낙후된 중서부권 지역개발 촉진

L = 3.08km

예산군 덕산면 읍내리

4차로

L = 1.88km

6차로

L = 1.20km

예산군 덕산면 읍내리

위   치   도

덕 산 천 교

L = 489m

□ 완공사진(현재 공사중)

담당부서	도로교통과 도로계획담당
책 임 자	담당 윤병환(☏041-635-4672) 담당자 이효신(☏041-635-4686)

5		서산~부석(지649호)지방도 확,포장

○ 선형불량 및 차로폭이 협소한 서산~부석간 지방도를 2차로에서 4차로로 확·포장하여 교통소통 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 서산시 예천동~부석면 대두리(지649호)

○ 사업기간 :  2010. 11. 16 ∼ 2016. 9. 23

○ 사업내용(규모) : L=8.4km, B=21.5m(4차로)

○ 사 업 비 : 873억원(공사비 565, 보상비 등 308)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	87,300		87,300
기 투 자	11,500		11,500
‘12년도	5,400		5,400
향후투자	70,400		70,400

□ 추진상황

○ 2010년 11월 : 시설공사 착공

○ 2012년 12월 : 전면책임감리용역 착수

○ 2016. 9월 : 공사완료 및 개통

□ 성과 및 기대효과

○ 교통불편구간 해소에 따른 교통소통 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모

○ 서산시와 세계적인 철새도래지 천수만과 태안 해안국립공원 등 주요         휴양지를 연결

□ 위 치 도

□ 완공사진(현재 공사중)

담당부서	도로교통과 도로교통담당
책 임 자	담당 윤병환(☏041-635-4672) 담당자 이효신(☏041-635-4686)

6		긴급구조표준시스템 및 통합상황실 구축

○ 첨단 IT기술 기반의 긴급구조표준시스템 구축을 통한 통합지휘역량 제고

○ 분산된 상황실의 공간통합으로 신속한 재난정보공유ㆍ연계 등 협업체계 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 홍성군 홍북면 충남대로 21 (본관 6층)

○ 사업기간 : 2012. 1. ∼ 2012. 12. (1년간)

○ 사업내용(규모)

- 긴급구조표준시스템 및 종합방재센터 구축(소방)

- 재난종합상황실 및 재난종합관제시스템 구축(방재)

○ 사 업 비 : 80.3억원

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	특별교부세	도비	기 타
총사업비	8,030	1,200	3,000	3,830	-

□ 추진상황

○ ‘12년  4월 : 원가계산 용역, 계약심사 및 일상감사 완료

○ ‘12년  7월 : 사업계약 체결(LG CNS 컨소시엄)

○ ‘12년 11월 : 사업완료

○ ‘12년 12월 : 시스템 안정화 기간

□ 성과 및 기대효과

○ 각종 재난정보에 대한 유기적 공유를 통한 유사시 선제적 현장대응으로

도민피해 최소화

○ 재난의 수습ㆍ복구 등 부서간 협업을 통한 컨트롤 타워 역할 수행으로 통합 위기관리체계 구축

□ 완공사진

담당부서	종합방재센터 소방정보통신담당
책 임 자	담당 우태환(☏041-635-5546) 담당자 정대규(☏041-635-5653)

7		편안한 물길(소규모농업기반시설지원)

○ 소규모 토공 용･배수로시설 구조물화로 용수공급 원활

○ 토공수로 등 급･배수 불량지역 제기능 회복 안정영농관리

□ 사업개요

○ 위    치 : 15개 시․군(농업진흥구역내 수리안전 답 용･배수로)

○ 사업기간 : 2008. 1.∼ 2017. 12.

○ 사업내용(규모) : 3,839지구 10,338km

○ 사 업 비 : 4,380억원(도비 2,190, 시군비 2,190)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	438,000		219,000	219,000
기 투 자	90,939		45,469.5	45,469.5
‘12년도	15,959		7,979.5	7,979.5
향후투자	331,102		165,551	165,551

□ 추진상황

○ ‘07년  9월 : 용배수로 정비 중장기계획 수립(10개년 2008~2017)

○ ‘08년 ~ ’12년 : 사업추진(1,676지구 106,898백만원)

○ ‘17년  12월 : Ⅰ,Ⅱ단계 사업 완료

□ 성과 및 기대효과

○ 기능개선 및 노후수리시설의 효율적 유지관리로 영농여건 개선

○ 흙수로 구조물화로 수초제거 등 영농인력 및 농업용수 절감

□ 위치도

□ 완공사진

담당부서	농촌개발과 농업시설담당
책 임 자	담당 최석봉(☏041-635-4063) 담당자 최양진(☏041-635-4078)

8		공공하수처리시설

○ 하수처리장, 하수관거 등 공공하수처리시설 확충으로 발생된 하수의 적정처리로 지하수 및 토양오염 방지

○ 공공하수처리시설 확충으로 주민생활환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 등 15개 시‧군

○ 사업기간 : 2002∼ 2025

○ 사업내용(규모) : 천안하수처리장 증설 등 20개소

⇨ 하수처리시설 설치‧개량‧증설, 하수관거 설치 등

○ 사 업 비 : 630,300백만원(국비 400,700, 도비 63,030, 시군비 166,570)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	630,300	400,700	63,030	166,570
기 투 자	319,768	203,516	31,976	84,276
‘12년도	95,992	55,973	10,023	29,996
향후투자	214,540	141,211	21,031	52,298

□ 추진상황

○ ‘12년  3월 : 예산배정, 하수도설치 인가 등 행정절차 이행

○ ‘12년 4～12월 : 사업착수(용지매입, 시설공사)

○ ‘12년 12월 : ‘12년 사업비 집행완료

□ 성과 및 기대효과

○ 쾌적한 주거환경증진에 따른 삶의 질 향상

○ 공공수역의 수질보전 등 공중위행 향상에 기여

□ 위 치 도

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

□ 완공사진(신관하수처리장 등 20개, 공사중)

담당부서	수질관리과 하수도담당
책 임 자	담당 박도선(☏041-635-4464) 담당자 정성진(☏041-635-4480)

9		재해위험지구 정비 지원사업

□ 기상이변 영향 집중호우․태풍 등 자연재난에 능동적 대응

□ 재해취약지역을 지속적 점검․정비로 재해의 사전예방

□ 사업 개요

❍ 근    거 : 자연재해대책법 제12조, 제14조

❍ 사 업 량 : 도내 15개 시․군 108지구

❍ 사업기간 : 1998 ～ 2017년(20년간)

❍ 사 업 비 : 7,026억원(국비 60%, 지방비 40%)

□ 그동안 추진사항

❍ 2012년까지 87지구,  4,957억원 투자

(단위 : 백만원)

구 분	지구수	사업비 투자계획			비고
		합 계	국 비	도 비
총사업비	108	896,301	537,781	358,520
기 투 자	73	445,291	267,175	178,116
‘12년도	15	50,378	30,232	20,155
향후투자	16	400,632	240,378	160,249

□ 앞으로 추진계획

❍ ‘12년 이후 향후 잔여사업(16지구 4,006억원) 연도별 사업목표 완료를 통한 성실시공 추진

❍ 최근 침수피해 발생지역 등 재해취약지역은 신규 지구지정

❍ 정비완료된 74개 지구는 재해위험지구에서 해제

□ 현황사진(재해위험지구 정비사업 전경)

【논산 방축지구 내수침수지역 펌프장 설치 사업계획도】

【논산 방축지구 내수침수지역 펌프장 설치 사업장 전경】

담당부서	치수방재과 예방담당
책 임 자	담당 김영선(☏041-635-4704) 담당자 이창로(☏041-635-4719)

10		생태하천 조성사업

□ 하천환경 및 친수공간에 대한 사회적 수요증가에 따라 기존의 치수사업을 보완한 친환경적인 하천환경 조성

□ 사업 개요

❍ 사 업 량 : 도내 15개 시․군 / 총 32지구(128.2km)

❍ 사업기간 : 2009 ～ 2027년(18년간)

❍ 사 업 비 : 4,061억원(국비 60%, 지방비 40%)

□ 그동안 추진사항

❍ 생태하천 조성사업 시행에 따른 대상지 선정 조사(‘08.08)

- 우선사업 5개 지구 선정추진(‘09.3. 전국 50개 선정)

- 지방하천 정비사업 종합계획 수립(국토부, ‘11.6) : 32지구 추진

❍ 12년까지 13개 지구 802억원 투자, 4지구 12㎞ 완료

(단위 : 백만원)

구 분	지구수	사업비 투자계획			비고
		합 계	국 비	지방비
총사업비	32	406,010	243,606	162,404
기 투 자	13	48,144	28,886	19,258
‘12년도	12	35,071	21,043	14,028
향후투자	7	322,795	193,677	129,118

□ 앞으로 추진계획

❍ ‘13년에는 10지구(계속 7, 준공 2, 신규 1) 10.5㎞, 400억원 투자

❍ 철저한 공정관리 및 지도로 사업비 이월 최소화

□ 현황사진 및 사업계획 평면도

【공주 제민지구 사업계획 평면도】

【아산 곡교지구 공사추진 전경】

담당부서	치수방재과 하천시설담당
책 임 자	담당 김보영(☏041-635-4702) 담당자 최성호(☏041-635-4716)

11		하천재해 예방사업(수해상습지, 하도준설)

□ 통수단면이 부족한 지방하천을 외수침수로부터 홍수피해를 막기 위해 하천제방 축조 및 하도정비 실시

□ 사업 개요

❍ 사 업 량 : 도내 15개 시․군 / 총 148지구(721.9㎞)

❍ 사업기간 : 1999 ～ 2027년(28년간)

❍ 사 업 비 : 4,061억원(국비 60%, 지방비 40%)

□ 그동안 추진사항

❍ 수해상습지개선 3·4단계 기본계획에 반영추진(건교부, ‘99년)

❍ 하도개선 및 유지관리사업 기본계획수립(건교부, ‘02년)

❍ 지방하천 정비사업 종합계획 수립(국토부, ‘11년)

❍ 12년까지 78지구 5,463억원 투자 / 66지구 321㎞ 완료

- 수해상습지 : 48지구 3,804억원 투자, 39지구 184.8㎞ 완료

- 하도준설 : 30지구 1,659억원 투자, 27지구 136.2㎞ 완료

(단위 : 억원)

구 분	지구수	사업비 투자계획			비고
		합 계	국 비	도 비
총사업비	148	17,801	10,681	7,120
기 투 자	77	4,966	2,980	1,986
‘12년도	19	517	310	207
향후투자	52	12,318	7,391	4,927

□ 향후 추진계획

❍ ‘13년에는 17개 지구 17.9㎞ / 482억원(계속 10, 신규 5, 준공 2) 투자

❍ 철저한 공정관리 및 지도로 연차적 성실공사 추진

□ 현황사진

【아산 도고지구 수해상습지개선사업 공사현장 전경】

【예산 신양지구 수해상습지개선사업 공사현장 전경】

담당부서	치수방재과 하천시설담당
책 임 자	담당 김보영(☏041-635-4702) 담당자 최성호(☏041-635-4716)

12		소하천정비사업 추진

□ 도내 15개 시·군 소하천정비로 쾌적하고 안전한 하천환경 조성

□ 재해 사전예방 및 지역주민 생활환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 도내 15개 시군

❍ 사업기간 : 1995 ∼ 2016(22개년)

❍ 사업내용(규모) : 소하천 2,164개소, L=3,237km

❍ 사 업 비 : 3조 5,409억원

□ 추진상황

❍ 조기발주 90%이상 추진(‘12, 2월)

❍ 사업장별 60%이상 주요공정 마무리(‘12, 6월)

❍ 철저한 공정관리를 통해 사업비 이월 최소화(‘12, 12월)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	지방비	기 타
총사업비	3,540,900	1,770,450	1,770,450
기 투 자	349,800	174,900	174,900
‘12년도	54,600	27,300	27,300
향후투자	3,136,500	1,568,250	1,568,250

□ 향후, 추진계획

❍ 도, 시군간 이월방지추진단 구성・운영하여 이월사업 최소화 노력

❍ 아름다운 소하천 가꾸기 사업 추진 지속 독려

【청양 광대소하천 위치도】

【청양 광대소하천 전경사진】

⇨        ⇨

담당부서	치수방재과 복구지원담당
책 임 자	담당 유영일(☏041-635-4705) 담당자 조성권(☏041-635-2845)