2014년도 특수공시 대상사업 현황

(단위: 백만원)

분야별	연번	사 업 명	사업기간	총사업비	비고
		계 10건		460,220
공공질서 및 안전	1	CCTV설치 및 통합관제센터 구축	2009-2017	47,651
	2	주민자치센터 설립지원	2001-2014	5,260
	3	소방정 건조	2013-2014	4,800
문화․관광	4	면천읍성 복원사업	2007-2020	29,200
환경	5	제민천 생태하천 조성사업	2011-2014	26,975
보건․복지 보훈	6	미혼모자가족 복지시설 신축	2013-2014	1,279
	7	충남 보훈회관 건립	2009-2013	6,115
농림해양	8	서산 A지구 기반시설 재정비사업	2008-2017	265,100
	9	가의도항 재해복구 공사	2012-2014	13,300
수송․교통	10	홍성-덕산간 지방도 확포장 공사	2004-2013	60,540

1		CCTV설치 및 통합관제센터 구축

	사업목적
○ 어린이보호구역, 도시공원․놀이터에 CCTV를 설치, 도민 안전관리 강화 ○ CCTV를 통합운영하여 관리효율성 제고 및 행정 수요에 신속한 대응

□ 사업개요

○ 위    치 : 도내 전시군

○ 사업기간 : 2009년 ∼ 2017년(9년간)

○ 사업내용(규모) : 어린이안전 CCTV 설치, 통합관제센터 구축

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	47,651	23,375	4,794	18,303	1,179
기 투 자	16,016	7,941	1,947	5,938	190
‘13년도	7,361	3,493	743	2,747	378
향후투자	24,274	11,941	2,104	9,618	611

□ 추진상황

○ ‘09년 : CCTV(44개소 71대) 설치

○ ‘10년 : CCTV(147개소 253대) 설치

○ ‘11년 : CCTV(247개소 307대), 통합관제센터(당진) 설치

○ ‘12년 : CCTV(152개소 212대), 통합관제센터(홍성, 태안) 설치

○ ‘13년 : CCTV(226개소 515대), 통합관제센터(공주, 청양) 추진

□ 성과 및 기대효과

○ 아동 대상의 유괴, 성범죄 등의 발생 가능성 사전 억제

○ 각종 범죄와 질서파괴행위 및 재난발생 예방과 해결에 기여

□ 통합관제센터

□ CCTV 설치 및 비상벨 운영

2		주민자치센터 설립지원

	사업목적
○ 주민의 문화‧복지‧편익 및 주민자치 기능강화를 위한 시설 설치 지원 ○ 지역 리더 양성 등 주민자치교육 핵심공간으로 마련하여 지역공동체 형성

□ 사업개요

○ 읍면동 주민자치센터 신규설치 및 운영 지원

○ 사업기간 : 2001년 ∼ 현재(207개 읍면동 대상 연차별 설치 운영)

※ 2013년말 기준, 207개 중 172개소 설치 지원(설치율 83%) / 미설치 35개소

○ 설치근거 : 「읍면동 기능전환 및 주민자치센터 설치운영 방침」 결정

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	도 비	시군비	기 타
총사업비	5,257	1,578	3,679
‘13년도	562	170	392
기투자	1,635	490	1,145
향후투자	3,060	918	2,142

□ 추진상황

○ ‘13년 지원 : 3개 시군 6개소 / 도비 170백만원 지원

당진시(당진1동, 송산면, 대호지면), 청양군(대치면, 비봉면), 서산시(석남동)

○ ‘14년 신규 설치계획 : 3개 시‧군 4개소 / 도비 108백만원 지원

- 시군별 설치현황 및 지원신청에 따라 설치대상 결정

공주시(의당면), 보령시(대천3동), 청양군(청남면, 화성면)

□ 성과 및 기대효과

○ 주민자치센터 운영 활성화를 통한 주민자치 의식전환 및 참여도 제고

□ 주민자치센터 전경

□ 센터 내부

3		소방정 건조

	사업목적
○ 서해안 해상 및 도서지역 화재ㆍ구조ㆍ구급상황 현장대응력 제고 ○ 서해안 및 도서지역 주민에 대한 균형적 소방안전서비스 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 충청남도 당진시 송악읍 고대관리부두(정박지)

○ 사업기간 : 2013. 3월 ∼ 2014. 11월

○ 주요제원

◦ 톤  수 : 총 65톤급               ◦ 속  력 : 최대 27노트(50km/h)

◦ 선  질 : 고장력강+알루미늄합금재 ◦ 추진기 : 워터제트 방식

◦ 주기관 : 고속디젤엔진(1,800마력 2기)

◦ 크  기 : 전장 30m, 폭 5.4m

◦ 장  비 : 소방펌프 2, 방수포 4, 방수구 6, 포소화장치, 구조․구급장비

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	4,800	2,400	2,400
2013년도	116	58	58
2014년도	4,684	2,342	2,342
향후투자

□ 추진상황

○ ‘13년 12월 : 설계 완료

○ ‘14년  3월 : 건조 조달 계약 체결

○ ‘14년  7월 : 현재 공정율 25%

□ 성과 및 기대효과

○ 충청남도ㆍ경기도 전 지역 및 전라북도 일부 광역소방서비스 제공

○ 충남 서해안 주요 항만 및 선박, 도서지역 화재ㆍ구조ㆍ구급서비스 제공

□ 조감도 및 건조 현황

4		면천읍성 복원사업

	사업목적
○ 지역의 역사적․문화적 정체성을 확립하고 향토자원과 연계한 관광자원화 추진 ○ 개발제한으로 쇠퇴한 지역의 역사유적을 정비하여 역사와 문화가 깃든 지역으로 발전

□ 사업개요

○ 위    치 : 당진시 면천면

○ 사업기간 : 2007년 ∼ 2020년(13년간)

○ 사업내용(규모) : 시 발굴조사, 문루․성곽․관아 정비 복원

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	29,200	11,880	6,727	10,593
기 투 자	6,128	1,362	1,313	3,453
‘13년도	2,713	339	324	2,050
향후투자	20,359	10,179	5,090	5,090

□ 추진상황

○ ‘99년 : 면천읍성 정밀지표조사

○ ‘01년～’04년 : 서벽 및 치성 60m 정비

○ ‘06년～’10년 : 풍락루, 건곤일초정 복원

○ ‘07년～’13년 : 토지, 건물 매입 및 철거(35필지 17,015㎡, 23동)

○ ‘13년 : 영랑공원조성, 남문(옹성) 및 성벽 110m 정비

□ 성과 및 기대효과

○ 인구유입으로 지역경제 활성화에 기여

○ 전통역사 문화자원의 원형보전관리, 지역문화 발전에 기여

□ 조 감 도

□ 완공사진(현재 공사중)

5		제민천 생태하천 조성사업

	사업목적
○ 하천정비를 통한 통수단면 확보로 재해발생 사전 예방 ○ 역사와 문화가 공존하는 생태하천 조성으로 구도심 생활환경 개선 및 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 공주시 금학동 ~ 금성동(제민천) 지내

○ 사업기간 : 2011. 8. 29 ∼ 2014. 12. 31

○ 사업내용(규모) : 하천정비 L=3.7km

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	26,975	15,584	3,238	7,553
기 투 자	9,167	4,500	1,100	2,567
‘13년도	9,628	5,776	1,156	2,696
향후투자	8,180	4,908	982	2,290

□ 추진상황

○ ‘11년 10월 : 사업 착공   ○ ‘14년 12월 : 사업 완료 계획

< 13년 추진실적 >

○ 축제 2.3㎞, 교량 1개소, 저류지 박스, 낙차공5개소, 보상완료

○ 산책로, 자전거도로, 조경(30%) 추진

□ 성과 및 기대효과

○ 하천정비를 통한 통수단면 확보로 재해발생 사전 예방

○ 역사와 문화가 공존하는 생태환경 및 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

□ 위 치 도

□ 제민천 개념도

6		미혼모자 가족 복지시설 신축

	사업목적
○ 영유아를 양육하는 미혼모를 위하여 일정기간 주거지원 시설 제공 ○ 상담‧의료‧자립지원을 통한 미혼모의 가족 형성 지원

□ 사업개요

○ 위    치 : 천안시 동남구 향교4길 34-18

○ 사업기간 : 2013 ∼ 2014

○ 사업내용(규모) : 미혼모자 가족 복지시설7세대 24명 (지하 1층, 지상 4층 연면적 990㎡)

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	1,279	567	283.5	283.5	145
‘13년도	1,205	530	265	265	145
향후투자	74	37	18.5	18.5	0

□ 추진상황

○ ‘13년 9월~10월 : 기본계획 수립 및 건축‧기계‧전기설비 실시 설계

○ ‘13년 10월〜11월 : 건축허가 등 행정절차 이행

○ ‘14년 5월 : 미혼모자시설 공사 발주

○ ‘14년 10월 : 미혼모자시설 준공

○ ‘15년 1월 : 시설입소

□ 성과 및 기대효과

○ 미혼모에 대한 주거지원으로 자녀양육 기회 제공

○ 복지시설 서비스 질 향상을 통해 입소자의 건강한 자녀양육 및

사회‧경제적 자립 지원

□ 위 치 도

□ 현재 공사중

7		충남보훈회관 건립

	사업목적
○ 「충남도청」이전사업 추진과 연계하여 도청 신도시 내 도내 보훈단체가 함께 입주하는 「통합보훈회관」을 건립 ⇨ 보훈단체 운영의 활성화를 도모하고, 오랜 숙원사업을 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 충남 홍성군 홍북면 상하천로 50

○ 사업기간 : 2009.10.21 ∼ 2013. 8.27

○ 사업내용(규모) : 지상4층 지하1층(연면적 3,534㎡, 부지 1,615㎡)

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	6,115	1,430	4,685
기 투 자	4,315	1,430	2,885
‘13년도	1,800	0	1,800
향후투자

□ 추진상황

○ ‘12년  4월 23일 : 건축공사 착공,  ‘13년  7월 24일 : 준공검사

○ ‘13년  8월 27일 : 건물 사용승인

□ 성과 및 기대효과

○ 산재되어 있던 보훈단체를 통합보훈회관 건립으로 보훈단체의 결집된 역량을 통해 보훈정신 발양효과 도모

○ 보훈행정의 원활한 소통과 보훈단체 간 화합으로 결속력 기대

□ 위 치 도

□ 완공사진

8		서산 A지구 기반시설 재정비 사업

	사업목적
○ 간척지 내 노후 농업생산기반시설의 개선과 재해대비능력 보강 필요성 증대

□ 사업개요

○ 위   치 : 서산시 · 홍성군 일원(2시·군, 8개 면·동)

○ 사 업 량 : 양수장 5개소, 배수장 8개소, 용·배수로 499㎞, 방수제보강 34.9㎞,

인공습지 4개소(86.7㏊), 수혜면적(6,456㏊)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2017(10년간)

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	2,651,00	2,651,00
기 투 자	67,000	67,000
‘13년도	15,000	15,000
향후투자	183,100	183,100

□ 추진상황

○ `07. 12 : 1·2공구 세부실시설계 완료

○ `08. 12 : 동서(1·2공구) 방수제 보강공사 착공

○ `11. 07 : 3공구 평야부(용수공급, 배수개선 등) 공사 착공

○ `12. 12 : 방수제보강 20.2㎞, 용·배수로 25.4㎞, 배수장 2개소 완료

□ 성과 및 기대효과

○ 종합 물관리 도입과 수질개선으로 효과적인 대규모 우량농지 유지 및 관리

□ 위 치 도

서산A지구 사업계획 평면도

9		가의도항 재해복구공사

	사업목적
○ 태풍 등 기후변화에 따른 자연재해 대비 방파제 구간에 대한 기능개선 및 복원 ○ 어민과 선박의 안전을 도모하고 어항시설을 통한 수산업 경쟁력 경화

□ 사업개요

○ 위    치 : 태안군 근흥면 가의도항

○ 사업기간 : 2012. 12월 ∼ 2014.  8월(절대공기 380일)

○ 사업내용 : 방파호안 50m, 남방파제 81m, 부대공 1식

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	13,300	6,650	6,650	-	-
기 투 자	1,700	850	850	-	-
‘13년도	11,600	5,800	5,800	-	-
향후투자	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘12년  9월 : 태풍피해 재해 복구계획 승인(중앙재난안전대책본부)

○ ‘12년 12월 : 재해복구사업 착수

○ ‘14년  8월 : 공사 완료 및 이용

□ 성과 및 기대효과

○ 태풍 등 자연재해에 대비 어민과 선박에 대한 안전 확보

○ 어항 시설 개선·복원을 통한 이용자의 편익 증대

□ 위 치 도

□ 완공사진(현재 공사중)

10		홍성~덕산간 지방도 확·포장공사

	사업목적
○ 교통소통에 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모 ○ 국도와 연결하여 내포신도시에 진입하는 기반시설 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 ~ 예산군 덕산면 (지609호)

○ 사업기간 : 2004. 12. 10 ∼ 2013. 10. 22(2,220일)

○ 사업내용(규모) : L=3.08km(B=19.5∼26.5m)

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 비	도 비	시군비	기 타
총사업비	60,540	-	60,540	-	-
기 투 자	59,715	-	59,715	-	-
‘13년도	825	-	825	-	-
향후투자	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ ‘04년  12월 : 공사 착수

○ ‘04년   7월 : 감리용역 착수

○ ‘12년  12월 : 공사 완료 및 개통

○ ‘13년  10월 : 공사 준공

□ 성과 및 기대효과

○ 교통소통 원활을 기하고 지역간 균형발전 도모

○ 국도와의 연결로 교통수요 분담 및 내포신도시 진입을 위한 기반시설 구축

□ 위 치 도

4차로

L = 1.88km

6차로

L = 1.20km

홍성~덕산

L = 3.08km

□ 완공사진