11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 충청남도에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
계	545,999	134,350	92,844	318,805
도립도서관 건립	57,073	2,300	1,700	53,073	2016	2013	15
홍성의료원 지하주차장 증축사업	7,374	3,600	2,887	887	2014	2011~12	94
남장도로 경사완화	4,500	1,100	3,400	-	2015	2011	40
마곡사 진입도로 선형개량	7,000	2,730	4,270	-	2014	2011	80
호계도로 선형개량	6,030	1,330	4,700	-	2014	2011	80
국방대진입도로 (양촌~연산)지방도 확포장공사	46,000	900,	2,483	42,617	2017	2013	5
장항~서천간 지방도 확포장공사	6,835	895	600	5,340	2016	2013	13
서산~창리(지649호) 지방도확포장 사업	148,172	29,521	12,380	106,271	2017	2009	15
장고도항 방파제 및 물양장 축조공사	8,890	1,000	3,750	4,140	2015	2012	75
고대도항 방파제 및 물양장 축조공사	15,331	986	3,500	10,845	2016	2012	52
충남도청(내포)신도시 진입도로 개설공사	145,908	88,288	33,432	24,188	2015	2008	80
내포신도시 제2진입도로 개설공사	43,000	-	3,548	39,452	2016	2013	5
태안소방서 신축	6,800		6,800		2014	2011	35
공주소방서 신축	8,200		1,000	7,200	2015	2012	3
보건환경연구원 청사 건립	28,196	700	7,617	19,879	2016	2010	10
충남가축위생연구소 아산지소 신축이전	6,690	1,000	777	4,913	2014	2011	37

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

도립도서관 건립

담당자

문화예술과 백상엽(☎635-2413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도 대표도서관으로서  도단위 도서관정책 수립․시행 및 정보제공

○ 내포신도시 거점 문화공간으로 지역주민의 정보접근 및 독서문화향유증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~ 2016년

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북면/예산군 삽교읍  내포신도시 문화시설 지구내

○ 규 모 : 지하1층/ 지상4층 연면적 11,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 57,073백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	57,073	-	1,700	16,224	36,849
국 비	14,080		360	9,700	4,020
시 도 비	42,993	2,300	1,340	6,524	32,829
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2012. 12.  건립부지 매매계약 체결

○ 2013. 12.  건립설계 현상공모 공고

○ 2014.  3.  건립설계 현상공모 당선작 선정

□ 향후계획

○ 2014. 5. ~ 12.  설계용역 추진

○ 2015.~ 2016.  공사추진

○ 2016. 12.  공사 완료 예정

사업명

홍성의료원 지하주차장 증축

담당자

식의약안전과 정다화(☎635-4344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의료시설 확충과 증가하는 주차수요 대응하여 내원환자 및 보호자에 대한 주차편의 제공

○ 주차장 추가확보로 차량증가로 인한 지역주민의 민원 최소화 및 의료시설 확충에 따른       토지의 효율적 이용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 現 의료원 부지 내(지상주차장 부지활용)

○ 규 모 : 195면/지하2층/연면적 6,143㎡(1,860평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,374백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,374	3,600	2,887	887
국 비	3,687	1,800	1,887
시 도 비	3,687	1,800	1,000	887
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

○ 주차타워(‘11년) → 지하1층(’12) → 지하2층(‘13)으로 변경추진

- 토목 및 골조공사(1차 공사) 착공 : ‘13. 4 ~ 12

- 내부공사 등 마무리공사(2차 공사) : ‘13. 12 ~ ’14. 4

□ 향후계획

○ 지하주차장 관련 추가공사 실시 예정

○ 사업비 정산 및 이자발생액 잔액 반납 조치

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 당초) ‘11년- “주차타워” 설치계획 수립: 현 지상 주차장에 설치

‘12년- “지하 1층 주차장” 신축으로 변경: 부지이용 효율 및 경관고려

현재)  ‘13년- “지하 2층 주차장” 신축으로 변경: 주차이용 효율제고, 90대→195대

‘14년- 부족예산 확보 후 2차 공사 발주 및 공사완료

사업명

홍성 남장도로 경사완화

담당자

종건소 홍성지소 박민규(☎635-7662)

□ 필요성 및 기대효과

○ 종단구배가 급하고, 겨울철 결빙으로 열악한 홍성읍 접근로를 개선하여

도로 이용자의 안전성을 제공하고 교통사고 위험요소 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011~2015년

○ 위  치 : 충남 홍성군 홍성읍 남장리(지609호)

○ 규  모 : 선형개량 L=1.1km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,500	1,100	3,400
국 비	2,250	550	1,700
시 도 비	2,250	550	1,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2011. 06. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2012. 03. 12. : 공사 착공

○ 2013. 12.     : 토지보상 완료

□ 향후계획

○ 2015.  4.    : 공사 준공예정

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비(백만원)	사유
당초	1.1㎞	3,800	실시설계 결과 공사비 및 보상비 증액
변경	1.1㎞	4,500

사업명

마곡사 진입도로 선형개량

담당자

공주지소 임용빈(☎635-7617)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불량한 도로 선형을 바로잡아 양호한 도로 기하구조로 개선

○ 빈번하게 발생하던 교통사고가 현저히 줄어 들 것으로 예상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011～2014

○ 위 치 : 공주시 사곡면 가교리(지629호)

○ 규 모 : 선형개량L=1.78km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,000	2,730	4,270	-	-
국 비	3,500	1,365	2,135	-	-
시 도 비	3,500	1,365	2,135	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 선형개량 총 L=1.78km 중 (1공구) L=1.1km 노체다짐중
(2공구) L=0.68km 사업 완료

□ 향후계획

○ 선형개량 총 L=1.78km 중 (1공구) L=1.1km 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비

- (당초) 8,300백만원 (변경) 7,000백만원 (증감) 1,300백만원 감조정

○ 실시설계 용역 결과에 따른 감조정

사업명

호계도로 선형개량

담당자

공주지소 주낙훈(☎635-7623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량한 구간을 개량하여 양호한 도로 기하구조를 형성함으로 도로의 안전성 및 원활한 교통환경을 제공하고, 국도32호선 사곡교차로와 고속국도30호선 마곡사IC와의 연계성을 향상시킴

○ 교폭(인도폭) 및 하천시설기준에 부적합한 태화교를 개선하여 재해예방 및 교통사고 예방 등 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014

○ 위    치 : 공주시 사곡면 호계리(지629호)

○ 사업규모 : 선형개량 L=0.64km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,030	1,330	4,700	-	-
국 비	3,015	665	2,350	-	-
시 도 비	3,015	665	2,350	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 교량 설치 완료 및 선형개량 도로 기층포장 완료

□ 향후계획

○ 기존교량 철거 및 도로 표층 포장 및 부대공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비

- (당초) 7,930백만원 (변경) 6,030백만원 (증감) 1,900백만원 감조정

○ 실시설계 용역 결과에 따른 감조정

사업명

국방대진입도로(양촌~연산)

지방도 확포장공사

담당자

도로교통과 장경운

(☎635-4685)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 공공기관 지방이전을 지원하여 이전 공공기관 및 종사자의 조기정착을 통한 지역균형 발전 기여

○ 양촌IC 신설에 따른 교통수요 반영 및 도로구조 불량 기존 2차로 도로확장으로 사회간접자본 확충 등 도로이용자, 주민 교통 불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위 치 : 논산시 연산면 신암리 ~ 양촌면 거사리 지내(지방도697호선)

○ 규 모 : L=4.2㎞, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	46,000	900	2,483	0	42,617
국 비
시 도 비	46,000	900	2,483	0	42,617
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(실시설계 중, 진도 : 5%)

○ 2012. 11. : 기본설계 및 실시설계 착수

○ 2013. 06. : 노선결정을 위한 관계기관 협의

○ 2014. 02. : 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2014. 10. : 실시설계 완료 및 보상착수

○ 2015. 03. : 공사 착수

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

장항~서천간 지방도 확포장공사

담당자

도로교통과 장경운

(☎635-4685)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서천군 장항읍 화천리~마서면 계동리를 연결하는 기방도 611호선 총 4.81㎞ 구간 중 3.45㎞구간을 기 시행 완료하고, 잔여구간에 대한 문화재 조사 등을 완료하여 사업추진이 가능함에 따라

○ 서천군 마서면 옥북리~계동리를 연결하는 1.36㎞구간을 2차로로 개설하여, 도로의 간선기능 확보, 지역주민의 편의 제공 및 지역간 균형발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 서천군 마서면 옥북리 ~ 계동리 지내(지방도611호선)

○ 규 모 : L=1.36㎞, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,835백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,835	895	600	1,000	4,340
국 비
시 도 비	6,835	895	600	1,000	4,340
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 진도 : 13%)

○ 2013. 04. : 실시설계 보완 완료

○ 2013. 07. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 공사 완료(예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

서산～창리간 지방도 확포장공사

담당자

도로교통과 장경운

(☎635-4685)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역의 관광발전과 함께 관광객 증가에 따른 교통체증 해소

○ 지방의 간선도로 기능 확보 및 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2017년

○ 위 치 : 서산시 석남동 ~ 부석면 창리 지내(지방도649호선)

○ 규 모 : L=17.94㎞, B=13.5m~21.5m(2~4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 148,172백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	148,172	29,521	12,380	8,750	97,521
국 비
시 도 비	148,172	29,521	12,380	8,750	97,521
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 진도 : 15%)

○ 2010. 06. : 실시설계 완료

○ 2010. 11. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 공사 완료(예정)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 725억원, 변경 1,482억원 (증 757억원)

○ 사업규모 변경 : 당초 L=17.5㎞, B=9.5~19.5m(2~4차로)

변경 L=17.94㎞, B=13.5~21.5m(2~4차로)

○ 변경사유 : 자전거도로 추가 확보 등 실시설계 결과 반영.(B/C : 1.32~1.25)

사업명

장고도항 방파제 및 물양장 축조공사

담당자

수산과 신동명(☎625-2774)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적·인적 피해가 많은 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인의 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 12. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 보령시 오천면 삽시도리(장고항)

○ 규 모 : 물양장145m, 방파제50m, 선양장34m, 선착장 52m, 준설및매립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,890	1,000	3,750	2,446	1,694
국 비	7,112	800	3,000	1,957	1,355
시 도 비	1,778	200	750	489	339
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2012. 12. : 공사 착공

○ 2014.  1. : 2103년분(2차분) 준공

□ 향후계획

○ 2014년분(3차분) 연내 준공추진

○ 2015년분(4차분) 시행 및 준공으로 사업마무리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 투융자심사 결과 9,300백만원 사업비 내에서 추진 중

사업명

고대도항 방파제 및 물양장 축조공사

담당자

수산과 왕창성(☎625-4140)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적·인적 피해가 많은 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인의 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 12. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 보령시 오천면 삽시도리(고대도항)

○ 규 모 : 물양장110m, 방파제237m, 선착장15m, 준설및매립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	15,331	986	3,500	5,500	5,345
국 비	12,265	789	2,800	4,400	4,276
시 도 비	3,066	197	700	1,100	1,069
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2012. 12. : 공사 착공

○ 2014.  3. : 2104년분 착공

□ 향후계획

○ 2014년분 연내 준공추진

○ 2016년분 준공으로 사업마무리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 투융자심사 결과 17,700백만원 사업비 내에서 추진 중

사업명

충남도청(내포)신도시 진입도로 개설공사

담당자

신도시개발지원과 박상돈(☎041-635-2922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남도청(내포)신도시 연계교통망 구축(방사형 순환체계)

○ 995만㎡, 계획인구 10만명 신도시의 필수 진입도로

○ 도내 1시간 이내 접근 가능토록 교통편익 제공(도청소재지 기능수행)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2015년

○ 위 치 : 홍성군 홍북면 대동리(신도시) ~ 예산군 오가면 월곡리(예산수덕사IC)

○ 규 모 : 도로개설 L=8.43㎞, B=20.5~31.3m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145,908백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	145,908	88,288	33,432	20,643	3,545
국 비	71,876	44,144	16,716	9,243	1,773
시 도 비	74,032	44,144	16,716	11,400	1,772
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 터널 개착구간 및 포장층 시공중

□ 향후계획

○ 2015.  6.  공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 변경 : 당초 142,363백만원 → 변경 145,908백만원

- 관급자재 단가변동, 가시설, 암판정 등(2014. 3.)

사업명

내포신도시 제2진입도로 개설공사

담당자

신도시개발지원과 조훈구(☎041-635-4886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남도청(내포)신도시 연계교통망 구축(방사형 순환체계)

○ 995만㎡, 계획인구 10만명 신도시의 필수 진입도로

○ 도내 1시간 이내 접근 가능토록 교통편익 제공(도청소재지 기능수행)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 이리(신도시) ~ 삽교리(국도45호)

○ 규 모 : 도로개설 L=3.43㎞, B=19.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	43,000	-	3,548	10,000	29,452
국 비	21,500	-	548	5,000	15,952
시 도 비	21,500	-	3,000	5,000	13,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계용역 추진중

○ 편입용지 손실보상업무 추진중

□ 향후계획

○ 2014.  9. 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2014. 10. 총사업비 조정협의(기획재정부)

○ 2014. 12. 시설공사 착수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경 : 당초 L=2.3㎞ → 변경 L=3.43㎞

- 2014. 1. 9. 기본 및 실시설계용역 타당성조사 결과

※ 제2서해안고속도로 및 서해선 전철 삽교역과 연계성 확보

→ 최적노선 확정 : 연장 3.43㎞, 폭 19.5m, 총사업비 440억원

사업명

태안소방서 신축

담당자

소방본부 강연식(☎5567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소방행정 환경변화에 부응하는 실용위주의 청사 신축으로 소방수요에

능동적 대처

○ 청사 신축으로 근무환경 개선과 재난대응 기관으로서 위상정립

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012년 ~ 2014년

○ 위 치 : 태안군 태안읍 장산리 290번지 외 14필지

○ 규 모 : 철근 콘크리트 3층 연면적 3,522.46㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,800		6,800
국 비
시 도 비	6,800		6,800
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 외장 공사 중

○ 2층 벽체 및 옥상 스라브 공사 중

□ 향후계획

○ 옥상 스라브 공사 마감 후 내부 마감공사

○ 2014년 하반기 준공

사업명

공주소방서 신축

담당자

소방본부 강연식(☎5567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후하고 협소한 소방서 청사를 소방환경 및 활동 등을 고려하여, 최적의       위치에 신축 국제적인 관광도시 안전 인프라 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 11 ~ 2015. 12월

○ 위 치 : 공주시 무령로 95(웅진동 260번지 일원)

○ 규 모 : 철근 콘크리트 3/1층 연면적 3,543㎡(1,073평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,200		1,000	7,200
국 비
시 도 비	8,200		1,000	7,200
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2013년 실시설계 완료 및 인허가 완료 고시

□ 향후계획

○ 2014년 건축공사 착공

○ 2015년 하반기 준공 목표

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 7,550백만원 현재 : 8,200백만원     △650백만원

○ 사업지연 및 감리비, 부대비 미 산정

사업명

보건환경연구원 청사 건립

담당자

총무과 민경주(☎041-635-6817)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민의 접근 이용 불편성 해소 등 고품질 민원 행정서비스

○ 보건환경 조사▪연구사업의 활성화로 도민의 건강증진과 쾌적한 환경

조성

○ 내포신도시의 조기 정착으로 지역균형발전 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ∼ 2016(6년)/계속비 사업

○ 위 치 : 홍성군 홍북면 내포신도시 행정타운 내

○ 규 모 : 부지 13,225㎡, 건축 8,998㎡/ 지하 1층, 지상 4층

○ 총사업비 : 28,196백만원(건축비 20,621, 부지매입비 7,575)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,196백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	28,196	700	7,617	2,500	17,379
국 비
시 도 비	28,196	700	7,617	2,500	17,379
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 청사이전 기본계획 수립              : 2010.  7. 20

○ 도유재산 관리계획변경 승인          : 2010.  9. 10

○ 지방재정 투·융자 심사 의결          : 2010. 10. 21

○ 건축설계 용역 계약체결              : 2013.  7. 26

○ 기본설계 완료                       : 2013. 10. 25

○ 실시설계 완료                       : 2014.  6. 11

□ 향후계획

○ 2014. 7∼ 8월 : 홍성군 건축협의 및 계약심사

○ 2014. 8∼ 9월 : 제1회추경 예산확보(25억원)

○ 2014. 9∼10월 : 공사계약 및 착공

○ 2016. 6월경   : 준공 및 입주

⇒ 2016년 청사이전을 목표로 행정력 집중

□ 사업변경 내역

○ 청사 건축면적 변경

- 당초 : 8,716㎡

- 변경 : 8,998㎡

- 사유 : 공용면적 등을 반영하여 확정된 면적

사업명

충남 가축위생연구소 아산지소 신축이전

담당자

방역과 정효원(☎635-7001)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아산 탕정지구 개발에 따른 기존 지소 신축 이전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 아산시 음봉면 동암리 590-1

○ 규 모 : 건물 2개동 1,999㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,690	1,000	777	4,913
국 비
시 도 비	6,690	1,000	777	4,913
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ ’13. 3월 : 이전부지 매입 및 건축설계 완료

○ ’13.10월 : 공사비 47.4억원 종합건설사업소 재배정

○ ’13.12월 : 공사계약(2,682,469천원) - 천공종합건설(천안 소재)

※ ‘13.12월 : 감리용역 계약(34,625천원) - 미래세움건축사(세종 소재)

○ ’13.12.26 : 공사 및 감리용역 착공

○ ’14.03.03 : 동절기 공사중지 해제 및 공사 재착공

○ ’14.05.07 : 정화조 설치 및 1층 바닥 작업 완료

○ ’14.05.15 : 1층 외벽 및 기둥 거푸집 설치, 임야 절개지 전석 설치

○ ’14.07.08 : 지상2층 옥상난간 타설 완료

□ 향후계획

○ ’14년말까지 완공 목표 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

11-2. 지방채 발행사업

우리 충청남도에서 ‘13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
			해당	없음

▸ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

- 해당사업 없음

11-3. 민간투자사업

우리 충청남도에서 ‘13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’12년까지 부담액	’13년 부담액	’14년 이후 부담 예정액
BTL
			해당	없음
BTO

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

- 해당사항 없음