9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

순성~당진간 지방도619호선 확포장

담당자

도로교통과 임형균(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○지방도 619호선(화성~송악)중 당진시 순성면 봉소리~송악읍 기지시리구간의 기존도로가 노폭이 협소하고 선형이 불량하여 이용자의 불편과 교통사고 위험이 상존함에 따라, 본 도로를 2차로로 확장 및 포장하여 열악한 도로상황을 개선하고, 인근 개발되고 있는 다수의 산업단지에 의해 발생되는 물동량의 효율적 처리와  지역간 접근성 강화하여 지역경제 활성화 및 지역간 균형발전에 기여함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 11. 6. ~ 2020. 2. 16.

○ 위 치 : 당진시 순성면 봉소리 ~ 송악읍 기지시리(지619호)

○ 규 모 : L=5.80km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,215	4,300	5,200	5,930	9,785
시 도 비	25,215	4,300	5,200	5,930	9,785

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 토  공 : 흙깎기 11천㎥, 흙쌓기 11천㎥, 순성토 2천㎥ 완료

○ 배수공 : 종･횡배수관 20개소(476m), 배수암거 1개소(28m) 완료

○ 부대공 : 방음벽 102m 완료

□ 향후계획

○ 공사기간 내 완공할 수 있도록 적극 공사추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	22,719,800	25,214,585	2,494,785
공 사 비	16,399,600	15,081,458	△1,318,142	･낙찰차액(토목) 반영
보 상 비	5,969,200	9,782,127	3,812,927	･감정평가 결과반영
시설부대경비	351,000	351,000

사업명

도립도서관 건립

담당자

문화정책과 임상순(☎635-2413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도 대표도서관을 건립하여 충남의 도서관 정책지원총괄 및 도민을 위한       도서관 서비스 제공으로 충남의 차별화된 특화기능 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2017

○ 위 치 : 충청남도 홍성군 홍북면·예산군 삽교읍 내포신도시 문화시설지구

○ 규 모 : 부지면적 31,146㎡, 연면적 12,249㎡, 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 54,479백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	54,479	10,491	8,573	19,829	15,586
국 비	14,080	360	112	13,608
시 도 비	40,399	10,131	8461	6,221	15,586

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2016. 7. 4. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. 22. : 공사 준공

○ 218. 3. : 개관

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
총사업비	719억원	545억원
규모	부지면적 39,441㎡ 연면적 11,823㎡	부지면적 31,146㎡ 연면적 12,249㎡

사업명

안면도관광지 개발사업

(단지내 연결도로 개설)

담당자

관광산업과 강현수(☎635-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 진입도로(북측·남측·중앙)간 연결도로 개설로 관광지내 접근성 향상과 개발촉진 유도

○ 기존 해안도로 철거예정(사구복원)으로 대체도로 기능 수행

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 태안군 안면읍 승언․중장리 일원

○ 규 모 : 단지내 연결도로 개설 L=3km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,000		200	4,400	20,400
국 비	10,000		200	1,500	8,300
시 도 비	15,000			2,900	12,100
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2015년 예산 : 800백만원(국비 400, 도비 400), 명시이월

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.8%)

○ 2016.  2. : 안면도관광지 연결도로 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2016.  7. : 설계용역 추진 중(종합건설사업소)

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2017.  1. : 편입토지 보상 착수

○ 2017.  6. : 연결도로 개설공사 발주

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

국방대진입도로(양촌～연산)지방도 확․포장

담당자

도로교통과 임형균(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법』에 따라 이전하는 국방대학교 입교로 인하여 선형이 불량하고 도로가 협소한 2차로 구간의 도로 기능제고를 위한 확·포장(4차로)을 시행사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12. 15. ~ 2020. 1. 31.

○ 위 치 : 충청남도 논산시 연산면 연산리 ~ 양촌면 거사리

○ 규 모 : L=4.2㎞, B=20.0~23.0m (도로 확·포장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,506백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	43,506	3,383	3,000	3,560	33,563
국 비
시 도 비	43,506	3,383	3,000	3,560	33,563
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 토지보상 54%(1,949건 중 1,052건 완료)

○ 현장사무실 설치 완료 및 토공 추진

□ 향후계획

○ ‘16. 12 : 토공(49,129㎥) 및 교량공(반곡교, 명암교) 시공

○ ‘17. 06 : 토지 보상 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음.

사업명

고대도항 방파제 및 물양장

담당자

수산과 왕창성(☎635-4140)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 기능시설 미비로 매년 풍랑 및 태풍 등으로 물적‧인적 피해가 많아 어려움에 처한 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012. 12. 21. ~ 2016. 12. 30.

○ 위  치 : 충청남도 보령시 어촌면 삽시도리(고대도항)

○ 규  모 : 북방파제 50m, 남방파제 187m, 물양장 110m, 선착장 15m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,992백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,992	10,393	2,631	2,968	0
국 비	12,793	8,314	2,105	2,374	-
시 도 비	3,199	2,079	526	594	-
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

○ 북방파제 및 물양장 축조공사(‘12.12월) 착수

○ 남방파제 및 선착장 축조공사(‘13.11월) 착수

□ 향후계획

○ 북방파제 및 물양장 상부공 및 부대시설 준공(‘16.12월)

○ 남방파제 및 선착장 상부공 및 부대시설 준공(‘16.12월)

□ 사업변경 내역

○ 변경사항 없음

사업명

다사항 방파제 및 물양장 축조

담당자

수산과 김성수(☎635-4139)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 기능시설 미비로 매년 뭉팡 및 태풍 등으로 물적‧인적 피해가 많아 어려움에 처한 지방어항을 정비하여 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014. 04. 22. ~ 2019. 06. 11.

○ 위  치 : 충청남도 서천군 비인면 다사리(다사항)

○ 규  모 : 방파제 55m, 이안제 150m, 물양장 263m, 호안 58m, 선양장 20m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,369백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,369	3,000	2,352	1,000	7,017
국 비	10,696	2,400	1,882	800	5,614
시 도 비	2,673	600	470	200	1,403
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 이안제 시설공사 완료(‘16.3월)

○ 방파제 시설공사 착수(‘15.6월)

□ 향후계획

○ 물양장, 호안, 선양장 등 시설공사 완료(‘19.7월)

□ 사업변경 내역

○ (사업기간변경) 당초 : 2013.9월 ~ 2017.9월(5년)

변경 : 2014.4월 ~ 2019.6월(6년)

- (사유) 행정절차 이행 등 착수지연 및 장기계속사업으로 사업예산 확보지연

사업명

충청유교문화원 건립

담당자

문화재과 김정인(☎635-2453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청(기호)유교문화 사료의 체계적 보존․연구 및 유교문화의 현대적 활용을 통한 국민윤리의식 강화에 기여코자 충청(기호) 유교문화권 개발의 선도사업으로「충청 유교문화원」건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 논산시 노성면 병사리 산41-4번지 일원(종학당 인근)

○ 규 모 : 충청유교문화원 건립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,000	3,333	667	667	23,333
국 비	8,400	1,000	200	200	7,000
시 도 비	9,800	1,166.5	233.5	233.5	8,166.5
시군구비	9,800	1,166.5	233.5	233.5	8,166.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2015. 06. : 논산시, 충남개발공사 간 사업추진 협약 체결

○ 2015. 09. : 충청유교문화원 입지선정

○ 2015. 11. : 충청유교문화원 운영계획 및 설계지침 수립 용역 착수

○ 2015. 12. : 도시관리계획 결정(변경)용역 착수

○ 2016.  2. : 문화재지표조사, 전략환경영향평가 용역 착수

□ 향후계획

○ 2016. 08. : 건축공사 설계공모

○ 2016. 11. : 건축공사 기본 및 실시설계 용역

○ 2017. 11. : 건축공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

장항~서천간 지방도 611호선 확․포장

담당자

도로교통과 임형균(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 서천군 마서면 옥북리 ～ 계동리를 연결하는 1.36km구간을 2차로로 개설하여, 도로의 간선기능 확보, 지역주민의 편의 제공 및 지역간 균형발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 7. 5. ~ 2017. 5. 2.

○ 위 치 : 서천군 마서면 옥북리 ~계동리(지611호)

○ 규 모 : L=1.36km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,226	2,495	2,000	2,340	391
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,226	2,495	2,000	2,340	391

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 69%)

○토    공 : 흙깍기 6.4만㎥ 중 5.5만㎥, 흙쌓기 10.2만㎥ 8.1만㎥ 추진 중

○배 수 공 : 암거 3개소 시공완료, 배수관 816m중 816m설치

□ 향후계획

○ 2017. 5 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	7,144,300	7,226,208	81,908
공 사 비	6,514,000	6,306,218	△ 207,782	･ 낙찰차액 감 조정
보 상 비	609,300	898,990	289,690	･ 감정평가결과 반영
시설부대경비	21,000	21,000

사업명

청양소방서 신축이전

담당자

소방행정과 정해근(☎635-5565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 산간내륙지역으로 낙후, 교통안전지수 전국 최하위권

⇀ 소방서 미설치 지역에 대한 균형있는 소방행정 서비스 제공

○ 노령인구 등 안전사고에 대한 안전 인프라 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 충청남도 청양군 청양읍 송방리 364-4번지 일원

○ 규 모 : 소방서 부지 7,543㎡, 연면적 3,476㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,843백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,843		300	7,543
국 비	4,200			4,200
시 도 비	3,643		300	3,343
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건축설계 의뢰(종합건설사업소)               : ’15. 4월

○ 설계공모 및 설계용역 계약(김양희건축사사무소)  : ’15. 10월

○ 건축설계 납품                               : ’16. 3월

○ 일상감사 및 계약심사                       : ’16. 5. 16.

○ 건축공사 입찰 및 낙찰자 선정, 착공         : ’16. 6. 14. / ’16. 6. 14.

□ 향후계획

○ ’17. 하반기 청사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초) 3,100㎡ → (현재) 3,476㎡

○ 사업예산 : (당초) 7,100백만원 → (현재) 7,843백만원

사업명

내포신도시 제2진입도로 개설

담당자

신도시개발과 신동명(☎635-4889)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남도청이 이전한 내포신도시의 도내 1시간대 이동 가능한 광역교통망

확충 및 편리한 도로교통 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 충남 예산군 삽교읍 이리 ~ 삽교리

○ 규 모 : 도로개설 L=3.4㎞(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,022백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	42,022	1,412	7,808	25,553	7,249
국 비	21,011	639	4,405	12,342	3,625
시 도 비	21,011	773	3,403	13,211	3,624

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2015. 10. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	총사업비	사업규모	사업기간	비 고
당 초	43,000	도로개설 L=2.3㎞	2013 ~ 2016
변 경	42,022	도로개설 L=3.4㎞	2013 ~ 2018

사업명

보건환경연구원 청사 건립

담당자

총무과 황선필(☎635-6811)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신청사 이전으로 쾌적한 환경에서 검사 및 연구업무를 합리적으로 운영

○ 지역밀착형 보건․환경 민원서비스로 주민 삶의 질 향상 및 환경보전의

필요성 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내포신도시 행정타운 내(공공청사 9)

❍ 공사기간 :  2013년 ∼ 2016년 (18개월) / 계속비사업

❍ 사 업 비 :  282억원(토지비 76, 건축비 189, 설계비 7, 감리비 10)

❍ 사업규모 : 부지면적 13,225㎡, 연면적 8,998㎡ (지하1층 / 지상 4층)

❍ 사업시행 주체 : 충청남도(보건환경연구원)

❍ 시공방법 : 충남개발공사에서 대행 사업으로 시행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,196백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,196	10,817	8,000	9,379	-
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	26,196	8,817	8,000	9,379	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업명	보건환경연구원 청사 건립	담당자	총무과 황선필(☎635-6811)
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%) ○ 연구원 청사이전 기본계획 수립 : 2010. 7. 20. ○ 도 공유재산 심의회 의결 : 2010. 8. 19 / 도의회 의결 : 2010. 9. 16. ○ 도 지방재정 투융자 심사 의결 : 2010. 10. 21. ○ 연구원 청사부지 매입 계약(충남개발공사) : 2011. 1. 21. ○ 청사이전 건립 협약 체결(도-충남개발공사) : 2013. 2. 25. ○ 건축설계 공모 당선작 선정(디엔비건축+디에스그룹) : 2013. 5. 22. ○ 연구원 청사이전 추진계획 변경 : 2013. 2. 19. ○ 도유재산 관리계획 변경 의결(도의회) : 2013. 4. 18. ○ 건축설계용역 계약 체결 : 2013. 7. 26. ○ 건축 기본설계 심의 및 건축 기본설계 완료 : 2013. 10. 25. ○ 도 경관디자인위원회 경관 심의 : 2013.12월/실시설계 완료 : 2014.7.30. ○ 건축공사 계약체결 : 2014. 12. 15. - 시공업체 : ㈜발해(세종시 금남면 소재) - 계약금액 : 87억원(총액입찰 101억원의 86.1%) - 계약기간 : 2014. 12. 16 ~ 2016. 6. 15(18개월) ○ 신청사 기공식 개최 : 2015. 3. 25. ○ 골조공사 완료 : 2015. 9월 ○ 내부조적 및 미장공사 완료 : 2015. 12월 □ 향후계획 ○ 외부마감공사 완료 : 2016. 2월 ○ 내부마감(칸막이, 천정․바닥공사 등) 완료 : 2016. 5월 ○ 각종 시설물 시운전 실시 : 2016. 6월 ○ 청사준공 및 준공검사 : 2016. 6. 15. ~ 6. 30. ○ 준공검사 서류 인수인계 : 2016. 7. 1 ~ 7. 15. ○ 신청사 이사 : 2016. 7. 18. ~ 7. 29.

사업명

수소충전소 및 자동차 보급

담당자

전략산업과 이구주(☎635-2254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수소자동차 공공기관 시범보급으로 온실가스 감축 및 확대보급 선도

○ 수소자동차 수요전망에 따른 양산체계 구축 유도로 산업 경쟁력 확보 및

국가적 핵심 산업 육성

○ 지구온난화 및 온실가스 배출 억제를 위한 자동차 분야 규제 강화에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2015년

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북면 신경리 146-30, 내포 수소충전소

○ 규 모 : 수소충전소 1기, 수소차 18대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,332백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,332	1,552	4,380	200	200
국 비	1,923	0	1,923	0	0
시 도 비	4,409	1,552	2,457	200	200
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ (’15. 9.) 수소충전소(1기, 1,650㎡) 준공 및 수소차(17대 / 道) 구입

○ (’15. 12.) 수소차(1대 / 충남테크노파크) 구입

□ 향후계획

○ 내포 수소충전소 정상운영을 위한 운영비(도비 100%) 매년 2억원 지원

○ 정부의 수소 판매가격 확정에 따른 내포 수소충전소 상용화 전환 추진

□ 사업변경 내역

○「수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 육성」예타 사업(충전소 5기,

실증차량 150대)으로 전환 · 추진하고자 본 사업 축소

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	204.6억원	63.3억원	(△141.3억원)
기 간	2014 ～ 2018년(5년간)	2014 ~ 2015년(2년간)	(△3년)
규 모	수소충전소 2기, 수소차 71대	수소충전소 1 , 수소차 18대	수소충전소(△1기) 수소차(△53대)

사업명

자동차 의장·전장 고감성시스템

개발

담당자

전략산업과 조정원(☎635-3448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차 구매 요소가 성능에서 감성으로 변화함에 따라, 고감성 부품개발

필요 증대. 도내 자동차 관련 산업기반을 바탕으로 고감성 신시장 개척

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년(4년간)

○ 위치/수행 : (재)충남테크노파크 자동차센터

○ 전 담 : 한국산업기술진흥원

○ 규 모 : 장비 12종, 기술개발 20개, 기업지원 100건(공정합리화지원 20,

통합지원 80), 인력양성 100명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	35,000	3,000	11,800	11,850	8,350
국 비	14,000	1,000	4,000	6,000	3,000
시 도 비	21,000	2,000	7,800	5,850	5,350
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

※국비 집행액 : 전담기관 평가관리비 포함(기투자 50백만원, ’15년 160백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42.3%)

○ (~ ’15. 11.) 1차년도 사업(’14. 11. ~ ’15. 10.) 추진성과 분석 및 정산

- 장비 1종, 제조현장 공정 합리화 등 기업지원 35업체, 시트분야 교육 29명,

R&D과제 6개(2년 - 2개, 3년 - 4개)

○ (~ ’16. 10.) 2차년도 사업 협약체결 및 사업추진

- 장비 3종, 기업지원 26업체, 공조부품 분야 교육 20명, R&D과제 16개(신규 10,

계속 6)

□ 향후계획

○ (’16. 11. ~ ’17. 10.) 3차년도 사업 협약체결 및 사업추진

- 장비 5종, 기업지원 26업체, 내외장재 부품분야 교육 20명, R&D과제 10개(계속)

○ (’17. 11. ~ ’18. 10.) 4차년도 사업 협약체결 및 사업추진

- 장비 6종, 기업지원 24업체, 전기전자분야 교육 20명, R&D과제 4개(계속)

사업명

자동차 주행안전 동력전달

핵심부품 개발

담당자

전략산업과 조정원(☎635-3448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주행성능 고도화를 위한 기술개발 및 기반조성으로 동력전달 핵심부품

산업 클러스터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018년(4년간)

○ 위치/수행 : (재)충남테크노파크 자동차센터

○ 규 모 : 기술개발(12건), 신뢰성센터 건립(1동), 연구장비(8종), 기업지원(100건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,380	0	4,650	10,250	13,480
국 비	17,080	0	2,000	5,400	9,680
시 도 비	9,600	0	2,400	4,250	2,950
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,700	0	250	600	850

※ 국비 집행액 : 전담기관의 평가관리비 포함(’15년 : 80백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16.4%)

○ (’15. 11. ~ ’16. 10.) 1차년도 협약체결 및 사업추진

- 센터 부지기반 조성 및 건축설계, 장비 1종, 기업지원 26건, 인력양성 66명,

R&D과제 5개(충남 4, 세종 1)

□ 향후계획

○ (‘16. 11. ~ ‘17. 10.) 2차년도 협약체결 및 사업추진

- 센터 준공, 장비 5종, 기업지원 30건, 인력양성 120명, R&D과제(계속)

○ (‘17. 11. ~ ‘18. 10.) 3차년도 협약체결 및 사업추진

- 장비 2종, 기업지원 15건, 인력양성 120명, R&D과제(계속, 신규)

○ (‘18. 11. ~ ‘19. 10.) 4차년도 협약체결 및 사업추진

- 기업지원 45건, 인력양성 140명, R&D과제(계속, 신규)

사업명

아산소방서 신축이전

담당자

소방행정과 정해근(☎635-5565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신도시 건설 및 산업시설의 증가에 따른 소방수요 급증과 소방조직 확대

○ 노후하고 협소한 소방청사로 훈련장 부재, 사무 및 장비보관장소 부족

○ 심한 진동에 따른 건물안전진단 결과 C등급 판정으로 증·개축불가

○ 국도 21호 우회도로 확장으로 소방차 진출입시 교통사고 위험 상존

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 충청남도 아산시 모종동 210번지 일원(2필지)

○ 규 모 : 소방서 부지 6,750㎡, 연면적 3,641㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,343백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,343		300	2,400	5,643
국 비
시 도 비	8,343		300	2,400	5,643
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 설계 의뢰(종합건설사업소)            : ’15. 4월

○ 공유재산(신축부지) 교환 완료(도↔시)  : ’15. 6월

○ 설계 용역계약(디에스그룹)             : ’15. 10월

○ 건축비 일부 확보(2,400백만원)         : ’16년도 본예산

○ 건축설계 납품                        : ’16. 3월

□ 향후계획

○ 일상감사 및 계약심사                 : ’16. 8월

○ 건축공사 계약 및 착공                : ’16. 9월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초) 3,100㎡ → (현재) 3,476㎡

○ 사업예산 : (당초) 7,600백만원 → (현재) 8,343백만원

사업명

충남도립대학교 기숙사 증축

담당자

사무국 안동수(☎635-6620)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반 아파트를 매입‧활용하고 있는 기존 기숙사는 학교와 멀리 떨어져

있고 1호에 4명이 거주하는 등 학생이용에 매우 불편

○ 대학 내 신축도서관 옆 부지에 신규 기숙사 건립 학생 불편사항 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년~2018년

○ 위 치 : 청양군 청양읍 학사길 55(충남도립대학교 학교부지 내)

○ 규 모 : 지상4층 연면적 5,000㎡, 150호실 300명 수용(2일 1실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,098백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,099	57	143	397	9,502
국 비
시 도 비	10,099	57	143	397	9,502
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014년 9월 : 타당성조사 및 지방재정투융자심사

○ 2015년 6월 : 도의회 공유재산 관리계획 승인

○ 2016년 3월 : 충청남도 종합건설사업소 사업의뢰 및 예산재배정

○ 2016년 7월 : 설계공모 건축사 및 건축계획안 선정 건축설계 추진

□ 향후계획

○ 2016년 연내 설계완료 및 건축인허가 득, 2017년 본예산 시설비 확보

○ 2017년 공사착수 2018년 준공 및 개관

사업명

웰니스 스파 임상지원센터 구축

담당자

전략산업과 임채성(☎635-3449)

□ 사업목적 및 필요성

○ 웰니스 스파 종합지원체계 구축을 통한 신산업 창출

- 스파·뷰티·헬스케어 및 관련 산업 융·복합화를 통한 창초경제 실현

○ 온천수의 각종 질환 치료효능에 관한 분석적 데이터 부족 및 국내 과학연구

미진, 온천의학 연구 활용 산업화 모델 개발을 위한 인프라 확충 · 확대 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 12. 1. ~ 2017. 11. 30.(3년간)

○ 위 치 : 충남 천안시 성남면 용원리 716번지

○ 규 모 : 지하1층, 지상2층(연면적 1,794.36㎡)

○ 주 관 : (재)충남테크노파크 바이오센터

○ 참 여 : 단국대, 단국대병원, 대전대 천안한방병원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,875백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,875	0	6,034.5	4,347	5,493.5
국 비	5,134		1,000	1,975	2,159
시 도 비	3,500		1,487.5	525	1,487.5
시군구비	3,500		500	1,500	1,500
지 방 채	0
민간자본	3,741		3,047	347	347
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ (’15. 2.) 스파 전문인력 39명 양성

○ (’15. 8.) 센터 건축부지 매입 완료

○ (’15. 11.) 양/한방 임상평가 장비 구축(40종 55대)

○ 웰니스 스파 개념설계(’15. 11.) 및 실시설계(’16. 4.) 완료

□ 향후계획

○ 센터 신축건물(시공), 장비(49종), 기업지원(10건)

○ 임상평가 프로토콜 개발(10건), 임상평가지원(2건)

○ 전문인력 양성(36명), 수중운동 교육과정 운영(60명)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 건축 연면적 축소, (당초) 1,980㎡ → (변경) 1,794.36㎡

※예정된 건축비(3,000백만원) 고려, 최적의 설계(안) 반영

○ 총사업비 : (당초) 16,741백만원 → (변경) 15,875백만원

※국비(장비비) 축소 : (당초) 6,000백만원 → (변경) 5,134백만원, △866백만원

사업명

충남 친환경농업연구센터 조성

담당자

농업환경과 한광섭(☎635-6111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남을 친환경농업도로 육성

○ 충남 친환경농업 조기확산 및 Control Tower역할

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015∼2017(3년)

○ 위 치 : 충남 예산군 신암면 종경리 추사로 167(농업기술원 내)

○ 규 모 : 4,500m2(연구동 및 부대시설), 비닐하우스 신축, 첨단장비 및 비품구입 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,000	-	1,000	3,000	6,000
국 비	5,000	-	500	1,500	3,000
시 도 비	5,000	-	500	1,500	3,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 행정적, 법적 절차 완료(진도 100%)

○ 친환경 비닐하우스 완공 : 1,680m2(6개동)(진도 100%)

○ 친환경농업연구센터 연구동 신축 : 기본 및 실시설계 중(진도 15%)

□ 향후계획

○ 연구동 신축 건축설계 완료 : 2016. 10.

○ 연구동 신축 착공 : 2016. 11.

○ 연구동 완공 : 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음