9. 주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 도에서 2015년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척 률
계	404,877	54,233	69,039	281,635			34.14
순성~당진간 지방도619호선 확포장	25,215	4,300	5,200	15,715	2020	2010	15
도립도서관 건립	54,479	10,491	8,573	35,415	2017	2012	10
안면도관광지 개발(단지내 연결도로 개설)	25,000	-	200	24,800	2018	2012	0.8
국방대진입도로 (양촌~연산) 지방도 확포장	43,506	3,383	3,000	37,123	2020	2012	10
고대도항 방파제 및 물양장	15,992	10,393	2,631	2,968	2016	2012	81
다사항 방파제 및 물양장 축조	13,369	3,000	2,352	8,017	2019	2012	40
충청유교문화원 건립	28,000	3,333	667	24,000	2018	2013	12
장항~서천간 지방도611호 확포장	7,226	2,495	2,000	2,731	2017	2013	69
청양소방서 신축	7,843	-	300	7,573	2017	2013	30
내포신도시 제2진입도로 개설	42,022	1,412	7,808	32,802	2018	2013	10
보건환경연구원 청사 건립	28,196	10,817	8,000	9,379	2,016	2013	75
수소충전소 및 자동차 보급	6,332	1,552	4,380	400	2015	2014	100
자동차 의장·전장 고감성시스템 개발	35,000	3,000	11,800	20,200	2017	2014	42.3
자동차 주행안전 동력전달 핵심부품 개발	28,380	-	4,650	23,730	2018	2014	16.4
아산소방서 신축이전	8,343	-	300	80,43	2017	2014	30
충남도립대학교 기숙사 증축	10,099	57	143	9,899	2018	2014	10
웰니스 스파 임상지원센터 구축	15,875	-	6,035	9,840	2017	2015	48
친환경농업연구센터 조성	10,000	-	1,000	9,000	2017	2015	15

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

◈ 9-1-1 개별 투자심사 사업 추진현황 (별지10)

9-2. 지방채 발행사업

우리 도에서 2015년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

9-3. 민간투자사업

우리 도에서 2015년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	공주의료원 신축이전사업	공주메디컬센 터 (주)	53,087	0	0	86,800	20년 (2016~ 2036)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

☞ 공주의료원 신축이전사업은 530억원을 투자하여 2016. 9월 준공을 목표로 추진 중으로, 민간사업자에게 운영기간 20년(2016~2036) 동안 임대료 총 852억원을 지급해야 함(연간 국․도비 각 21억원 부담)

향후 20년간 민간사업자에게 지급해야 할 임대료 부담이 크지만, 최근 메르스 사태 이후 지역 공공 의료기관의 역할이 커지고 지역주민에게 양질의 공공 의료 서비스를 제공하기 위해 반드시 추진해야 할 사업임

◈ 9-3-1 개별 민간투자사업 현황 (별지11)