10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

웰에이징 진단기술 및 기기개발

담당자

산업육성과 이초희(☎635-3930)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계적인 고령화 사회 진입 추세에 따른 웰에이징 산업 육성 필요

○ 진단기술 및 건강기능식품 소재개발 기반조성으로 사업화 발굴

* 웰에이징(Well aging, 건강노화) : 적극적 노화 예방·관리로 건강수명 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 11월 ~ 2019. 10월

○ 위 치 : 충남 천안시 서북구 직산읍 삼은리(충남 TP 성공관)

○ 규 모 : 495㎡(건강기능식품 시험생산 시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	1,600	1,800	2,600
국 비	4,000	-	1,000	1,200	1,800
시 도 비	1,500	-	400	500	600
민 자	500	-	200	100	200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 웰에이징 소재개발 지원센터 개념설계(’16. 9.) 및 실시설계 완료(’16. 12.)

○ 기업지원 및 인력양성

- 인허가 컨설팅 지원, 바이오진단마커 발굴, 유효성 평가, 품질관리·장비활용 교육 등

□ 향후계획

○ 웰에이징 소재개발 지원센터 전용공간 리모델링 착공 및 건축공사 완료

○ 웰에이징 소재개발 시험생산장비 구축

○ 기업지원 및 인력양성 등 기업지원(계속)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	60,000,000	60,000,000	-
시설구축	6,500,000	6,500,000	-
장비구축	19,900,000	19,900,000	-
기업지원	7,200,000	7,200,000	-
공정개발	26,400,000	26,400,000	-

사업명

수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 육성 사업

담당자

산업육성과 이구주(☎635-2933)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 자동차업체의 수소차 상용화 개발 박차 등 주도권 경쟁 가속화

- 한국이 세계 최초 양산(’13년)하였으나 도요타(일본) 등 글로벌 완성차 맹추격

※ 한국(현대-’13), 일본(토요타-’14, 혼다-’16), 독일(다임러-’17, BMW-’20), 미국(GM-’20)

○ 생산원가 절감 및 수소연료전지차 등 친환경차 기술개발 기반구축 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 충남 예산군 / 천안시

○ 규 모 : 부품기술개발(18개), 센터(1개소), 장비(14종), 인력양성(180명), 기업지원(20건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70,782백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	70,782	-	-	10,247	60,535
국 비	34,874	-	-	5,000	29,874
시 도 비	21,208	-	-	2,747	18,461
민간자본	14,700	-	-	2,500	12,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ (’16. 8.) 기재부 예비타당성조사 최종 통과 : 5년 간 708억원

○ (’16. 12.) ’17년(1차년) 국비 50억원, 도비 22.47억원 확보

○ (’17. 3.) 산업부(KIAT) 사업공고 → 사업계획(R&D, 기반) 제출

※ R&D과제 12개, 기반조성과제 1개

○ (’17. 5.) 도비 5억원 1회추경 요구

○ (’17. 6.) 충남도․전담기관․충남TP․자부연 전자협약 체결

□ 향후계획

○ 주관기관(충남TP)의 사업비(출연금) 교부 요청에 따라 도비(27.47억원) 지급

※ 국비는 국가직접지원

○ (’17년) R&D과제 12개 추진, 센터 부지 조성 및 설계, 인력양성(90명), 기업지원(10건)

○ (’18년) R&D과제 17개(계속 12, 신규 5), 센터 착공, 인력양성(90명), 기업지원(10건)

○ (’19년) R&D과제 18개(계속 17, 신규 1), 센터 완공, 장비(14종) 구축

○ (’20년~’21년) R&D과제 18개, 센터 및 장비 정상 운영

□ 사업변경 내역

○ 행정자치부는 투자심사 시 예산군에서 현물로 무상 지원하는 센터 부지(5억원 규모)를 총사업비에 포함하여 심사함.

○ 예비타당성조사 수행기관(KISEP)은 예산군이 무상 지원하는 부지(5억원 규모)를 총사업비에 포함하지 않고 최종결과 도출

○ 산업부(KIAT) 사업공고 후 기반조성 과제를 심사․평가 하면서 총사업비 변동없이 지방비를 활용해 2년 간 인력양성과 기업지원 추가 요청하여 사업 규모를 변경(인력양성, 기업지원 추가)

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	713억원	708억원	(△5억원)
기 간	2017년 ～ 2021년(5년간)	2017년 ~ 2021년(5년간)	-
규 모	부품기술개발(18개), 센터(1개소), 장비(14종)	부품기술개발(18개), 센터(1개소), 장비(14종), 인력양성(180명), 기업지원(20건)	인력양성(+180명), 기업지원(+20건)

사업명

융․복합 디스플레이 소재부품 허브구축

담당자

산업육성과 김형수(☎635-3928)

□ 사업목적 및 필요성

○ 타 산업과 연관, 새로운 응용분야 융합을 통해 다양한 제품형태로 발전하는 등 고부가가치 시장창출 유망

- 단순 사업간 조합이 아닌 이종산업 간의 시너지 창출로 미래 디스플레이 산업 선도

○ 충남의 대표 주력산업인 디스플레이 밀 자동차산업의 동반성장

- 차세대 디스플레이 선도기술 개발로 세계 최고의 디스플레이산업 메카로 육성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017~2020년(4년)

○ 위  치 : 충남테크노파크 디스플레이센터 內(아산시 음봉면)

○ 사업량 : 소재부품 핵심기술개발, 평가․인증 기반구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,000	-	-	3,000	15,000
국비	10,000	-	-	2,000	8,000
시 도 비	8,000	-	-	1,000	7,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘15. 5.~ 8. : 정부 연구개발 투자 정책에 맞추어 과제 발굴 및 사업기획

○ ‘15. 9.~ 12. : ‘17년 지역거점 지원사업(산업부) 신규과제 신청 및 선정

○ ‘16. 5.~ ‘17. 3. : 1차년도 R&D과제 수행(국20억, 도10억), 협약체결(‘17.3.)

○ ‘17. 5. : 도비출연금 교부(도10억)

□ 향후계획

○ 2차년도 융․복합핵심기술개발, 평가 인증 분야 국비 증액 및 확보 대응(‘17.6.~)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	18,000,000	-	-
R&D	6,000,000	-	-
장비구축	9,000,000	-	-
기타	3,000,000	-	-

사업명

기지시~한진(지619호) 지방도 확포장사업

담당자

도로교통과 박상용(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 서북부지역 산업물동량 증가에 따른 사회기반시설 구축

○ 황해경제자유구역 해제에 따른 지역경제활성화 불균형 해소

○ 지역간 연계교통망 조기 구축을 통한 지역경제활성화 및 관광객 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2024

○ 위 치 : 충남 당진시 송악읍 기지시리~한진리 일원

○ 규 모 : 도로 신설 및 확장(L=9.6km, B=18.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 143,171백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	143,171	-	-	500	142,671
시 도 비	143,171	-	-	500	142,671

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.3%)

○ ‘16. 08. : 2016년 제4차 지방재정 투자심사 완료

○ ‘17. 03. : 기본 및 실시설계용역 발주

○ ‘17. 04. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

□ 향후계획

○ ‘19. 10. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ ‘19. 12. : 보상 착수

○ ‘21.  3. : 공사 착공

○ ‘24. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	143,171,000	-	-
공 사 비	75,508,000	-	-
보 상 비	46,822,000	-	-
시설부대경비	20,841,000	-	-

사업명

어천∼공주(4차) 지방도 확‧포장사업

담당자

도로교통과 박상용(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사 유적지구의 세계문화유산 등재에 따른 관광지 인프라 구축

○ 지방도625호선(세도~우성) 미개통구간의 도로개설로 공주시 우성면 보흥리와 평목리를 연결하는 연결로 개설로 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2022

○ 위 치 : 공주시 우성면 보흥리 ~ 우성면 평목리(지625호)

○ 규 모 : L=3.95km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	24,500	-	530	600	23,370
시 도 비	24,500	-	530	600	23,370

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.6%)

○ '13. 2.  : 제2차 충청남도 도로정비 기본계획(2011~2020) 반영

○ '16. 6.  : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '17. 1.  : 노선 확정 및 관계기관 협의 추진

□ 향후계획

○ 기술자문위원회 개최 추진 및 관계기관 협의

○ '18. 3월 도로구역 결정 및 실시설계 완료

○ '18년 공사 착수를 목표로 용역 발주 및 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	24,500,000	-	-	-
공 사 비	15,700,000	-	-	-
보 상 비	7,931,000	-	-	-
시설부대경비	869,000	-	-	-

사업명

오천 우회도로 개설사업

담당자

도로교통과 박상용(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오천항, 갈매못 순교성지 등과 연계한 해안관광도로 인프라 구축

○ 보령화력, 영보일반산업단지 등의 산업인프라 구축 등을 위해 시설기준 미달도로(지방도610호)의 개선 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 보령시 오천면 영보리 ~ 오천면 소성리(지610호)

○ 규 모 : L=3.95km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,300	-	300	500	14,500
시 도 비	15,300	-	300	500	14,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.2%)

○ '13. 2. : 제2차 충청남도 도로정비 기본계획(2011~2020) 반영

○ '16. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '17. 5.  : 노선 확정 및 관계기관 협의 추진

□ 향후계획

○ 기술자문위원회 개최 추진 및 관계기관 협의

○ '18. 3월 도로구역 결정 및 실시설계 완료

○ '18년 공사 착수를 목표로 용역 발주 및 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	15,300,000	-	-	-
공 사 비	10,410,000	-	-	-
보 상 비	4,000,000	-	-	-
시설부대경비	890,000	-	-	-

사업명

서울충남학사 건립

담당자

교육법무담당관실

김태복(☎635-2142)

□ 사업목적 및 필요성

충남도 출신 서울 소재 대학생들의 정주여건 개선, 도민의 학비부담 경감, 지역 인재의 질적 향상, 지역 정체성 함양 및 애향심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 08 ~ 2019. 9

○ 위 치 : 서울시 구로구 오류동 25-10일원(2,926㎡, 886평)

○ 규 모 : 연면적 약 6,803㎡, 지하1층~지상10층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	25,000		8,338	1,560	15,102
시 도 비	25,000		8,338	1,560	15,102

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 서울충남학사 건립후보지 최종선정 및 부지 일부매입

- 구로구 오류동 25-10번지 등 8필지(2,926㎡), 시장재개발지구

※ 부지현황 : 사업부지 2,926㎡(120억 예정) 중 2,149㎡(84.24억원) 일부매입

○  건축설계공모 당선작 선정(’17. 1, 한빛엔지니어링)

○  건축설계용역 계약체결(’17. 4, 용역기간 6개월)

○ 2회 자문회의 개최 및 3회에 걸쳐 총괄기획가(MP) 자문의견

□ 향후계획

○ 건립예정 인접부지(25-17, 25-1, 39-1) 매수 검토

○  축설계용역 준공, 공사입찰 및 계약체결(’17. 11 ∼’18. 2)

○ 건축공사 준공,  시설물 인계 및 학사생 입주(’19. 7 ∼’19. 9)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

백사장항 물양장 및 호안 건설

담당자

수산자원과 오승훈((☎635-2774)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 기본시설 정비로 지역 연안어업의 근거지 마련하여 어업활도 도모

○ 태풍 및 풍랑 등 자연재해로부터 어민들의 재산(어선 등)을 보호

○ 어선의 안전정박 및 어획물의 신속한 양육으로 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.07. ~ 2020.12.

○ 위 치 : 태안군 안면읍 창기리, 남면 신온리 일원(백사장항)

○ 규 모 : 선착장 60m, 물양장 및 호안 518m, 준설‧매립‧지반개량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,100	0	1,000	4,000	13,100
국비	14,400	0	800	3,200	10,480
시 도 비	3,700	0	200	800	2,620

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 드르니항 시설축조공사 착공(‘16.07월)

○ 백사장항 시설축조공사 착공(‘16.11월)

○ 멸종위기생물(흰발농게) 발견으로 공사 중지(‘16.11월)

○ 멸종위기생물(흰발농게) 포획이주 용역 추진(‘17.03월)

※ 흰발농게는 야생생물보호법에 따른 멸종위기 Ⅱ급 생물로 법종 보호종

보호를 위해 포획이주를 실시, 환경청 협의 후 처리방안 최종 수립

□ 향후계획

○ 멸종위기 생물 발견 및 분포에 따라 환경영향예측에 대한 관계기관 협의

- 보전방안 및 환경영향저감방안 수립 검토

○ 환경영향에 대한 협의 후 공사 재착공

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명

천안의료원 시설확충 사업

(포괄 및 감염격리병동, 간호기숙사 증축)

담당자

보건정책과 김연경(☎635-4316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노령화로 노인성 질환 및 만성질환 증가로 인한 간호·간병 통합서비스 수요 충족하기 위해 천안의료원 포괄병동 등 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년 7월(3년)

○ 위 치 : 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 41-13

○ 규 모 : 5층 수직 증축면적 3,997.44㎡

- 포괄(재활병동) 68병상, 감염격리 6병상, 간호기숙사 15실(30명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,400백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,400	0	4,756	5,644	0
국 비	5,200	0	2,378	2,822	0
시 도 비	5,200	0	2,378	2,822	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2017.  4. : 실시설계 심의 완료

○ 2017.  7. : 공사착공(8.10.부터 공사 개시)

□ 향후계획

○ 2018.  7. : 준공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정 및 사업변경 내역

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	사업변경 내역
총사업비	11,001,183	10,400,000	-601,183
공 사 비	10,191,000	9,600,000	-591,000	- 공조실 1개 존치 - E.V실 수직 연결 (지하1층→5층 : 4대 신설)
보 상 비	0	0	0
시설부대경비	810,183	800,000	-10,183

사업명

2020 계룡세계군문화엑스포

담당자

관광마케팅과 김재환(☎635-2446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계유일의 분단국이며, 3군 본부가 위치한 계룡시에서 민족상잔의

아픔을 세계인류평화 승화의 場으로 활용하기 위한 국제행사 개최

- 대한민국 위상 및 참전국에 대한 보은의 기회 마련, 호국·안보 교육의

장으로 활용, 계룡시 중심의 국방클러스터 조성 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 10.(10일간)

○ 위 치 : 충남 계룡시 일원(비상활주로, 계룡시내 일원)

○ 규 모 : 5개 주제전시관, 공연, 체험 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,800	-	-	2,500	7,300
국 비	2,800	-	-	500	2,300
시 도 비	2,000	-	-	1,000	1,000
시 군 비	2,000	-	-	1,000	1,000
기 타	3,000	-	-	-	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2016. 8. 5. : 국제행사 심사 승인(기획재정부)

○ 2017. 3. 2. : 지방재정 투자심사 승인(행정자치부, 조건부)

○ 2017. 6. 7. : (재)계룡세계군문화엑스포조직위원회 구성 방침 결정

○ 2017. 7. 19. : (재)계룡세계군문화엑스포조직위원회 법인 설립 허가

□ 향후계획

○ 2017. 8. : (재)계룡세계군문화엑스포조직위원회 법인 등기

○ 2017. 12. : 유관기관(국방부, 국가보훈처) 협조체계(MOU) 구축

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

계룡소방서 청사 신축

담당자

소방행정과 정해근(☎635-5565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증가하는 소방 수요 대응 및 재난현장 골든타임 확보 등 안전충남

구현을 위해 신설된 계룡소방서의 청사 신축

○ 도민 안전 컨트롤 타워로서의 기능과 역할 공간 창출로 소방서비스       혜택 확대와 소방수요에 대한 효율적인 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019년

○ 위 치 : 충청남도 계룡시 엄사면 유동리 283번지 일원

○ 규 모 : 소방서 부지 12,128㎡, 연면적 3,410㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,086			400	7,656
국 비
시 도 비	8,086			400	7,656
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’17. 2. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ ’17. 2. 16. : 공공건축 사업계획 사전검토(도시건축공간연구소)

○ ’17. 4.  3. : 공유재산 관리계획 도의회 승인

□ 향후계획

○ ’17. 하반기 : 기본 및 실시설계 용역 계약

○ ’18. 하반기 : 공사계약 및 착공

○ ’19. 하반기 : 청사 준공

□ 사업변경 내역

○ 부지면적 : (당초) 13,793㎡ → (현재) 12,128㎡

사업명

안면도 지방정원 조성

담당자

산림자원연구소 신숙(☎635-7296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 휴양림·수목원과 통합 운영함으로써 특화된 산림휴양 관광단지 조성

○ 지방정원 조성으로 국민의 복리증진 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016∼2019(4년)

○ 위 치 : 충남 태안군 안면읍 중장리 산14-207번지 일원

○ 규 모 : 18ha(주제정원3개소, 모델정원1개소, 체험시설1개소, 편익시설5개소 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,400	7,400	-	300	5,700
국 비	3,000	-	-	150	2,850
시 도 비	10,400	7,400	-	150	2,850

※ 기투자액 : 토지매입비(도유지활용으로 공시지가 산출액)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 지방정원 조성 관련 기본설계 : ’16.6.21. ~ ’16.10.18.

○ 지방정원 조성 관련 실시설계 :  ’16.12.6. ~ ’17.7월 중

□ 향후계획

○ 지방정원설계 완료 : ’17. 7.

○ 지방정원 조성사업 일상감사 및 계약심사 : ’17. 8.

○ 지방정원 조성사업 발주 의뢰 : ’17. 9.

○ 지방정원 조성사업 착수 : ’17. 10.

○ 1단계(2017년 ~ 2019년) 지방정원 사업추진

- 기반시설 및 테마·치유정원 등 조성

○ 2단계 (2020년) 지방정원 사업추진(계속)

- 가든센터 및 주제정원(비제원, 소화원), 주차장 등 조성

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

(가칭)내포혁신플랫폼 건립

담당자

도민협력새마을과

김보성(☎635-2351)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중간지원기관 협업을 통한 시너지 효과 증대

○ 중관지원기관 등과 행정 간 연계성 강화

○ 도민의 소통과 교류공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ～ 2019(2년간)

○ 위 치 : 내포신도시 업무4플럭내(보건환경연구원 옆)

○ 규 모 : 토지 5,886㎡, 건축 1,465㎡(지상2층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000				7,000
시 도 비	5,130				5,130

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0 %)

○ (가칭)내포혁신플랫폼 건립 추진 실행위원회 구성‧운영(’16. 4월)

○ (가칭)내포혁신플랫폼 건립계획 수립 연구․설계 자문(’16. 7월)

○ (가칭)내포혁신플랫폼 건립 계획 수립(’16. 7. 31)

○ (가칭)내포혁신플랫폼 실무추진단 구성 운영 (’17. 6월)

□ 향후계획

○’18년 공유재산관리계획 승인(’17.9.)

○’18년 본예산 반영(’17.12.)

○ 기본 및 실시설계 진행(’18.1.)

○ (가칭)내포혁신플랫폼 준공(’19년 말)

○ (가칭)내포혁신플랫폼입주(’20년초)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	7000000
건 축 비	3700000
부지매입비	3300000

사업명

충남형 인성학습을 위한 「자연놀이뜰」건립

담당자

저출산고령화대책

김용모(☎635-4220)

□ 사업목적 및 필요성

○ 現 어린이인성학습원 시설의 협소 및 노후화로 어린이 안전문제 상존

○ 미래세대를 이끌어 갈 영유아의 올바른 인성 함양 및 창의 인재 육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년(4년간)

○ 사업내용 : 건립부지 매입, 건물 신축, 실외조성 등

○ 위    치 : RB5구역 내 일부 필지(LH한국토지주택공사 소유, 예산지역)

○ 규     모 : 부지매입 13,223㎡, 건축 3,972㎡(지상2층, 지하1층)

실외조성 6,612㎡(자연놀이터, 텃밭, 야외공연장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	198	0	0	80	118
도 비	80	0	0	80
국 비	118	0	0		118

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 건립추진 기본구상안 보고 : 2015. 10.

○ 건립 전략과제 추진 : 충남연구원, 2016. 5.~2016.12.

○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 의결 : 2016. 9.

□ 향후계획

❍ 도의회 공유재산관리계획 再상정(’17.9), 부지매입비 등 예산반영

❍ 용도계획(주택용지 → 노유자 시설) 변경(‘17. 9 ~12)

❍ 설계 공모(‘18. 1~’18. 6) 및 기본ㆍ실시설계(‘18. 12까지)

❍ 착공 및 준공(‘19.1 ~ ’20. 10), 자연놀이뜰 개원(’21. 1)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	해	당	없	음
공 사 비
보 상 비
시설부대경비

사업명

2017금산세계인삼엑스포

담당자

친환경농산과 하동균((☎635-2524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2006, 2011년 금산세계인삼엑스포 개최 효과를 지속시키고 국제행사 승인을 통한   글로벌 산업엑스포를 통해 인삼 종주국 한국의 위상 확립 및 인삼산업 발전

○ 고려인삼의 위상제고 및 우수성 홍보로 고려인삼 세계화를 도모하고        인삼산업 역량결집 및 미래가치 창출로 인삼산업 재도약 계기 마련

□ 행사개요

○ 때  ·  곳 : 2017. 9. 22. ~ 10. 23.(32일간) / 금산 인삼엑스포광장

○ 규    모 : 807천㎡(주행사장 55 / 부행사장 752)

○ 주요내용 : 전시·연출, 이벤트, 교역·학술, 체험 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,100	615	2,722	12,763	0
국 비	4,800	0	0	4,800	0
시 도 비	4,650	0	315	4,335	0
시 군 비	4,650	615	2,407	1,628	0
기 타	2,000	0	0	2,000	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 금산세계인삼엑스포조직위원회 설립(‘15.9.)

○ 행자부 “지방재정투자심사 승인”(‘15.10.)

○ 기재부 국제행사심사위원회 “국제행사 승인”(‘16.7.)

○ 입장권 제작 및 판매 대행사 선정(‘17.2.)

○ 회장 조성공사 착공 및 전시·연출 설계완료 및 공사 착수(‘17.4.~5.)

□ 향후계획

○ 인삼엑스포 붐 조성을 위한 홍보 지속 및 입장권 자율판매 추진

○ 이벤트 프로그램 확정 및 최종 리허설(‘17.8.~9.)

○ 2017금산세계인삼엑스포 행사 운영(‘17.9.~10.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

이차전지관리시스템(BMS)

산업육성사업 기반구축사업

담당자

신성장동력과 엄상호(☎635-3996)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트폰, 전기차, 드론, 로봇 등 차세대 동력원인 이차전지의 안전성 향상

○ 이차전지산업 경쟁력 강화를 위해 성능, 안전성 향상에 중요한 역할을 하는  이차전지관리시스템 산업 육성  ※’17산업부 지역거점 지원사업 공모 선정(’16. 4.)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로136 충남테크노파크

○ 내 용 : 물류관 내(994㎡), 이차전지BMS 성능시험, 평가지원, 기술개발, 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,000	-	-	3,900	9,100
국 비	7,000	-	-	1,440	5,560
도 비	4,000	-	-	1,260	2,740
시 비	1,000			200	800
민 자	1,000	-	-	1,000	=

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ KIAT-충남테크노파크와 협약을 위한 출연 확약서 발급 :‘17. 5월

○ KIAT-충남테크노파크와 1차년도 협약 체결 :‘17. 6월

○ 충남테크노파크에 1차 도 출연금 12.6억원 출연 : ‘17. 6월

□ 향후계획

○ 충남테크노파크내 전용공간 확보(물류관내 994㎡)

○ 인력 확보(8명) 및 장비구축(BMS Simulator(32셀), 방폭실 등)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	180억원	130억원	산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침 등에 따라 사업비 조정 국비(장비구축비) 100억 → 70억(△30) 민자(부지) 30억 → 10억(△20)

사업명

서해안유류피해 극복 10주년 행사

담당자

서해안유류사고지원과

명노청(☎635-2983)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안유류피해 극복 10주년을 맞아 기적을 일군 의미와 가치를 조명

○ 새로운 활력과 감동을 나누는 화합의 장으로 승화

○ 재난 극복을 위한 全국민적 노력을 알리고 미래 발전 동력으로 계승

□ 사업개요

○ 기 간 : ’17.9.15. ~ 9.17.(3일간)/

○ 위 치 : 태안 만리포해수욕장 일원 등

○ 규 모 : 서해안유류피해 극복 기념행사 1식(4종 22개 프로그램)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	620	0	0	620	0
국비	300	0	0	300	0
도비	320	0	0	320	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 행사 세부실행계획 수립 완료(’17.3.14.)

○ 위탁용역 협상적격자와 협상에 의한 계약체결

- ㈜ 유레카커뮤티케이션/ 협상(1차 : ‘17.5.22. 2차 : ’17.5.29.), 계약(‘17.6.2)

○ 유류피해 극복 10주년 행사 총감독 및 예술감독 위촉(’17.6.1.~9.30.)

○ 유류피해 극복 10주년 행사 추진상황 점검보고회(’17.6.22./‘17.7.14.)
- 도지사, 정무부지사 주재/ 행사개요 및 세부 프로그램 설명, 일정 공유 등

○ 10주년 행사 VIP초청 추진
- 행정자치부 VIP참석행사 수요조사 제출(기획관실, ’17.5.)
- VIP참석 BH와 협의 및 초청장 발송(해양수산부, ’17.7.6.)

□ 향후계획

○ VIP초청 참석협의

○ 공식행사 초청 및 의전활동(‘17.7~8월)

○ 10주년 행사 홍보강화(‘17.7~9월)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
총사업비	620,000	805,000	185,000
국비	300,000	300,000	0
도비	320,000	505,000	185,000

사업명

축산물 융복합 검사기반 구축

담당자

동물위생시험소

최원일(☎635-7015)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축질병 근절․최소화 및 축산경영 안정화를 위한 청정축산물 생산 환경 조성

○ 축산물 위해요소 사전예방 및 선제적 관리로 안전축산물 유통기반 확보

○ 가축질병 방역 및 축산물 위생 안전성 선진화를 위한 R&D 추진

○ 축산물 안전성 검사기반(생산~유통)을 최신으로 구축, 미래성장동력 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019년

○ 위 치 : 충남 홍성군 금마면 충서로2233번길 22 동물위생시험소 내

○ 규 모 : 연면적 4,800㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,000			500	9,500
국 비	5,000				5,000
시 도 비	5,000			500	4,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ’17. 4.  6. : 공공건축 사업계획 사전검토(도시건축공간연구소)

○ ’17. 4. 19. : 18년도 농촌자원복합산업화지원사업 사전사업성 검토(농림축산식품부)

○ ’17. 7. 20. : 공유재산 관리계획 도의회 승인

□ 향후계획

○ ’17. 하반기 : 기본 및 실시설계 용역 계약

○ ’18. 상반기 : 공사계약 및 착공

○ ’19. 하반기 : 청사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업변경 내역 없음