◈10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지7)

사업명

2020계룡세계군문화엑스포

담당자

관광마케팅과 김승섭(☎635-3887)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유일 분단국가에서 세계 軍문화 한마당 잔치 ⇨ 평화통일 기원

○ 6.25,  70년 ⇨ 참전·지원국에 대한 보은 및 대한민국의 발전상, 위상제고

○ 방위산업체 군수물자 전시·교류 ⇨ 국가경제 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 9. 18(금) ~ 27(일), 10일간《예정》

○ 장    소 : 계룡대 비상활주로 일원

○ 규    모 : 총 115만명 (외국인 6만)

○ 주최/주관 : 충청남도․계룡시 / (재)계룡세계군문화엑스포조직위원회

○ 사 업 비 : 98억원 (국비 28, 도비 20, 시비 20, 자체수익 30)

○ 주요내용 : 전시관, 공연, 체험, 야외프로그램, 국제학술회의 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,800	-	2,500	1,500	5,800
국 비	2,800	-	500	500	1,800
시 도 비	2,000	-	1,000	500	500
시군구비	2,000	-	1,000	500	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	3,000	-	-	-	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 8.  5. : 국제행사 승인(기획재정부)

○ 2017. 7. 28. : (재)계룡세계군문화엑스포조직위원회 법인 설립

○ 2017. 9.  1. : 조직위 사무처 발족(공동위원장: 도지사, 계룡시장, 민간인)

※ 행사장 기반 구축 협의(주차장, 도로개설 등), 외국군 초청협의(10개국)

세부실행계획 용역발주, 자문위원회 구성, 엑스포 홍보 및 참여기관 협의

엑스포 홈페이지 ]구축 용역 발주 및 상징마크, 캐릭터 개발 추진

□ 향후계획

○ 2018. 8. 13. : 엑스포 자문위원회 위촉장 수여

○ 2018. 9. : 국방부와의 업무협약(MOU) 체결 추진

○ 2018. 8. ~ 12. : 해외 6.25 참전용사 및 군 관계자 초청 추진

○ 2019. 3. : 엑스포 세부실행계획 수립

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

충청남도 소방복합시설 조성사업

담당자

소방행정과 정해근(☎635-5565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청남도에 분산되어 운영되고 있는 충청소방학교, 소방항공구조대, 119       광역기동단, 장비정비센터 등 주요 소방기관의 집중화

○ 소방교육 및 소방안전서비스 제공의 효율성과 전문성을 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 충청남도 청양군 비봉면 록평리 12-1 외 60필지

○ 규 모 : 부지 385,154㎡ / 건축 8개동 5개 시설물, 연면적 19,983㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	48,490			6,700	41,790
국 비
시 도 비	31,490			5,700	25,790
기 타	17,000			1,000	16,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 충청남도 공유재산심의회 취득 승인(’17. 3월)

○ 공유재산 관리계획 충청남도의회 의결(’17. 7월)

○ 공공건축 사업계획 사전검토(’18. 3월)

○ 군관리계획 결정(변경) 용역 계약(’18. 4월)

○ 전략환경영향평가 용역 계약(’18. 4월)

○ 설계용역 일상감사 및 계약심사(’18. 5월)

○ 설계 공모(’18. 7월)

□ 향후계획

○ 군관리계획 결정(변경) 용역(’18. 4월 ~ ’19. 7월)

○ 전략환경영향평가 용역(’18. 4월 ~ ’19. 4월)

○ 기본 및 실시설계(’18. 10월 ∼ ’19. 12월)

○ 토목 및 건축 공사(’20. 1월 ∼ ’21. 12월)

□ 사업변경내역

○ 해당 없음

사업명

삭선~원북(지603호) 지방도 확포장사업

담당자

도로교통과 고희주(☎635-4686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통해 안전성을 확보하고 주변계획과의 연계성 향상으로

장래 수요에 대비

○ 장래 교통수요에 효율적으로 대처하고 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 충남 태안군 태안읍 삭선리 ~ 원북면 반계리

○ 규 모 : 도로 확·포장 L=5.8km(4차로), 교량 2개소, 평면교차로 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	46,500	300	300	1,150	44,750
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	46,500	300	300	1,150	44,750
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 4. 지방재정투자심사 완료(2017년 제2차)

○ 2017. 8. 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2019. 12. 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2020. 1. 토지 보상

○ 2022. 1. 공사 착수(2025. 12. 준공예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

안면도관광지 개발사업(단지내 연결도로)

담당자

관광마케팅과 문진호(☎635-3892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연결도로 신설을 통한 안면도관광지의 접근성 향상 및 관광지와

주변 개발여건 개선을 통한 개발 촉진 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2021

○ 위 치 : 태안군 안면읍 승언리~중장리

○ 규 모 : L=2.9km, B=27m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	45,000	497	424.7	16,978.3	27,100
국 비	12,500	237.8	178.5	3,433.7	8,650
시 도 비	32,500	259.2	246.2	13,544.6	18,450
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2016. 2. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2018. 3. : 공사 및 건설사업관리 착수

○ 2018. 6. : 건설폐기물처리용역 등.

□ 향후계획

○ 토지 협의보상 1차(2018. 9월), 2차(2018. 10월) 진행 후 미보상 필지에 대해서는 수용재결(2018. 11월) 실시 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

태안기업도시 웰빙특구 연결교량 건설

담당자

관광마케팅과 이병령(☎635-3888)

□ 사업목적 및 필요성

○ 허베이스피리트호 유류오염사고에 따른 지역경제 활성화 도모 및 관광객 유치를 통한 유류피해지역의 지역경제 활성화 기여

○ 서해안고속도로 해미IC~태안군을 직접 연결 수도권 접근성 향상 및 태안기업도시와 서산웰빙특구 연결로 통합개발을 통한 관광 시너지 효과

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년 (4년간)

○ 위 치 : 태안군 태안읍 송암리 ~ 서산시 부석면 갈마리 일원

(태안 기업도시 ~ 서산 웰빙특구)

○ 규 모 : 연결도로 개설 L=0.68km(태안군 410m, 서산시 270m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,000	-	2,000	-	34,000
국 비	18,000	-	1,000	-	17,000
시 도 비	5,400	-	300	-	5,100
시군구비	12,600	-	700	-	11,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 6. : 보조사업 적격성심사 완료(기재부)

○ 2017. 8. : 중앙재정투자심사 완료(행안부, 3차)

○ 2018. 3. : 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2018.12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 3. : 사업 착공

○ 2020.12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

충남 권역 재활병원 건립

담당자

장애인복지과 박태진(☎635-4261)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도내 장애인들의 재활수요에 비해 재활전문병원이 부족한 실정

○ 충청권의료재활센터(충남대 병원)의 경우 도내 북서북권에서 접근성 부족으로

현실적 이용 어려움

○ 고령화 · 만성질환 및 등록장애인의 급속한 증가 등 환경변화에 따른 재활수요 대비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 충남 아산시 용화동 산 39번지 일원 10,175㎡

○ 규 모 : 연면적 13,216㎡(지하1층, 지상5층), 150병상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	27,000		1,000	6,000	20,000
국 비	13,500		500	3,000	10,000
시 도 비	4,050		150	900	3,000
시군구비	9,450		350	2,100	7,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’17. 4～5월 : 사업 응모(복지부), 참여기관 간 역할분담 및 방향 정립

- (건 립) 지방비 부담액(도비 70%, 시비 30%), 부지(아산시 확보)

- (운 영) 의료법인 영서의료재단(개원초기 손실분 보전후 책임경영)

○ ’17. 6월 : 사업수행기관 선정 및 국비 교부(5억원), 기본계획 수립

○ ’17. 8～10월 : 지방재정 투자심사 조건부 승인 및 사업계획서 확정

○ ’17. 12월 : 발주기관 확정(영서의료재단) 및 참여기관 간 업무협약

○ ’18. 1～2월 : 공공건축 사업계획 사전검토 이행(건축도시공간연구소)

○ ’18. 4～7월 : 용화 남산지구 지구단위계획 결정(변경) 업무협의(4회)

□ 향후계획

○ 건립부지 확정(잠정) 및 설계공모(’18. 8),  기본 및 실시설계(’18. 11)

○ 착공 및 준공(’18.12～’20.10), 시범운영 및 개원(’20.10～12)

□ 사업변경 내역

○해당사항 없음

사업명

건강맞춤 미래 프로바이오틱스 산업 플랫폼 구축

담당자

산업육성과 최혜리(☎635-2934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래 트렌드를 반영한 건강․질병 맞춤 바이오산업 육성으로 지속적인 성장동력 확보

○ 고기능성 프로바이오틱스 임상시험․인증 등 지역기업 맞춤형 지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 주력산업 고도화

※ 프로바이오틱스(Probiotics) : 적정량을 섭취했을 때 건강에 도움을 주는 미생물로 식품, 의약품, 화장품 등 다양한 분야에 첨가 또는 응용

□ 사업개요

○ 기 간 : ’18년~’22년(5년, 수행기간) ※ 수행기간 종료 후 성과활용기간(5년) 별도

○ 위 치 : 순천향대학교 지역혁신센터(RIC) 內

○ 규 모 : 시설 리모델링 1개동 3층(1,485㎡), 장비구축 94종 149대, 기업지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,500	-	-	2,710	12,790
국 비	9,000	-	-	760	8,240
시 도 비	3,000	-	-	1,000	2,000
시군구비	1,000	-	-	200	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,500	-	-	750	1,750
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 장비구축 : 국가연구시설 장비도입 심의위원회 통과(8~12월 중 도입예정)

○ 장비운영 : 기구축장비를 활용한 장비운영 중

○ 시설구축 : 시설 리모델링 착수(8월 중)

○ 기업지원 : 수혜기업 모집완료 / 장비운영교육 진행 중

□ 향후계획

○ 장비(3천만원 이상) 1대 산업통상자원부 심의 예정(8월 말)

○ 지역혁신관(사무공간) 시설 개조 후 ABSL-3시설 구축

※ ABSL-3(미생물실험실) : 잠재적 감염의 가능성이 있는 동물로부터 실험자 등을 보호하기 위해 안전에 대한 지식, 기술 및 장비가 적절히 적용되어 이루어진 시설

○ 성공적 사업수행을 위한 홍보(방송․박람회․매거진․홈페이지 등)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

문화시설 잔여부지 구입

담당자

문화정책과 지동욱(☎635-2414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내포신도시 문화시설 건립(미술관, 예술의 전당)을 위하여 충남개발공사로부터 잔여부지를 매입

• 매입 규모 : 총 부지 80,176.7㎡ 중 잔여부지 49,030.7㎡

- 홍  성 : 61,723.3㎡ 중 30,577.3㎡(홍북읍 신경리 887번지)

- 예  산 : 18,453.4㎡(삽교읍 목리 765번지)

• 매입금액 : 27,191,347,530원(충개공 조성원가 ㎡당 554,578원 )

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017~2020

○ 위    치 : 충남도청신도시 개발사업지구 문화1

○ 규    모 : 부지 49,030.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	27,200	0	300	5,000	21,900
국 비
시 도 비	27,200	0	300	5,000	21,900
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1%)

○ 2017년 계약금 300백만원 지급

□ 향후계획

○ 2018년 중도금 5,000백만원 지급 예정

○ 2020년까지 21,900백원 지급 예정(’19년 10,000백만원, ’20년 11,900백원)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

충남스포츠센터조성사업

담당자

체육진흥과 한창민(☎635-3866)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 이전에 따른 충남도민의 문화, 여가 수요에 부응하는 고품격 체육

문화 기반시설 확충을 위해 『충남 스포츠센터』건립 추진

○ 충남체육인의 역량 결집을 위한 중심축 구축 및 충남체육의 랜드마크 형성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년~2021년

○ 위 치 : 충남 예산군

○ 규 모 : 연면적 8,965.2㎡(지상4층, 지하1층) /수영장, 체육회관,다목적체육관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  31,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	31,000		2,000	1,700	27,300
국 비	7,300			300	7,000
시 도 비	17,400			1,400	16,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	6,300		2,000		4,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ (’17. 11.) 지방재정 투자사업 중앙 심사 절차이행

○ (’18. 4.) 공공건축사업 사업계획 사전검토 완료

□ 향후계획

○ (’18. 10.) 실시설계용역 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음