		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

◈10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지10)

사업명

제64회 백제문화제 지원

담당자

관광진흥과 이정(☎635-3887)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사유적지구 관광증진을 위한 전국적·국제적 백제문화제를 개최하여

백제문화제 엑스포 초석을 마련 (제64회 주제 : 한류원조, 백제를 즐기다)

○ 2015년 백제역사유적지구가 유네스코 세계유산에 등재된 이후 충남을 찾는 국내·외 관광객이 증가함에 따라 백제문화제를 그에 걸 맞는 세계적인 명품축제로 발전시키기 위한 지원 필요

□ 사업개요

○ 기  간 :  2018. 9. 14.(금) ~ 9. 22.(토), 9일간

○ 위  치 : 공주시 부여군 일원

○ 규  모 : 85,8억원(도비 17.8 시군61 기타 70)

○ 내  용 : 제례, 퍼레이드, 공연, 전시, 체험프로그렘 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,580 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	25,135		8,580	8,155	8,400
국 비
시 도 비	5,560		1,780	1,780	2,000
시군구비	18,000		6,100	5,900	6,000
지 방 채
민간자본
기 타	1,575		700	475	400

※ 행사성 사업으로 총사업비는 당해연도분만 표기

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 제64회 백제문화제 완료

□ 향후계획

○ 백제문화제를 대한민국 대표 역사문화축제 ‧ 글로벌 역사문화축제로의        도약 위한 제65회 백제문화제 개최 및 (가칭) 백제엑스포 개최 준비

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

(재)충남청소년진흥원 신축

담당자

여성가족정책관 조경찬(☎625-4994)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대중교통이 불편한 천안 도심에 위치, 수요자들의 접근이 어렵고 필요공간의

충분한 확보 곤란 등으로 이전 필요성 제기

○ 시설노후화, 사무공간 부족, 높은 임대료 지출 등 이전을 통한 미래변화

대응 및 서비스 질 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 RB5구역 내

○ 규 모 : 부지 3,200㎡, 연면적 2,500㎡(3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,600	-	-	-	9,600
국 비
시 도 비	9,600	-	-	-	9,600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 지방재정 투자심사 완료 : 2018. 10.

○ 공유재산 심의 및 관리계획 승인 : 2019. 3.

□ 향후계획

○ 공간구상을 위한 벤치마킹 및 디자인기획회의 실시 : 2019. 7. ~ 12.

○ 기본 및 실시설계, 기타용역 추진 : 2020. 1. ~ 9.

○ 토목 및 건축공사 추진 : 2020. 10. ~ 2021. 7.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 부지를 예산군으로부터 무상제공 받으려 하였으나, 공유재산의 효율적인 관리를 위하여 도에서 부지매입하는 것으로 변경

- 사업비 증액 : 7,800백만원 → 9,600백만원(부지매입비 1,800백만원 증)

사업명

내포혁신 플랫폼 건립(충남공감마루)

담당자

공동체정책관실 김영성(☎635-3670)

□ 사업목적 및 필요성

○ 법령･조례를 근거로 설치된 각종 센터 및 시민사회단체간 협업･교류를   통해 시너지 효과를 창출할 수 있는 통합거점 및 도민열린 공간 조성

※ 사회혁신 지역 거점별 도민 소통·협력공간 조성

□ 사업개요

○ 기간․위치 : 2018. 1. ~ 2020. 3. / 홍성군 홍북읍 신경리 889(보건환경연구원 옆)

○ 규      모 : 부지 5,886㎡, 연면적 2,894㎡(지하 1층, 지상 3층)

- 입주기관(인원) : 15~20개 기관(단체) / 120여명

○ 사  업  비 : 110.9억원(국 33.7, 도 77.2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,090	-	4,226	3,867	2,997
국 비	4,370	-	900	3,470
시 도 비	6,720	-	3,326	397	2,997
시군구비		-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38.1%)

○ 2016. 9. : 공유재산심의회 및 지방재정투자심사 의결

○ 2019. 4. : 내포혁신플랫폼 명칭공모, 충남공감마루 선정

○ 2019. 5. : 기본·실시설계용역 완료 및 최종보고회 개최

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 사업 착공

○ 2019. 6. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 건립규모 변경에 따른 실시설계 결과 신재생에너지 및 BF인증 적용사항 반영에 따라 사업비 9억 증액, 인테리어·가구·조명 등 예산 추가 검토

- 당초 : 2018. 1 ~ 2020. 3 / 변경 : 2018.1 ~ 2020. 6

사업명

내포 열병합 발전소 부지 매입

담당자

에너지과 이은정(☎635-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업부지 매입·사용허가를 통하여 내포신도시의 안정적인 냉·난방 공급

○ SRF에서 청정연료 전환을 위한 초기 재정부담 완화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 예산군 삽교읍 목리 1257번지 등 3필지 69,483㎡

○ 내    용 : 내포 열병합발전소 부지 매입 및 공유재산 사용허가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,303백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	43,303			43,303
국 비
시 도 비	43,303			43,303
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 지방재정 투자심사 승인(‘18. 9. 28.) 및 공유재산심의회 심의 승인(‘18. 10. 1.)

○ 공유재산관리계획 도의회 의결(‘18. 10. 4.)

○ 사업장 토지매입 완료(69,483㎡, 433억원, 등기완료 ‘19. 1. 29.)

○ 매입 토지 사용허가(‘19. 3. 6., 최장 20년 내 사업자 재매입 조건)

□ 향후계획

○ 매입 토지 사용 허가기간(최장 20년) 중 매년 공유재산사용료 징수

○ 사용기간 중 사업자에게 부지 매각하여 투입 예산 회수

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 45,000백만원 → (변경) 43,303백만원

- 기존사업자가 매매가격 준수 및 감정평가에 의한 협상가격 적용

사업명

충남지식산업센터 건립

담당자

미래성장과 김희중(☎635-2912)

□ 사업목적 및 필요성

○「천안아산 KTX역세권 R&D집적지구」 내 벤처·창업기업 입주공간을

제공함으로써 지역 일자리 창출 기여

○ 대기업 중심의 산업구조를 넘어 대·중소기업간 격차 완화로 중소·벤처

기업이 일자리·소득 성장을 주도할 수 있도록 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년 (4년간)

○ 위 치 : 충남 천안시 서북구 불당동 650-3번지 등 일원

○ 규 모 : 부지 4,510㎡, 연면적 11,620㎡(지하1층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,249백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	27,249		1,300	7,534	18,415
국 비	14,780		1,000	2,836	10,944
시 도 비	6,335		300	1,187	4,848
시군구비	6,134			3,511	2,623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.8%)

○ 2018. 4. : 지식산업센터 건립 기본계획 수립

○ 2018. 7. : 기재부, 중기부 사업계획 심사 확정

○ 2019. 1. ~ 4. : 지식산업센터 설계공모(당선작 선정)

○ 2019. 5. : 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2020. 1. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2020. 3. : 공사 착공

○ 2021.12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 연면적 13,300㎡ → (변경) 연면적 11,620㎡

○ 총사업비 : (당초) 28,900백만원 → (변경) 27,249백만원

사업명

과학기술기반 지역수요맞춤형R&D지원사업

담당자

미래성장과 박미영(☎635-2914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회문제 중 생활밀착형 생활폐기물 처리를 위한 과학기술 필요

○ 생활폐기물 및 농촌 폐비닐 발생에 대한 지속적 민원 및 환경문제 대두

○ 청정도시 클린환경을 위한 딥러닝 기반 스마트 관리시스템 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. 1. ~ 2021. 2. 28. (3년)

○ 규 모 : 클린충남을 위한 생활폐기물의 스마트 순환생태계 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,951백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,951		1,471	1,740	1,740
국 비	1,983		583	700	700
시 도 비	1,983		583	700	700
시군구비
지 방 채
민간자본	985		305	340	340
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29.7%)

○ ’18. 5. ~ ’19. 5. : 폐기물, 폐비닐 식별 및 운영솔루션 개발

- 폐기물정보 수집 및 정보 송신모듈개발

- 폐기물 상태정보 및 시설현황 데이터 분석

- 농가 폐비닐 식별모듈 개발  및 사전정보 수집 및 최적 수거 알고리즘 개발

○ ’19. 6. ~ : 실증운영을 위한 테스트베드 구축 방안 및 역할 배분

□ 향후계획

○ 스마트 수거함 시제품 제작 및 영농폐기물 통합 관리시스템 구축

○ 시제품 테스트 실증을 통한 제품 보완 반영

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

충남 첨단 금속소재산업 초정밀기술지원플랫폼 사업

담당자

산업육성과 이후범(☎635-2923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 지역산업을 기반으로 하는 첨단 금속소재 관련 산업 육성 및 초정밀       기술지원과 4차 산업혁명 대비 기업 혁신역량 재고를 통한 강소기업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위 치 : 당진 석문국가산업단지 내

○ 규 모 : 센터신축(2,310㎡) 및 장비(18종) 구축, 기술지원 및 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,000	-	-	3,920	15,080
국 비	8,000	-	-	600	7,400
시 도 비	4,300	-	-	640	3,660
시군구비	4,700	-	-	2,180	2,520
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타	2,000	-	-	500	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○2018. 4. : 산업부 ‘19년도 신규사업 최종 선정(’18.4.20)

○2018. 6. : 지방재정 투자심사완료(도 자체심사)

○2019. 6. : 전담기관(KIAT) 사업시행계획 평가 및 협약체결(2019. 7)

□ 향후계획

○ 2019. 7. : 1차년도 사업수행

○ 2019. 8. : 센터 부지매입 및 실시설계 착수

○ 2019. 8.~9. : 장비 4종 중앙장비심의위원회 심의

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

충남콘텐츠기업육성센터 조성

담당자

문화정책과 최재호(3821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 중추적인 콘텐츠기업 육성시설 구축과 콘텐츠산업에 특화된 엑셀러

레이터 프로그램 운영을 통한 콘텐츠 스타트업 육성 및 청년 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간(1차년도)  : 2018. 07. 01. ~ 2019. 05. 10.

○ 위 치 : 충남 아산시 배방읍 장재리 1788번지

○ 규 모 : 연면적(2,993.95㎡(905.6평)/ 지하 1층, 지상 5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,825백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,825	-	11,810	1,005	2,010
국 비	4,800	-	4,800	-	-
시 도 비	5,000	-	3,500	500	1,000
시군구비	5,000	-	3,500	500	1,000
지 방 채
민간자본	25		10	5	10
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79.7%)

○ 2019년 4월 25일 : 충남콘텐츠기업육성센터 개소

○ 2019년 5월 11일 ~ : 2차년도 사업운영

□ 향후계획

○ 2019년 7월 : 입주공간 추가확장

○ 2019년 7월 ~ : 프로그램 운영(액셀러레이팅, 기업지원, 인력양성 등)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

도 대표 공연물 제작 공연

담당자

문화정책과 조성완(☎635-3817)

□ 사업목적 및 필요성

○ 윤봉길 의사 뮤지컬을 통한 미래세대 교육 및 도 대표콘텐츠 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 충청남도내

○ 규 모 : 창작 뮤지컬 제작 및 공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,000			1,000
국 비	500			500
시 도 비	250			250
시군구비	250			250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019년 추진 예정

□ 향후계획

○ 공연 제작업체 공모 및 선정 : '19. 2.

○ 뮤지컬 제작(시나리오, 음악, 무대 세트 등) : '19. 5 ~

○ 주연 및 앙상블 배우 오디션 및 확정 : '19. 6.

○ 제작발표회(매헌 윤봉길 의사 기념관) : '19. 7.

○ 1차 공연(국립박물관 극장 ‘龍’) : '19. 9. 10 ~ 15.

○ 2차 공연(충남문예회관) : '19. 9. 26.

○ 2차 공연(예산군 문예회관) : '19. 10. 2.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

충청남도 광역푸드 통합지원센터 건립

담당자

농식품유통과 김오열(☎635-4168)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교급식지원센터(‘19년 13시군) 및 로컬푸드 직매장(‘19년 51개소)의 확대에     따라 시군연계 강화 및 통합물류 허브 구축 등 먹거리통합지원센터 설립‧운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2022년(3년간)

○ 위 치 : 부여군 남면 내곡리 174-4 구)남성중학교)

○ 규 모 : 부지 21,233㎡(6,422평), 건물 5,963㎡(약 1,800평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,500				18,500
국 비	8,750				8,750
시 도 비	9,750				9,750
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 도 먹거리종합전략(푸드플랜) 수립 용역 최종보고(‘19. 3월)

○ 도 먹거리통합지원센터 건립 부지 선정(‘19. 6월, 부여)

○ 도 먹거리 보장 기본조례 제정 예정(‘19. 4월, 먹거리통합지원센터 건립근거)

□ 향후계획

○ 도-부여군 업무협약(‘19. 9월)

○ 기본 및 실시설계(‘20. 12월 완료)

○ 부지조성 및 착공(‘21. 6월)

○ 준공(‘22. 10월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경내용 없음

사업명

국립서해안 기후대기센터 건립

담당자

기후환경정책과

정도영(☎635-4412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 기후변화로 인한 서해안 이상기상 및 극한기후 발생빈도 급증

- 미세먼지, 황사 등 대기오염물질 증가로 인한 사회문제 심각성 대두

⇨ 서해안지역 기후변화 및 기상 기후에 대한 장기적인 연구․개발 공간을 마련하고, 차별화된 콘텐츠 전시, 체험교육장 설치로 기상과학 문화 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021년(공사기간 30개월)

○ 위 치 : 홍성군 홍북읍 내포신도시 내 산학협력시설부지 1-①-1

○ 규 모 : 토지면적 19,138㎡ / 건축 연면적 1,215㎡(지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,300	-	645	4,484	14,171
국 비	12,800	-	-	229	12,571
시 도 비	6,500	-	645	4,255	1,600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.3%)

○ 건립부지 매매계약(’18.11), 중도금 납부

○ 건축 및 전시 컨텐츠 기본계획 완료(’19.4), 실시설계 수립중(’19.6~12)

□ 향후계획

○ 건립부지 매입을 위한 잔액(1,600백만원) ’20년 예산편성 및 집행

○ 국립 서해안기후대기센터 건축 및 전시컨텐츠 구성

○ 국립 서해안기후대기센터 개관(’21. 3 예정)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 25,000백만원 → (변경) 19,300백만원

○ 사업규모 변경 사유 : 기본설계(건축 및 전시콘텐츠)에 따른 건축비 조정

사업명

두마~노성(지645호)도로확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대전∼논산(상월)∼공주(KTX역)∼부여를 연결하는 광역교통망 형성 및 호남고속도로 KTX공주역을 연결하는 연계도로망 구축

○ 논산시 노성면∼계룡시 두마면간 차량이용자들이 원거리(23km)로 우회하고 있는 불편함 해소(이동거리 11km 단축)

○ 계룡시, 계룡대(3군 본부) 접근성 개선 및 업무연계 강화와 공주역 역세권 발전에 따른 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2027

○ 위 치 : 논산시 노성면 읍내리~계룡시 엄사면 유동리(지645호)

○ 규 모 : L=9.2km B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 103,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	103,500		300	1,500	101,700
국 비
시 도 비	103,500	-	300	1,500	101,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0.3%)

○ 2018.  2. : 지방재정 투자사업 도 심사 완료

○ 2018. 6. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2019. 6. : 기본계획 노선(안) 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2020. 5. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2022. 5. : 보상 완료

○ 2022. 6. : 사업 착공

○ 2027. 6. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

밀두~대음(지623호) 도로확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장래 교통수요에 효율적 대처하여 교통소통에 원활을 기함은 물론 지역균형발전 및 개발촉진 도모

○ 황해경제자유구역(인주지구) 해제에 따른 주민지원 약속사항

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2027

○ 위 치 : 충남 아산시 인주면 밀두리~대음리(지623호)

○ 규 모 : L=3.6km B=19.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	42,600		300	505	41,795
국 비
시 도 비	42,600	-	300	505	41,795
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0.7%)

○ 2018. 6. : 지방재정 투자사업 도 심사 완료

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2019. 4. : 기본계획 노선(안) 주민설명회 개최

○ 2019. 6. : 소규모환경영향평가용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2021.12. : 보상 완료

○ 2022. 3. : 사업 착공

○ 2027.12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

구룡~용두(지610호) 도로확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 이동권 확보 및 지역간 균형발전 도모를 위한 최적의 도로개설

○ 도로가 하천변에 위치하여 집중호우시 침수 발생 등 노선정비 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 충남 청양군 남양면 구룡리~용두리(지610호)

○ 규 모 : L=1.3km B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,800		200	150	8,450
국 비
시 도 비	8,800	-	200	150	8,450
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.3%)

○ 2018. 2. : 지방재정 투자사업 도 심사 완료

○ 2018. 6. : 실시설계 착수

○ 2019. 3. : 노선(안) 주민설명회 개최(총 3회)

○ 2019. 7. : 공법·특허·신기술 등 선정 및 협약업무 추진

□ 향후계획

○ 2019.12. : 실시설계 완료

○ 2020.12. : 보상 완료

○ 2021. 3. : 사업 착공

○ 2023.12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

무창포IC~웅천(지606호) 도로확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 606호선 중 보령시 웅천읍 관당리∼대천리 구간으로 현재 조성중인 웅천일반산업단지 준공으로 인한 물동량 증가 예상

○ 한편, 무창포해수욕장 및 무창포항 국가어항 지정에 따른 관광객 증가 예상됨에 따라 증가하는 관광수요 등 장래교통수요에 효율적으로 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022

○ 위 치 : 충남 보령시 웅천읍 관당리~대천리(지606호)

○ 규 모 : L=1.4km B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,200	200	200	700	7,100
국 비
시 도 비	8,200	200	200	700	7,100
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.9%)

○ 2018. 2. : 지방재정 투자사업 도 심사 완료

○ 2018. 6. : 실시설계 착수

○ 2019. 2. : 노선(안) 주민설명회 개최(총 2회)

○ 2019. 3. : 교차로 형식 관련 주민협의

□ 향후계획

○ 2019.11. : 실시설계 완료

○ 2020. 6. : 보상 완료

○ 2020. 7. : 사업 착공

○ 2022.12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

화성~장곡(지609호) 도로확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 이동권 확보 및 지역간 균형발전 도모를 위한 도로 개설

○ 장래 교통수요에 효율적 대처 및 교통소통에 원활을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 충남 청양군 화성면 화암리(지609호)

○ 규 모 : L=2.4km B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,000	0	150	180	11,670
국 비
시 도 비	12,000	-	150	180	11,670
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.3%)

○ 2018. 2. : 지방재정 투자사업 도 심사 완료

○ 2018. 6. : 실시설계 착수

○ 2019. 2. : 노선(안) 주민설명회 개최(총 2회)

○ 2019. 7. : 공법·특허·신기술 등 선정 및 협약업무 추진

□ 향후계획

○ 2019.12. : 실시설계 완료

○ 2020.12. : 보상 완료

○ 2021. 3. : 사업 착공

○ 2023.12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

충남도립대학교 학생회관 건립공사

담당자

사무국 여승기(☎635-6650)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특성상 문화 복지공간이 취약한 학생들에게 건전한 여가문화 활동 및 복지서비스 공간을 제공하고 학생 권익증진 및 우수 인재 유치로 대학 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2021

○ 위 치 : 충남 청양군 청양읍 학사길 55 일원(학교내)

○ 규 모 : 지하1, 지상4 연면적 3,300㎡내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,485백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,485			430	8,055
국 비
시 도 비	8,485			430	8,055
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2019년 1회 추경 설계비(430백만원) 편성

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019. 7 : 건축설계 제안 공모 추진 중

□ 향후계획

○ 2019. 9 : 기본 및 실시설계 착수

○ 2020. 3 : 공사완료착수

○ 2021. 2 : 공사

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업계획에서 누락된 학생식당 철거비 및 설계비, 감리비 부족분 반영

7,900백만원 → 8,485백만원(증585백만원)