◈ 9-8-1 2018년도 청사신축 공사별 원가회계정보 (별지 8)

천안서북 불당119안전센터 신축

충청남도 소방행정과 정해근, 041-635-5565

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

천안시 서북구 불당동 1518

○ 인구 수

착공일

준공일

97,764명(2018. 3월 기준)

105,863명(2018. 12월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

0명/0명

19명/19명

○ 재정자립도

착공일

준공일

31.5%(2018년 본예산 기준)

31.5%(2018년 본예산 기준)

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(안전센터)	없 음

○ 청사신축 필요성

소방수요 증가에 따라 신설된 119안전센터 청사 신축

○ 사업기간

착공 당시

2018년 ~ 2018년 (1년)

준공

2018년 ~ 2018년 (1년)

○ 사업수행방식

입찰(설계･시공분리)

○ 추정(예정)가격

1,532,886,400원

계약금액

1,331,946,880원

낙찰율

87%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(안전센터)	2018년	1.025.1㎡	448.53㎡	861.27㎡	0/3

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비(복권기금)	시도비	시군구비	지방채
합계	3,308	1,670	1,638
2015년
2016년
2017년	1,442		1,442
2018년	1,866	1,670	196

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015년

2016년

2017년

2018년

1) 토지매입비

1,352

2) 설계비

90

3) 감리비

39

4) 공사비

1,820

5) 기타부대비

7

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2016. 12월

충청남도

타당성 조사

해당없음

투자심사

해당없음

공유재산관리계획

2016. 9월

충청남도의회

설계

2017. 4월

2017. 10월 완료

충청남도

착공

2018. 3월

충청남도

준공

2018. 12월

2018. 12월 준공

충청남도

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	1,841,702,000
	원/㎡		2,139,030
	비율		100
건 축	금액	78.15	1,439,237,580
	원/㎡		1,671,590
	비율		78.15
기 계	금액	6.18	113,778,950
	원/㎡		132,150
	비율		6.18
전 기	금액	8.33	153,531,900
	원/㎡		178,320
	비율		8.33
통 신	금액	3.25	59,828,760
	원/㎡		69,490
	비율		3.25
소 방	금액	1.38	25,432,900
	원/㎡		29,540
	비율		1.38
부대시설 (토목,조경)	금액	2.71	49,891,910
	원/㎡		57,950
	비율		2.71

천안서북소방서 증축

충청남도 소방행정과 정해근, 041-635-5565

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 32

○ 인구 수

착공일

준공일

399,923명(2018. 7월 기준)

402,687명(2018.12월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

216명/271명

236명 / 271명

○ 재정자립도

착공일

준공일

31.5% (2018년 본예산 기준)

31.5% (2018년 본예산 기준)

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(소방서)	2011년	6,042.7㎡		3,760.4㎡	-1/3

○ 청사신축 필요성

소방인력 및 소방 수요 증가에 따른 사무 공간 확보

○ 사업기간

착공 당시

2018 ~ 2018 ( 1년)

준공

2018 ~ 2018 ( 1년)

○ 사업수행방식

입찰(설계･시공분리)

○ 추정(예정)가격

518,672,325원

계약금액

455,262,996원

낙찰율

88%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(소방서)	2018	6,042.7㎡		4,098.29㎡	-1/3	2층 증축 337.89㎡

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	608		608
2015년
2016년
2017년	608		608
2018년

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015년

2016년

2017년

2018년

1) 토지매입비

2) 설계비

30

3) 감리비

10

4) 공사비

565

5) 기타부대비

3

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2016. 12월

충청남도

타당성 조사

해당없음

투자심사

해당없음

공유재산관리계획

해당없음

설계

2017. 9월

2018. 5월 완료

충청남도

착공

2018. 8월

충청남도

준공

2018. 12월

2018. 12월 준공

충청남도

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	583,626,000
	원/㎡		1,726,700
	비율		100
건 축	금액	73.52	729,089,800
	원/㎡		1,269,500
	비율		73.52
기 계	금액	9.01	52,584,680
	원/㎡		155,580
	비율		9.01
전 기	금액	10.04	58,598,520
	원/㎡		173,370
	비율		10.04
통 신	금액	6.18	36,043,000
	원/㎡		106,640
	비율		6.18
소 방	금액	1.25	7,310,000
	원/㎡		21,630
	비율		1.25

아산 장재119안전센터 신축

충청남도 소방행정과 정해근, 041-635-5565

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

아산시 배방읍 장재리 1519

○ 인구 수

착공일

준공일

24,014명(2018. 3월 기준)

25,358명(2018. 12월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

0명/0명

19명/19명

○ 재정자립도

착공일

준공일

31.5%(2018년 본예산 기준)

31.5%(2018년 본예산 기준)

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(안전센터)	없 음

○ 청사신축 필요성

소방수요 증가에 따라 신설된 119안전센터 청사 신축

○ 사업기간

착공 당시

2018년 ~ 2018년 (1년)

준공

2018년 ~ 2018년 (1년)

○ 사업수행방식

입찰(설계･시공분리)

○ 추정(예정)가격

1,480,187,875원

계약금액

1,286,026,951원

낙찰율

87%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(안전센터)	2018년	1,053.9㎡	496.40㎡	840.25㎡	0/2

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비(복권기금)	시도비	시군구비	지방채
합계	3,507	1,669	1,838
2015년
2016년	1,551		1,551
2017년	90		90
2018년	1,866	1,669	197

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015년

2016년

2017년

2018년

1) 토지매입비

1,551

2) 설계비

90

3) 감리비

39

4) 공사비

1,820

5) 기타부대비

7

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2016. 12월

충청남도

타당성 조사

해당없음

투자심사

해당없음

공유재산관리계획

2016. 9월

충청남도의회

설계

2017. 4월

2017. 10월 완료

충청남도

착공

2018. 3월

충청남도

준공

2018. 12월

2018. 12월 준공

충청남도

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	1,842,249,000
	원/㎡		2,193,150
	비율		100
건 축	금액	84.29	1,552,738,020
	원/㎡		1,848,450
	비율		84.29
기 계	금액	3.21	59,216,970
	원/㎡		70,500
	비율		3.21
전 기	금액	7.07	130,290,940
	원/㎡		155,110
	비율		7.07
통 신	금액	4.11	75,752,510
	원/㎡		90,180
	비율		4.11
소 방	금액	0.92	16,898,900
	원/㎡		20,120
	비율		0.92
부대시설 (토목,조경)	금액	0.40	7,351,660
	원/㎡		8,750
	비율		0.40

충청남도농업기술원 친환경농업연구센터 신축공사

친환경농업과, 윤여욱, 635-6107

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

충남 예산군 신암면 종경리 354

○ 인구 수

착공일

준공일

기간제근로자

포함

40명(2016. 12월 기준)

45명(2018. 7월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

11명/12명

12명/12명

○ 재정자립도

착공일

준공일

100%

100%

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
농업기술원(행정)	2003년	48,673.1m2	2,342.46m2	6,375.99m2	1/3

○ 청사신축 필요성

친환경농업기술개발 보급으로 친환경농업 확산 및 농업경쟁력 제고

○ 사업기간

착공 당시

2016. 12. ~ 2017. 12.(1년 1개월)

준공

2018. 05. 20.(1년 6개월)

○ 사업수행방식

입찰(설계･시공분리)

○ 추정(예정)가격

4,975,641,400원

계약금액

4,322,827,425원

낙찰율

87%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
친환경농업연구센터 (공공업무시설)	2018년	6,383.47m2	998.40m2	3,050.95m2	1/3

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황                                                     (단위 : 천원)

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	7,000,000	3,500,000	3,500,000	-	-
Y-3 이전	800,000	400,000	400,000	-	-
Y-2	3,000,000	1,500,000	1,500,000	-	-
Y-1	3,200,000	1,600,000	1,600,000	-	-
준공연도(Y)	-	-	-	-	-

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비(천원)

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

-

-

-

-

2) 설계비

-

348,200

-

19,789

3) 감리비

-

-

-

124,080

4) 공사비

-

1,264

3,792,299

2,653,318

5) 기타부대비

-

12,068

7,566

4,384

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2015. 09.

반영

자체

타당성 조사

2015. 05.

적합

자체

투자심사

2015. 05.

조건부추진

중앙

예산담당관-5907호

공유재산관리계획

2015. 09.

부분가결

의회

세무회계과-

10412호

설계

2016. 05.

착수

자체

신성종합건축사사무소

착공

2016. 12.

착공

자체

㈜세운종합건설

준공

2018. 05.

준공

자체

㈜세운종합건설

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	6,730,514,712
	원/㎡	100	2,206,039
	비율	100	100
건 축	금액	65.8	4,431,581,967
	원/㎡	65.8	1,452,525
	비율	65.8	65.8
기 계	금액	10.9	733,077,845
	원/㎡	10.9	240,278
	비율	10.9	10.9
전 기	금액	16	1,075,427,000
	원/㎡	16	352,489
	비율	16	16
통 신	금액	4.2	281,961,900
	원/㎡	4.2	92,418
	비율	4.2	4.2
부대시설 (토목,조경)	금액	3.1	208,466,000
	원/㎡	3.1	68,328
	비율	3.1	3.1