◈10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지 11)

사업명

디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축

담당자

산업육성과 박상진(☎635-3930)

□ 사업목적 및 필요성

○ 디스플레이산업에 대한 중국 등 경쟁국의 대규모 투자에 대응 차세대 디스플레이 시장에서의 격차를 늘려 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 천안시 직산읍, 충남테크노파크 내

○ 규 모 : 센터건축(2개동, 12,913㎡), 장비구축 58종 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 528,133백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	528,133	-	14,648	131,650	381,835
국 비	376,964	-	6,790	93,637	276,537
시 도 비	49,927	-	3,500	28,350	18,077
시군구비	5,000	-	500	500	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	96,242	-	3,858	9,163	83,221

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○(‘19년) 사업협약(KEIT) 및 장비구축 4종 발주, 센터부지 인허가 및 지질조사 등

○(‘20년) 센터설계(3~10월), 장비발주 심사(자체 및 중앙) 추진(1~12월) 등

□ 향후계획

○ 센터설계 및 산단인허가 추진(~10월), 장비발주(~‘20.12월, 31종)

○ 혁신공정 센터 건축(~ 2021)

사업명

2021계룡세계군문화엑스포

담당자

관광진흥과 이정(☎635-3887)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 군문화의 문화예술적, 평화수호자로서 가치 공유 및 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. 1. ~ 17.(17일간)

○ 위 치 : 충청남도 계룡시 신도안면 일원(계룡대 활주로)

○ 규 모 : 총 131만3천명(내국인 124만명, 외국인 7만3천명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,540	617	1,207	1,187	12,529
국 비	2,800	231	453	445	1,671
시 도 비	5,640	193	377	371	4,699
시군구비	3,800	193	377	371	2,859
지 방 채
민간자본
기 타	3,300	-	-	-	3,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 7. : 대행사 선정(일괄계약 턴키방식 발주)

○ 2020. 2. : 해외군악대 참가 확정(9개국)

○ 2020. 5. : 관람권 판매 게시

○ 2020. 5. : 엑스포 개최 1년 연기 결정(5.26.)

□ 향후계획

○ 2020. 6. : 대행용역 중지 결정 및 통보(6.30.)

○ 2021. 3. : 대행용역 중지 해제 및 용역 착수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 행사기간 변경: (당초) 2020.9.18. ~ 10.4.(17일간) → 2021.10.1.~17.(17일간)

사업명

산동∼상덕(지방도624호)확포장사업

담당자

도로철도항공과 조용백(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아산시～천안시간 지역간 보조간선도로로서, 증가하고 있는 교통수요에 대한 효율적 대처 및 원활한 교통소통을 위한 도로확장이 필요함

○ 사업구간 주변 각종 공장들이 산재하고 있으나, 도로폭 협소 및 도로 선형 불량 등의 해소를 통한 교통사고 방지 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019.01~2028.12(10년)

○ 위 치 : 충남 아산시 음봉면 산동리 ~ 천안시 직산읍 상덕리

○ 규 모 : L=7.8km, B=19.5m(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 128,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	128,700	-	500	2,510	125,690
국 비
시 도 비	128,700	-	500	2,510	125,690
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1%)

○ ‘13. 02 : 충청남도 도로정비기본계획 반영

○ ‘18. 10 : 지방재정 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

○ ‘19. 03 : 지방재정투자사업 투자심사 완료

○ ‘19. 07 : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘21. 12 : 기본 및 실시설계 완료 예정

○ ‘22. 01 : 편입용지 보상 착수

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

원산도자연휴양림 조성사업

담당자

산림자원연구소(보령사무소)

정승원(☎635-7437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림휴양 인프라 확충 및 산과 바다가 어우러진 자연휴양림 조성

○ 사회적약자를 위한 무장애 인증 설계로 산림의 공익기능 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

○ 위 치 : 보령시 오천면 원산도리 산60번지 일원

○ 규 모 : 28.4ha(숲속의집, 캐빈하우스, 전망대, 테마산책로 등 편익시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	-	-	814	9,186
국 비	5,000	-	-	407	4,593
시 도 비	5,000	-	-	407	4,593
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019. 12. : 자연휴양림 지정 승인(산림청고시 제2019-90호)

○ 2020.  2. : 원산도자연휴양림 조성 추진계획 보고

○ 2020.  4. : 원산도자연휴양림 조성 기본계획 및 실시설계 용역 계약 체결

□ 향후계획

○ 2020. 4. ~ 11. : 원산도자연휴양림 조성 기본계획 및 실시설계 용역 완료

○ 2020. 9. ~ 12. : 소규모환경영향평가 등 인허가 용역 실시

○ 2021. 1. ~ 2022. 12. : 자연휴양림 조성계획 승인 및 조성

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 총면적 33.3ha → (변경) 총면적 28.4ha

※ 변경사유 : 자연휴양림 지정 승인 단계 멸종위기 동물 서식지 제척(4.9ha)

사업명

SW융합클러스터 2.0사업(특화산업강화)

담당자

미래성장과 조혜란(☎635-3958)

□ 사업목적 및 필요성

○ 디스플레이와 ICT/SW산업 융복합을 통한 혁신제품 개발 및 서비스 발굴

⇨ 지역 SW서비스 사업화로 지역경제 활성화 및 글로벌 시장 선도

□ 사업개요

○ 기 간 : ’19. 4. ~ ’23. 12.(5년간)

○ 위 치 : 아산시(둔포‧음봉․탕정‧배방), 천안시(직산‧성환‧입장‧풍세‧신부) 일원

○ 규 모 : 상용화 서비스 지원 40건, 기업지원 402건, 인력양성 1,400명 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,990	-	2,774	4,054	12,162
국 비	9,360	-	1,360	2,000	6,000
시 도 비	4,680	-	1,020	1,000	2,660
시군구비	4,680	-	340	1,000	3,340
지 방 채
민간자본	270	-	54	54	162
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○디스플레이와 ICT/SW간 융합을 통한 특화산업 강화 및 신시장 창출

- SW융합 상용화 과제 발굴 7건 ⇨ 상용화 5건(상용화율 72%), 고용 23명

○지역 ICT/SW융합 기업 성장 촉진 및 SW융합클러스터 생태계 활성화

- 맞춤형 기업지원 81건, SW융합 인력양성 456명 ⇨ 매출증가 54.6%

□ 향후계획

○ ’20. 7. : 기업별 지원 사업 신청․연계 지원 및 교육 실시

○ ’20. 12. : SW융합 마인드 확산 및 정보공유를 위한 성과보고회

사업명

서산의료원 간호기숙사 증축

담당자

보건정책과 차재현(☎635-4315)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병원 특성상 입원하고 있는 환자에게 24시간 최상의 간호서비스 제공을 위해 교대근무를 하는 간호인력에 대하여 안정된 주거 제공 필요

○ 기숙사 건립을 통해 간호사의 주거복지 개선으로 안정적 간호인력 수급계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년 (3년간)

○ 위 치 : 충남 서산시 동문동 210-24 일원

○ 규 모 : 부지 1,319㎡, 연면적 1,530.08㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,120	-	-	4,520	2,600
국 비	2,260	-	-	960	1,300
시 도 비	4,860	-	-	3,560	1,300
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019. 6. : 도 지방재정투자심사 심사결과 통보(조건부 추진)

○ 2019. 10. : 충청남도 공유재산 관리계획안 도의회 의결

○ 2019. 12. : 보건복지부 추가분 사업계획 검토 결과 확정

○ 2020. 2. : 보건복지부 국고 추가 지원계획 통보

○ 2020. 7. : (보건복지부)기숙사 설계 변경 협의(당초 2인실 → 1인실)

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 기본설계 실시

○ 2021. 3. : 실시설계 실시 및 공사 착공

○ 2021. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 57.8억원 → (변경) 71.2억원

○ 사업완료일 : (당초) 2020년 → (변경) 2021년

※ 코로나-19로 인한 지방의료원의 감염병전담병원 지정으로 사업순기 지연 및 사업기간 연장 예상

사업명

홍성의료원 의료시설 증축 및 리모델링

담당자

보건정책과 차재현(☎635-4315)

□ 사업목적 및 필요성

○ 분산배치 된 각 건물을 연계하는 체계를 구축하여 향후 성장과 변화를 위한 체계중심 건축이 필요하며 이를 통하여 환자와 직원을 위한 자연적 ·사회적 치유환경 조성과 현재 유사 의료원의 평균 이하인 진료시설을 본관동 증축사업으로 추가 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년 (3년간)

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍성읍 조양로 224 일원

○ 규 모 : 부지 17,353㎡, 연면적 1,600㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,154	-	573.8	3,800	2,780.2
국 비	3,300	-	9.9	1,900	1,390.1
시 도 비	3,854	-	563.9	1,900	1,390,1
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2018. 10. : 보건복지부 사업계획 검토 결과 확정

○ 2019. 6. : 도 지방재정투자심사 심사결과 통보(조건부 추진)

○ 2019. 10. : 충청남도 공유재산 관리계획안 도의회 의결

□ 향후계획

○ 2020. 8. : 기본설계 실시

○ 2020. 11. : 실시설계 실시

○ 2020. 12. : 공사 착공

○ 2021. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업완료일 : (당초) 2020년 → (변경) 2021년

※ 코로나-19로 인한 지방의료원의 감염병전담병원 지정으로 사업순기 지연 및 사업기간 연장 예상

사업명

충남육아종합지원센터 건립

담당자

출산보육정책과 윤미희(☎635-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저출산 극복을 위하여 영유아를 건전하게 양육하기 위한 기반조성

○ 다양한 수요자 요구를 반영할 물리적 공간 절대 부족

- 장난감ㆍ도서대여, 실내 놀이터, 보육실, 교육실 등

○ 양질의 보육서비스 제공을 위한 프로그램 개발 및 시군센터 보급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022년(3년)

○ 위 치 : 충남 예산군 삽교읍 RB5 구역 내 일부

○ 규 모 : 부지매입 1,653㎡, 연면적 3,306㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,050	-	-	2,000	12,050
국 비	4,000	-	-	1,000	3,000
시 도 비	10,050	-	-	1,000	9,050
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 충남육아종합지원센터 건립계획 수립 (‘19. 6.)

○ 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획안 심의( ‘19. 8.~10.)

○ 건축 기획용역(‘20. 6.~9.)

○ 부지매입 협의(‘20. 8.)

□ 향후계획

○ 부지 계약(‘20. 9.)

○ 설계공모 및 설계(‘20. 9.~’21. 12.)

○ 공사준비(‘22. 1~2.) 및 공사(’22. 3.~‘22. 12.)   ※ 개관 : ’23. 3.(예정)

사업명

충남501호 병원선 대체 건조

담당자

보건정책과 김연익(☎010-5401-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 병원선(2001년 2월 건조, 160톤) 노후화로 안전성·감항성 저하

○ 지역 의료혜택 격차 해소·도서주민 건강권 확보를 통한 지역균형 발전에 기여

○ 선박규모·진료시설 확충을 통한 이용자 안전과 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년 (3년간)

○ 위 치 : 충청남도 보령시 대천항 일원

○ 규 모 : 병원선 200톤급 1척

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,600	-	-	600	12,000
국 비	8,400	-	-	400	8,000
시 도 비	4,200	-	-	200	4,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0 %)

○ 2019. 7. : 병원선 건조 계획 수립

○ 2019. 10. ~ 11. : 지방재정투자심사 및 공유재산심의회 의결

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~ 2021. 6. : 병원선 대체건조 기본 및 실시 설계

○ 2021. 6. ~ 2022. 12. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 12,000백만원 → (변경) 12,600백만원

○ 변경사유 : 관공선 건조 관련 신규 법령(친환경 선박법)으로 인한 장비

및 시스템 추가·변경으로 선박 건조비용 상승

사업명

지역거점 혁신형 의사과학자

공동연구 사업

담당자

미래성장과 김민환(☎635-3960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의사(Doctor)의 임상 현장에 기반한 창의적 연구 수행을 통해 만성 신장병 관련 맞춤형 의료기술 개발 등 현장 중심 연구생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ∼ 2022. 12. (국가직접지원)

○ 위 치 : 순천향대학교 천안병원(천안시 동남구)

○ 규 모 : 시설 리모델링(50평), 연구시설 신설(100평), 연구과제 9건 수행 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,390	-	998	1,797	3,595
국 비	2,625	-	375	750	1,500
시 도 비	875	-	125	250	500
시군구비	800	-	200	200	400
기 타	2,090	-	298	597	1,195

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실험용 만성신장병 조기진단 장치 구축 등 연구환경 조성

○ ｢바이오 패치 활용한 진단기술 고도화 및 검증능력 향상화｣ 주제로 연구 수행

□ 향후계획

○ '20년 사업 추진 현황 점검('20. 8.), 및 연구 성과 분석('20. 12.)

○ '21년 본예산 편성('20. 12.) 및 사업 정산 보고('21. 2.)

사업명

융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업

담당자

산업육성과 나종철(☎635-3931)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 자동차부품산업은 국내 완성차 부품생산에 치중하여 독자 수출 역량 제고 및 국제안전기준(ISO26262)에 대응하기 위하여 고안전 플랫폼 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

○ 위 치 : 예산군 예산읍(충남TP 자동차센터 내) 등 2개소

○ 규 모 : 스마트센서 및 전장부품 고안전 고지능 설계시스템 구축(10개 품목)

및 스마트센서 및 전장부품 개발장비 확충(12종), 통합기능 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,600	-	-	3,390	5,210
국 비	6,000	-	-	2,373	3,627
시 도 비	2,600	-	-	1,017	1,583
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020년도 지역산업거점기관 지원사업 공모 선정 : ’19. 5. 1.

○ 협약체결(도, KIAT, 충남TP 등) : ’20. 6.

○ 수혜기업 모집공고 : 2020. 6. 23. ~ 7. 3

□ 향후계획

○ 수혜기업 선정(2020.7) 및 장비발주(~‘20. 12월)

○ 수혜기업 선정 및 연차평가 대응 : 2020. 9.~10.

사업명

자동차 부품업체의 소형전기상용차 부품기업 육성

담당자

산업육성과 나종철(☎635-3931)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 자동차 패러다임 변화(친환경․자율주행)에 대응하기 위해 소형전기상용차용 부품 개발을 지원하여 업종전환 및 글로벌 시장 진출 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : ’20. 5. ~ ’22. 4.(2년간)

○ 위 치 : 예산군 예산읍(충남TP 자동차센터 내) 등 2개소

○ 규 모 : 차량 및 부품 설계, 금형제작, 시뮬레이션, 차체조립 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,600	-	-	4,300	4,300
국 비	4,800	-	-	2,400	2,400
시 도 비	3,200	-	-	1,600	1,600
시군구비	600	-	-	300	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020년도 지역활력프로젝트 사업 선정 : ’19. 5. 30.

○ 협약체결(도, KIAT, 충남TP 등) : 2020. 5. 13.

○ 수혜기업 모집공고 : 2020. 7. 17.

□ 향후계획

○ 수혜기업 선정 : 2020. 8.

○ 부품설계 및 시제품제작 등 사업추진 : 2020. 9.~

사업명

힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 사업

담당자

산업육성과 방윤하(☎635-2925)

□ 사업목적 및 필요성

○ 온천의 산업 자원화를 통한 고부가가치 신성장 동력 발굴로 제조업 중심산업구조 다각화와 미래 먹거리 산업 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2022. 12. (31개월)

○ 위 치 : 아산시 염치일반산업단지 내

○ 규 모 : 부지 6,613㎡, 건축 연면적 3,101㎡ (지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	29,000	-	-	9,014	19,986
국 비	9,459	-	-	1,719	7,740
시 도 비	9,381	-	-	2,650	6,731
시군구비	9,500	-	-	4,425	5,075
지 방 채
민간자본	660	-	-	220	440
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8.06%)

○ ’20. 2. : 산업부 2020년도 사업시행계획 공고에 따른 사업계획 제출

○ ’20. 5. : ’20년 산업부「스마트특성화 기반구축사업」최종 지원대상 선정

○ ’20. 6. : 협약 체결 및 ’20년도 출연금 지원 완료

□ 향후계획

○ ’20. 7. : 2020년도「힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업」기업지원(비R&D) 수혜 기업 통합 공고 ※충남TP 홈페이지 게시

○ ’20. 7. ~ 9. : 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업 위치 타당성 조사 용역

○ ’20. 7. ~ 9. : 자체·중앙「장비심의위원회」심의 및 장비조달 발주 예정

○ ’20. 9. : 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 사업 설계 발주 및 계약 예정

○ ’20. 10. : 토지매입 계약 체결 (충남TP – 온양산단 주식회사)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 연면적 3,000㎡ → (변경) 연면적 6,613㎡

※「지원시설용지 → 산업시설용지」변경으로 면적 대비 금액 절감

○ 총사업비 : (당초) 29,200백만원 → (변경) 29,000백만원

사업명

지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원

담당자

미래성장과 김민환(☎635-3960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당뇨병 연구와 신약 개발을 통해 지역 인재를 양성하고, 대사질환에 특화된 의료 거점을 구축하여 미래의료 산업화를 위한 기반 조성

※ RLRC : Regional Leading Research Center

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ∼ 2026. 2. (국가직접지원)

○ 위 치 : 순천향대학교 의생명연구원 (천안시 동남구)

○ 규 모 : 당뇨병 치료 신약 및 신기술 개발

□그룹(1) : 지방조직 면역세포 다양성 및 염증반응이 췌장 베타세포 재생에 미치는 영향

□그룹(2) : 당뇨병에서 베타세포의 재생에 대한 연구

□그룹(3) : 줄기세포에서 분화된 베타세포의 활용에 대한 연구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,087백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,087	-	902	1,825	9,360
국 비	9,000	-	750	1,500	6,750
시 도 비	725	-	50	100	575
시군구비	1,425	-	50	100	1,275
기 타	937	-	52	125	760

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 연구센터 개소식 및 심포지엄 개최('20. 2.)

○ 베타세포-지방조직 관련성 분석과 인슐린 저항성 측정 위한 시스템 구축

□ 향후계획

○ '20년 사업 추진 현황 점검('20. 8.), 및 연구 성과 분석('20. 12.)

○ '21년 본예산 편성('20. 12.) 및 사업 정산 보고('21. 2.)

사업명

태양광 통합 유지관리 신산업 업종

다변화 기업지원 사업

담당자

에너지과 정종필(☎635-3460)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태양광 통합유지관리(O&M)분야 사업화 지원을 위한 장비구축과 모델

개발을 통해 에너지 신산업 육성 및 발전효율 증대기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2022. 5.(2년)

○ 위 치 : 당진시 석문국가산업단지 내

○ 규 모 : 기업지원 1식, 실내·실외 실습장 등 구축 1식, 인력양성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,731백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,731	-	-	3,856	2,875
국 비	4,000	-	-	2,000	2,000
시 도 비	900	-	-	450	450
시군구비	850	-	-	425	425
지 방 채
민간자본	981	-	-	981	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `20. 2. : 지역활력프로젝트 사업공고(산업부, KIAT)

○ `20. 4. : 지역활력프로젝트 사업 수행기관 확정(충남TP, KCL, 충남산학융합원)

○ `20. 6. : 지원사업 설명회·모집공고 및 선정평가위원회 개최

□ 향후계획

○ `20. 7. : 2차 사업설명회 및 모집공고

○ `20. 8. : 2차년도 사업예산 확보(산업부)

○ `20. 12. : 수행기관별 사업추진(8월) 및 실습장비 구축(12월까지)

○ `21. 5. : 1차년도 사업 운영평가 및 성과제출

□ 사업변경 내역

○ 사업명 및 총사업비 변경

- 사업명 : (당초) 디스플레이 업체의 태양광 통합유지관리 부품장비 기업육성사업

→ (변경) 태양광 통합 유지관리 신산업 업종 다변화 기업지원 사업

- 총사업비 : (당초) 7,100백만원 → (변경) 6,731백만원(국4,000,도900,시850,민간981)