사업명

충남진로융합교육원 설립 지원

담당자

교육법무담당관

노정수(☎635-3222)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내포신도시 內, 충남융합교육원 설립 ․ 운영을 통해 도내 학생·학부모·교사들의 문화·인성·진로교육 등 생태계 구축 및 진로·취업교육 내실화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~  2022. 9.(준공 예정)    * (주관) 도교육청

○ 위 치 : 내포신도시 산학협력시설용지 지구단지 내

○ 규 모 : 대지 29,840㎡, 연면적 58,800㎡

※ 지하1층, 지상3층으로 진로체험시설, 진로정보제공시설, 지원관리시설 등으로 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,100	-	31,200	8,700	4,200
국 비
시 도 비	9,500	-	1,000	4,300	4,200
시군구비
지 방 채
민간자본
기타(교육청)	34,600	-	30,200	4,400	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 토지매입 완료(2020. 12. 22.)   * 토지감정평가 : 9,578백만원

○ 충남진로융합교육원 신축 공사 착공(2021. 4. 12.~2022. 8. 4.) *착공일 : 2021. 4. 26.

□ 향후계획(도 교육청)

○ 진로융합활동 프로그램 운영을 위한 내부 전시체험시설 구축

※ (발주, 2021.3월), (설계협의, 2021.7월∼11월), (구축공사, 2021.12월∼2022.6월)

사업명

충남 장애인가족 힐링센터 건립

담당자

장애인복지과

구재원(☎635-4278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인가족의 과도한 양육부담으로 인한 스트레스 및 장애인과 가족이 이용하는 시설의 한계로부터 정서적 안정 및 휴식 공감대를 형성할 수 있는 전국 최초 장애인 가족 힐링 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2024. 11.

○ 위 치 : 태안군 안면읍 승언리 산18-1

○ 규 모 : 부지 29,900㎡, 연면적 6,250㎡(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,929백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	26,929	1,290	-	840	24,799
국 비	12,735	-	-	500	12,235
시 도 비	11,614	1,290	-	240	10,084
시군구비	2,580	-	-	100	2,480
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2018. 7. : 「발달장애인가족 힐링센터」설립 방침 수립

○ 2019. 9. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

○ 2019. 12. : 충남 장애인가족 힐링센터 건립 기본계획 수립

○ 2020. 6. ~ 9. : 도 지방재정투자심사 조건부 승인 및 공유재산심의 통과

○ 2021. 2. ~ 7. : 건축기획설계 및 공공건축 심의 통과

□ 향후계획

○ 2021. 8. ~ 11. : 설계 공모 추진

○ 2021. 12. ~ 2022. 11. : 기본 및 실시 설계

○ 2022. 12. ~ 2024. 11. : 건립공사 추진 및 개원

사업명

내포 혁신창업공간(지식산업센터) 건립

담당자

소상공기업과

김영진(☎635-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내포신도시 도시첨단산업단지 활성화를 위한 맞춤형 임대공간 제공

○ 첨단산업과 연계한 중소·벤처기업의 창업 및 연구 활동 공간 지원 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년 (4년)

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 1665 (내포 첨단산업단지 내)

○ 규 모 : 부지면적 5,692.4㎡, 건축연면적 14,074㎡, 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,370	-	1,000	2,400	21,970
국 비	16,000	-	1,000	1,500	13,500
시 도 비	9,370	-	-	900	8,470
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2019. 3. ∼ 10. : 타당성 조사 용역 추진

○ 2020. 1. : 2020년 정부예산 반영 (설계비 10억원)

○ 2020. 3. : 기본계획 수립

○ 2020. 6. ~ 9. : 지방재정투자심사, 공유재산관리계획, 중기지방재정계획

○ 2020. 10. : 총사업비 확정 (중기부, 국비 160억원)

○ 2020. 12. : 충남개발공사 사업위탁 협약 및 국비 10억원 교부

○ 2021.  3. : 설계자(제안공모방식) 선정, 기본 및 실시설계 착수

○ 2021.  5. : 사업부지 매입 및 소유권 등기 완료

□ 향후계획

○ 2021. 3. ∼ 2021. 11. : 기본설계 및 실시설계 추진

○ 2022. ∼ 2023. : 건축공사

사업명

국방대 체력단련장 조성지원

담당자

균형발전과

고은별(☎635-3663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2007년 국방대가 논산으로 이전하기로 결정됨에 따라 우리 道가 2010년에 수립한 ‘이전지원계획’에 반영된 사업으로,

- □ 국방부와의 신뢰보호 측면 □ 국방산단 조성, 육사 이전유치 등 우리 道 국방산업 육성정책을 원활히 추진하기 위해 이행이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 충남 논산시 양촌면 거사리 578일원 (국방대 이전부지 내)

○ 규 모 : 골프장(9홀), 클럽하우스 1동, 기타 지원시설 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,800	9,800	1,000	2,218	15,782
국 비	9,800	9,800	-	-	-
시 도 비	19,000	-	1,000	2,218	15,782
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 1. : 지원계획 수립 (도지사 방침)

○ 2020. 3. : 투자심사 완료

○ 2020. 9. : 국방대학교-충남개발공사 간 위·수탁계약 체결

○ 2021. 1. : 문화재 시굴 및 표본조사용역 계약 및 착수

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

□ 향후계획

○ 2022. 4. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2022. 5. : 공사 착공

사업명

충남국제전시컨벤션센터 건립

담당자

미래성장과

김지혜(☎635-3961)

□ 사업목적 및 필요성

○「천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구」조성사업의 랜드마크이자 MICE산업

인프라 확충을 위해 전시+회의+투자를 연계하는 B2B전문 산업지원형 국제전시

컨벤션센터 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

○ 위 치 : 충남 천안시 서북구 불당동 (「천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구」內)

○ 규 모 : 지하1층 ~ 지상4층, 연면적 51,900㎡, 부지면적 45,000㎡

- 전시시설9,000㎡, 회의시설4,768㎡, 부대시설20,042㎡, 주차장18,090㎡(지하)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 222,496백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	222,496	7,888	13,469	12,961	188,178
국 비
시 도 비	158,400	-	2,608	200	155,592
시군구비	62,196	7,888	10,861	10,861	32,586
지 방 채	1,900	-	-	1,900	-
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1%)

○ 2018. 7. : 충남국제전시컨벤션센터 건립 기본계획 수립

○ 2019. 3. : 전시산업발전협의회 협의 완료

○ 2019. 12. : 지방재정 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

○ 2020. 4. : 지방재정투자사업 투자심사 완료

○ 2021. 5. : 기본설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 11. ~ 12. : 기본설계 완료 예정 및 실시설계 착수

○ 2022. 5. : 착공  → 준공 (2024. 12.)

사업명

제조기술융합센터 테스트베드 구축

담당자

미래성장과 이상열

(☎ 041-635-3959)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주력산업(디스플레이, 자동차부품) 분야 중소기업 현장 스마트화를 위한

제조관련 DATA 수집 ‧ 분석, 시범공정 테스트 베드 구축

* 제조기술융합 : 제조기술 + 디지털기술 융합, 산업과 산업 간 융합

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 충남 천안시 서북구 불당동 555-7번지 일원

* 천안아산 KTX역세권 R&D집적지구(충남 천안아산 강소연구개발특구) 內

○ 규 모 : 부지면적 5,000㎡ / 연면적 7,500㎡ / 지하 1층 ~ 지상 6층

- 1~2층(테스트베드 구축), 3~4층(기업 입주), 5~6층(강소특구 캠퍼스)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	44,880	-	3,570	6,370	34,940
국 비	9,800	-	1,400	2,800	5,600
시 도 비	29,000	-	500	2,450	26,050
시군구비	5,550	-	1,670	970	2,910
지 방 채
민간자본	530	-	-	150	380
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.9%)

○ 2020. 10월 사업 착수

○ 1차년도 장비(4종, 13.5억원) 도입 심의 통과(과기부, 2020.12.23)

□ 향후계획

○ 테스트베드 구축 : DATA수집‧분석을 위한 연차별 장비 도입(30종, 2020~2024)

○ 센터 건립 : 2021년) 설계 → 2022년) 착공 → 2023년) 완공

사업명

대학 내 산학연협력단지 조성

담당자

미래성장과

정찬호(☎635-3960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남의 융합바이오(그린, 레드 바이오 + ICT 융합) 분야 기술기반 전주기적 기업성장 지원 및 지속가능한 혁신 생태계 조성으로 지역의 신산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 5.

○ 위 치 : 순천향대학교 산학협력단(충남 아산시 신창면 순천향로22)

○ 규 모 : 산학연협력단지 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,290	2,825	2,545	2,545	5,200
국 비	7,890	-	1,945	1,945	4,000
시 도 비	800	-	200	200	400
시군구비	800	-	200	200	400
지 방 채
민간자본	800	2,825	200	200	400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24.7%)

○ 융복합 혁신 공간조성

○ 기술개발을 위한 R&D 및 성장지원 프로그램 지원

□ 향후계획

○ 혁신 인프라 직접화 및 기업·대학 소통공간 조성

○ 공유업종 혁신클러스터 구성을 통한 기업 성장지원

사업명

수면산업 실증기반 기술고도화 지원사업

담당자

산업육성과

장동원(☎635-2925)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수면제품 트랙레코드 확보 및 개인 맞춤형 수면 빅데이터 분석 결과를 통한 수면산업 고도화 및 글로벌 경쟁력 강화

○ 수면산업 기술지원 플랫폼 구축·운용에 따른 기업지원체계 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2023. 12. (43개월)

○ 위 치 : 충남 아산 배방읍 장재리 680번지(연구개발집적지구)

○ 규 모 : 센터 구축 1개소, 장비구축 48종 80대, 기업지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,100	-	3,106	9,094	12,900
국 비	8,000	-	1,556	2,244	4,200
시 도 비	4,500	-	-	2,500	2,000
시군구비	12,000	-	1400	4,200	6,400
지 방 채
민간자본	600	-	150	150	300
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 10. : 지방재정투자심사 의뢰·심의 완료

※ 조건부 승인: 중앙지방재정계획 반영, 사업 종료 후의 자립화 운영계획 수립

○ 2021. 1. : KIAT 시행 연차평가 결과, 2차년도(2021.) “계속” 추진

※ 1차년도 성과: 거점센터 구축 공정도 20%, 장비 3종 3대 도입, 연구 및 시험 분석법 개발 653건, 기업지원 56건, 네트워크 활용 9회, 정보시스템 구축 1건, 교육과정 개설 6건, 교육과정 수료 19명

○ 건축 기본 및 실시설계 착수(2021. 6.), 자체 장비도입심의(2021. 7.)

○ 2차년도 기업지원 선정평가(2021. 6.~7.)

□ 향후계획

○ 센터 건축 착공(2021. 12.) → 건축 준공(2022. 8.)

○ 장비도입심의(중앙)(2021. 8.) ➝ 장비발주(2021. 9.) ➝ 장비구축(2021. 12.)

○ 2차년도 기업지원 사업수행(~2021. 10.) ➝ 완료보고(2021. 11.)

사업명

충남 사회적경제 혁신타운 조성사업

담당자

사회적경제과

신광호(☎635-3975)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회적경제기업에 대한 통합지원체계 구축 및 제조·유통 혁신거점 조성

- 국정과제 중 하나로 지역 불균형 해소와 사회적경제 분야 질적성장 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 청양군

○ 규 모 : 본관 1동(연면적 7,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,000		74	626	27,300
국 비	14,000	-	37	313	13,650
시 도 비	8,400	-	22	188	8,190
시군구비	5,600	-	15	125	5,460
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 4. : 사회적경제 혁신타운 조성 공모사업 선정(산자부)

○ 2020. 7. : 지방재정 중앙투자심사 완료(행안부)

○ 2021. 5. : 기획설계용역 완료

○ 2021. 7. : 제안공모(기본 및 실시설계용역) 발주

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 운영체계 구축 및 프로그램 개발

○ 2023. 7.  : 기업입주, 시범사업 운영 등

□ 사업변경 내역

○ 정밀안전진단 결과에 따라 사업규모 및 사업기간 변경(총사업비 변동 없음)

- 사업규모: (당초) 리모델링 및 증축(연면적 12,780㎡) → (변경) 신축(연면적 7,500㎡)

- 사업기간: (당초) 2020. 7. ~ 2022. 12. → (변경) 2020. 7. ~ 2023. 6.

사업명

충남도립미술관 및 공영주차장 건립

담당자

문화정책과

박정규(☎635-3825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남미술을 바탕으로 다양한 콘텐츠와 생애 주기별 교육체계 마련 등 도민 문화예술 향유・확대를 위한 21세기 충남을 대표하는 창의적 공동체 미술관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 홍성군 홍북읍 도청대로 577번지(충남도서관 옆)

○ 규 모 : 연면적 26,680㎡(미술관 12,680㎡, 공영주차장 14,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 93,300백만원         *설계비 : 2,995백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	93,300	-	-	12,900	80,400
국 비	13,500	-	-	-	13,500
시 도 비	79,800	-	-	12,900	66,900
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 2021. 3. 2. 국제지명설계공모 지명신청서 공고

○ 2021. 4. 12. 지명대상자 선정(총 31팀 중 6팀)

○ 2021. 4. 12. 지명설계공개모집 공고

○ 2021. 4. 21. 현장설명회 개최

○ 2021. 7. 13. 작품접수

○ 2021. 7. 19. 심사위원회 작품심사

○ 2021. 7. 21. 심사결과 발표 및 기자 간담회(지사님)

□ 향후계획

○ 2021. 8.          계약체결 및 착수

○ 2021. 8. ~ 2022. 7.  충남미술관 기본 및 실시설계

○ 2022. 8. ~ 2023. 12. 충남미술관 착공 및 준공

사업명

충남스포츠센터 건립공사

담당자

체육진흥과

김구남(☎635-2433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 및 혁신도시 소재지로 내포신도시의 문화, 여가 수요에 부응하는 고품격 체육·문화 기반시설 확충

○ 충남 체육 행정 구심점으로 체육 서비스 제공 극대화 및 랜드마크 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ∼ 2023. 5.(6년)

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 목리 1967 외 1필지

○ 규 모 : 부지 20,614.7㎡, 연면적 13,344.07㎡(2동, 지하1/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	49,500	6,760	3,000	7,500	32,240
국 비	8,700	2,300	3,000	-	3,400
시 도 비	40,800	4,460	-	7,500	28,840
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2017. 7. : 기본계획(안) 수립

○ 2017. 11. : 중앙투자심사 조건부 승인(행안부)

○ 2019. 1. ~ 12. : 건축설계 공모 및 설계용역

○ 2020. 1. ~ 8. : 광역시·도 수영장 규모 기준(안) 협의 및 결정(행안부)

○ 2020. 11. ~ 12. : 중앙투자심사 최종 승인(행안부) 및 사업계획 변경 승인(문체부)

○ 2021. 1. ~ 2. : 계약공사원가 사전검토(조달청), 설계안정성 검토(국토안전관리원)

○ 2021. 3. ~ 6. : 공사입찰 및 착공

□ 향후계획

○ 2023. 5. : 준공

사업명

제67회 백제문화제(2021대백제전)지원

담당자

관광진흥과

최재호(☎635-3882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 65년 전통을 자랑하는 백제문화제를 세계적인 축제로 개최하여 백제의        진취성과 고유한 문화유산을 세계에 알리고 글로벌 축제로의 이미지를        확고히 정립하여 대한민국 대표 역사문화제로 부각

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. /※ 대백제전 연기(2023년)

○ 위 치 : 공주시 및 부여군 일원

○ 규 모 : 총 128만명(103개 프로그램 : 재단 17, 공주 42, 부여 44)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,351백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,351	-	-	-	14,351
국 비
시 도 비	2,317	-	-	-	2,317
시군구비	4,200	-	-	-	4,200
지 방 채
민간자본
기 타	7,834	-	-	-	7,834

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 12. : 2021 대백제전 기본계획 수립 및 타당성 조사연구

○ 2021. 3. : 재단 이사회 개최 결과, 2021 대백제전 개최 연기

○ 2021. 3. : 대백제전 시그니처 콘텐츠 및 프로그램 기본계획(안) 수립

○ 2021. 6.~ : 격년제 포함, 백제문화제 장기발전과제 연구용역 추진

□ 향후계획

○  2022년 pre 대백제전 및 2023년 대백제전 개최

- (재)백제문화제재단 조직개편 및 예산편성 계획 수립 : 2021. 9.

□ 사업변경 내역

○ 코로나19 확산에 따른 대백제전 개최 연기(사업기간 및 내용 등 변경)

- 사업기간 : (당초) 2021년 → (변경) 2023년

- 사업내용(테마) : (당초) 무령왕 갱위강국 선포 1,500주년, 무령왕릉 발굴 50주년

(변경) 성왕즉위 1,500주년, 금동대향로 발굴 30주년

사업명

복수∼진산(지방도635호)확포장사업

담당자

도로철도항공과

김준운(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 635호선은 대전 이남과 국도 17호선을 연결하는 지역의 광역교통노선으로 전체 구간 14.46km 중 10km구간을 완료, 잔여구간인 4.46km 구간의 교통혼잡 해소와, 장래 교통수요 증가에 효율적 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2029년

○ 위 치 : 금산군 복수면 백암리 ~ 금산군 진산면 교촌리

○ 규 모 : 연장=4.46㎞, 폭=19.5m (4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 107,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	107,100	120	550	900	105,530
국 비
시 도 비	107,100	120	550	900	105,530
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (실시설계 추진 중)

○ 2020. 6. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2020. 11. : 비교노선안 주민설명회 개최

* [설계용역] : (기간) ’20.06∼‘22.06. (용역비) 2.137백만원. (용역사) ㈜다산컨설턴드 외 1

□ 향후계획

○ 2021. 하반기 : 노선 결정 및 관계기관 협의

○ 2022. 6. : 용역 준공

사업명

서면∼비인(지방도607호)확포장사업

담당자

도로철도항공과

김준운(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 607호(서면~비인 구간)는 서해안 고속도로, 국도 21호와 연계 춘장대해수욕장, 홍원항, 마량포구, 신서천화력발전소의 주요 접근노선 이나,

○ 기존 2차로 도로가 선형불량 및 차로 폭 협소로 통행안전과 관광수요증가 대처 미흡, 도로사업을 통한 교통사고 방지 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2028년

○ 위 치 : 서천군 서면 도둔리 ~ 서천군 비인면 성북리

○ 규 모 : 연장=4.9㎞, 폭=19.5m (4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,100	110	550	400	28,040
국 비
시 도 비	29,100	110	550	400	28,040
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (실시설계 추진 중)

○ 2020. 6. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2020. 11. : 비교노선안 주민설명회 개최

* [설계용역] : (기간) 2020.06∼2022.06. (용역비) 1,157백만원. (용역사) ㈜삼보기술단 외 1

□ 향후계획

○ 2021. 하반기 : 노선 결정 및 관계기관 협의

○ 2022. 6. : 용역 준공

사업명

KTX공주역 진입지방도 선형개량사업

담당자

도로철도항공과

이중원(☎635-4682)

□ 사업목적 및 필요성

○ KTX 공주역 활성화를 위하여 기존 지방도 노선의 불량한 선형 개선으로 접근성 향상 및 이용객 편의도모, 지역균형발전 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 충남 공주시 이인면 이인리, 복룡리 일원(지방도697, 643호)

○ 규 모 : 선형개량 3.06km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,000	2,500	2,000	2,850	13,650
국 비
시 도 비	21,000	2,500	2,000	2850	13,650
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(사업 추진 중, 공정률 25%)

○ 2019. 8. ~ 2021. 6. : 1공구(1~2차분) 공사추진

○ 2019. 12. : 도로구역 결정(변경) 고시

○ 2020. 11. : 도로구역 결정(변경) 고시(2차)

○ 2021. 6. : 1공구 3차분 착공

□ 향후계획

○ 2021. 하반기. : 수용재결 신청(중토위) 및 지반보강 시행

○ 2022. 7. : 1공구 공사 준공

○ 2022. 8. ~ 2025. 12. : 2,3공구 공사 추진

사업명

어천∼공주(지방도625호)확포장사업

담당자

도로철도항공과

김준운(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 625호선은 부여군 세도면과 공주시 우성면을 연결하는 보조간선도로로 미 개설 구간인 공주시 우성면 어천리～평목리 구간의 도로 개설 시급

○ 도로 개설을 통해 공주시 백제역사 유적지구의 세계문화유산 등재에 따른 국제관광 환경변화에 대응, 원활한 교통체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2026년

○ 위 치 : 공주시 우성면 보흥리 ~ 우성면 평목리

○ 규 모 : 연장=3.95㎞, 폭=10m (2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,900 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	48,900	3,740	9,296	5,510	30,354
국 비
시 도 비	39,900	3,740	296	5,510	30,354
시군구비
지 방 채	9,000	-	9,000	-	-
민간자본
기 타

□ 추진상황 (사업 추진 중, 공정율 2% )

○ 2016. 6. ~ 2018. 6. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2020. 12. : 공사 및 감리용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 하반기 : 구조물공(교량) 및 토공 추진

○ 2026. 12. : 사업 준공

사업명

충남소방복합시설 조성사업

담당자

소방행정과

배석제(☎635-5565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 분산 운영 중인 주요 소방기관(소방학교, 항공구조대, 장비정비센터)의 집중화를 통해 소방교육 및 행정서비스 제공의 효율성과 전문성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ～ 2023년 12월(7년)

○ 위 치 : 충청남도 청양군 비봉면 록평리 12-1외 64필지

○ 규 모 : 부지면적: 388,789㎡, 연면적 17,042㎡, 10개동, 4개 시설물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 82,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	82,900	4,171	8,749	6,876	63,104
국 비
시 도 비	79,000	4,071	5,149	6,676	63,104
시군구비	3,900	100	3,600	200	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2016. 10. : 충청남도 소방복합시설 조성 기본계획 수립(도지사 결재)

○ 2019. 8. ∼ 2020. 2. : 지방재정 중앙 투자심사(재심사)

○ 2021. 6. : 기본 및 실시설계 용역 최종보고회(행정부지사 주재)

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 조달청 계약 의뢰(공사비 300억 이상)

○ 2021. 9. : 시공사 선정 및 공사 착공

○ 2023. 12. : 준공

○ 2024. 상반기 : 기관입주