◈10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지 11)

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

(가칭)충남여성가족플라자건립

담당자

여성가족정책관 김지혜(☎635-4982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 가족 정책의 기획·종합·여성권익 증진 및 역량개발, 지역 양성평등

문화 확산의 플랫폼 조성을 위한 충남여성가족플라자 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025

○ 위 치 : 내포신도시 내 RM8(충남 예산군 삽교읍 목리 888-1번지 일원)

○ 규 모 : 연면적 7,650㎡, 지하1층 ~지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	42,400	0	0	2,040	40,360
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	42,400	0	0	2,040	40,360
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ ‘20. 08 : (가칭)충남여성가족플라자 건립을 위한 타당성 연구용역 완료

○ ‘20. 12 : 기본계획 수립

○ ‘21. 09 : 충청남도 의회 공유재산관리계획 심의 통과

○ ‘21. 11 : 지방재정투자사업 투자심사 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 하반기 : 부지매입 추진 및 실시설계용역 의뢰

○ ‘25. 하반기 : 건립공사 완공 및 관계기관 입주·운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

홍성의료원 의료시설 증축 및 리모델링

담당자

보건정책과 전소현(☎041-635-4305)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의료시설의 질적 개선을 통해 다양한 의료수요에 적극 대응하고 의료이용       만족도 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022∼2024

○ 위 치 : 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224번지 내

○ 규 모 : 부지면적: 17,353㎡

/ 건축연면적 전체:7,658㎡(리모델링:6,170㎡증축:1,488㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  21,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	21,250			2,520	18,730
국 비	10,625			1,260	9,365
시 도 비	10,625			1,260	9,365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.3%)

○ 2021. 8. : 2021년 정기 제3차 지방재정투자심사 완료

○ 2021. 10. : 지역거점공공병원 기능보강사업 사업승인

○ 2022. 06. : 감염병 긴급치료병동 사전검토 및 공공건축심의 완료

○ 2022. 08. : 감염병 긴급치료병동 설계용역 착수(본관 증축 ‘22.03월 착수)

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 복지부 기본설계 심의 완료(본관증축: ’22.08월)

○ 2023. 05. : 설계적정성검토(실시설계)심의 및 건축허가 완료(본관 증축: ’22.12.월)

○ 2023. 06. : 감염병 긴급치료병동 공사 착공(본관 증축:  ’23.01월 착공)

○  2024. 05. : 준공

사업명

노동안전문화회관 건립

담당자

일자리노동정책과

주현정(☎635-3414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업재해로부터 안전한 노동환경을 구축하고 체계화된 산업재해 예방 활동 지원을 위한 충청남도 노동안전회관을 건립하여 산업안전교육·홍보, 실태조사 및 정책연구, 안전체험 교육장 운영을 통해 노동자의 건강권 보호와 산재사고 감축에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 3.

○ 위 치 : 충남 경제진흥원내 테니스장 (아산시 염치읍 송곡리 244-16)

○ 규 모 : 바닥 면적 565.05㎡, 건물 연면적 1,598.04㎡, 지상3층 / 토지 991㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,700	20	-	-	7,680
국 비
시 도 비	7,700	20	-	-	7,680

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 건축기획 용역(’22.4.~6.) : 어반트리건축사사무소

○ 공공건축 심의(’22.5.) : 건축도시과

○ 정관 변경 관련 협의(’22.7.) : 충남지역중소벤처기업청, 경제진흥원

□ 향후계획

○ 설계발주 준비 및 설계공모, 건축 설계(’22.8~’23.5.)

○ 공사발주 준비 및 공사(’23.6~’25.3.)

□ 사업변경 내역

○ 연면적 : (당초) 1800㎡ → (변경) 1598.04㎡, 건축비 상승에 따른 건물면적 축소

○ 건물규모 : (당초) 지하1층, 지상3층 → (변경) 지상3층

○ 사업비 : (당초) 60억 → (변경) 77억, 건설단가 상승에 따른 추가공사비(17억)

○ 사업기간 : (당초) 23. 12. 준공 → (변경) 25. 3., 공공건축 설계기간 및 공사기간 반영

사업명

재생‧재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업

담당자

산업육성과 노곤래(☎3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단 바이오소재 또는 기술을 활용한 재생‧재건 관련 산업기술의 실증과 실증에 필요한 생물학적 안전성평가 및 임상시험 지원을 통해 기업들의 국내외 시장진출 지원 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2025. 12.(5년)

○ 위 치 : 아산시 배방읍 천안아산 R&D 집적지구

○ 규 모 : 첨단 생체적합성 소재 기반의 재생‧재건 산업기술 실증센터‧장비 구축, 제품 생물학적 안전성 평가와 임상시험 지원체계 마련

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,500		4,600	9,030	12,870
국 비	10,000		1,450	2,250	6,300
시 도 비	5,780		460	2,640	2,680
시군구비	8,720		690	4,140	3,890
민간자본	2,000		2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ '21. 산업혁신기반구축사업 ‘지원대상’ 최종 확정(‘21.5.27)

○ 평가의견 및 KIAT 협의 의견 반영한 총사업비 변경(‘21.6.)

○ (센터구축) 부지매입('22. 3.), 실시설계 착수('22. 4.)

○ (장비구축) 1차년도 29종 36대 / (기업지원) 1차년도 25개사

□ 향후계획

○ 연차별 사업추진, 센터건축공사('22. 12.~'23. 12.)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- (당초) 28,000백만원 → (변경) 26,500백만원(국10,000, 도5,780, 시8,720, 민2,000)

사업명

지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업

담당자

산업육성과 노곤래(☎3932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소프트웨어와 첨단 제어기술이 융합한 국산 스마트 의료기기 분야의 글로벌 시장 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2025. 12.(5년)

○ 위 치 : 아산시 배방읍 천안아산 R&D 집적지구

○ 규 모 : 지능형 의지보조기기·자동이동기기 관련 센터‧장비설치 및 시험평가·인증·임상시험·병원사용실적 등 트랙레코드를 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,500		4,877	7,390	13,233
국 비	10,000		1,784	2,011	6,205
시 도 비	5,000		228	1,829	2,444
시군구비	8,000		365	3,550	4,085
민간자본	2,500		2,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ '21. 산업혁신기반구축사업 ‘지원대상’ 최종 확정(‘21.5.27)

○ 평가의견 및 KIAT 협의 의견 반영한 총사업비 변경(‘21.6.)

○ (센터구축) 부지매입('22. 3.), 실시설계 착수('22. 4.)

○ (장비구축) 1차년도 9종 13대 / (기업지원) 1차년도 9개사

□ 향후계획

○ 연차별 사업추진, 센터건축공사('22. 12.~'23. 12.)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- (당초) 28,000백만원 → (변경) 25,500백만원(국10,000, 도5,000, 시8,000, 민2,500)

사업명

첨단 분말소재 부품개발 기반구축 사업

담당자

산업육성과 이승길(☎635-2926)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금속분말 소재부품 기반구축 및 기업 기술개발 지원을 통한 차세대 소재부품

산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. 1. ~ 2025. 12. 31.(5년간)

○ 위 치 : 천안시 서북구 천안대로 1223-24 공주대 천안공과대학

○ 규 모 : 센터(1개동) 및 장비구축(17종), 분말소재‧부품 핵심기술 개발, 기술

지원(시험‧실증‧인증 및 신뢰성 평가 등), 인력양성(전문 인력 교육 410명,

연계 프로그램 25건, 국제협력교류 9건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,970		1,920	1,950	9,100
국 비	6,970		1,020	1,050	4,900
시 도 비	1,500		225	225	1,050
시군구비	1,500		225	225	1,050
지 방 채
민간자본	3,000		450	450	2,100
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ ‘21. 5. ~ ‘21. 6. : 산업부 공모 확정(5. 24.), 지방재정투자심사 완료(조건부, 6. 1.),

전자협약 및 사업착수(6월)

○ 장비구축 7건(완료 5, 진행 2), 기술지원 21건, 산업체 전문인력 교육 80명

□ 향후계획

○ (기반구축) 센터 준공 : ′23. 3.

※ 센터는 공주대 천안공과대학 소유 부지(3,443㎡)에 공주대가 건축 중 [현물]

사업명

충남 광역형 (가칭)기후환경교육원 조성

담당자

기후환경정책과 황미라

(☎635-2717)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후위기의 심각성을 인식하고, 일상적인 삶에서 탄소배출을 줄이는 생활양식을 학습·실천하는 전문 교육기관 조성   ※ 전국 道 단위 9개소 운영(충남만 미조성)

□ 사업개요

○ 기간·위치 : 2021~2024년 / 청양군 대치면 작천리 178(칠갑산휴양랜드)

○ 규    모 : 부지 57,380㎡, 건물 4,358㎡(신축 1,650㎡, 리모델링 2,708㎡)

○ 사업내용 : 전시체험관, 교육관, 캠핑장, 탄소저감시설(에너지, 숲) 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,800	1,000	20	3,872	15,908
국 비	9,900	-	20	3,872	6,008
시 도 비	9,900	-		-	9,900
시군구비	1,000	1,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ※ 총사업비 대비 예산집행률 7.5%(’22.7월)

○ 충남 광역형 기후환경교육원 조성사업 설계용역 진행 중(’22. 6. 16.~ ’23. 2. 10.)/ 722,000천원 / 기본 및 실시설계 1식(신축건물 2동, 리모델링, 야외 조경 등)

□ 향후계획

구 분	기 간	내 용	비고
측량, 조사 및 인증	2022.2.～2023.2.	측량 및 지질조사, 안전진단
		각종 인증
교육 콘텐츠 개발	2022.9.～2023.12.	교육 콘텐츠 및 프로그램 개발
공사	2023.3.～2024.6.	공사 일상감사 및 계약심사
		부지조성, 건축물, 조경 공사 등
		시운전기간

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
사업기간	연수원 공사(’22.11.～’23.12.) 개원(’24.1.)	연수원 공사(’23.3.～‘24.6.) 개원(’24.6.)
사업내용	신축건물 2동 : 탄소제로실습관(3층, 950㎡), 캠핑지원센터(1층, 300㎡)	신축건물 2동 : 전시체험관(2층, 1,500㎡), 캠핑지원센터(1층, 150㎡)

사업명

그린수소 생산 수전해 부품 개발지원 플랫폼 구축

담당자

에너지과     최윤진(☎635-2934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기업 업종전환 지원, 기술지원, 시험□평가 지원, 전문인력 양성, 사업화 지원을 통해 그린수소 생산 산업 활성화, 부품 국산화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3년)

○ 위 치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 내

○ 규 모 : 센터건축(825㎡), 신규장비 11종 12대·개선장비 2종 2대·장비

유틸리티 5종 구축, 기업 기술지원, 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,464	0	0	4,665	7,799
국 비	5,980	0	0	1,817	4,163
시 도 비	1,000	0	0	284	716
시군구비	5,400	0	0	2,536	2,864
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	84	0	0	28	56

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 부지매매계약 체결

○ 설계용역 발주 준비 중

□ 향후계획

○ 건축설계 완공 및 공사착공(΄22. 11.)

○ 사업완료(΄24. 12.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대천항 관공선 통합사무실 건립

담당자

해운항만과 김진우(☎635-4825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 해양관리 등 관공선 운영부서간 행정업무 연계 및 선박직원복무환경 개선도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023

○ 위 치 : 보령시 신흑동 2247-4 외 1필지

○ 규 모 : 건물 1동 신축(연면적 1,335.61㎡)[사무실, 조사실, 회의실, 창고 등]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,579백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,579	2,714	194	2,517	2,154
국 비	2,700	2,700
시 도 비	4,879	14	194	2,517	2,154
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 20.  3. 기획설계 용역 착수

○ 20.  7. 공공건축심의 조건부 의결

○ 20.  8. 도 종합건설사업소 건립 의뢰

○ 20. 12. 제안설계 공모 심사

○ 21.  2. 실시설계 착수

○ 21. 10. 지방재정 투자심사 통과(행정안전부)

○ 22.  4. 건설사업관리용역 건설기술심의

○ 22.  6. 공사 착공

□ 향후계획

○ 23. 7. 관공선 통합사무실 건립공사 준공

사업명

광시∼운곡 지방도 확포장공사

담당자

도로철도항공과 김준운(☎4673)

종합건설사업소 박경수(☎7540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 604호(광시~운곡구간)는 국지도 70호 지방도619호와 연계 예산군 광시면과 청양군 운곡면을 연결하는 노선으로 도로폭이 협소하고 선형이 불량하여 이용자의 불편 해소와 지방도 미연결 노선에 대한 도로개설로 지역 접근성 개선이 필요하며 지방도 미개설 구간 및 시설기준 미달 도로구간에 대해 지방도 개설을 통한 통행 안정성 확보로 교통편익 증진과 지역간 교류 활성화에 따른 지역균형 발전에 도모코자 추진하는 사업임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2029.

○ 위 치 : 예산군 광시면 관음리~ 청양군 운곡면 미량리(지방도604호)

○ 규 모 : L=6.74km , B=10.0m (2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	46,490	90	200	700	45,500
국 비
시 도 비	46,490	90	200	700	45,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중 1%)

○ ‘21. 06. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ ‘21. 07. : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 공고 및 평가

○ ‘21. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘21. 11. : 착수보고회 개최

□ 향후계획

○ ‘22. 04. : 관계기관 협의

○ ‘22. 06. : 주민의견 청취 공고 및 주민설명회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동해∼부곡 지방도 확포장공사

담당자

도로철도항공과 김준운(☎4673)

종합건설사업소 이명석(☎7539)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 629호(동해~부곡 구간)는 국도 32호, 국도 21호 지방도 618호, 604호, 623호와 연계되는 노선으로 공주시 유구읍 동해리와 공주시 사곡면 운암리 구간의 도로폭원이 부족하고 선형이 불량한 구간을 개선함으로써 이용자의 불편 해소와 접근성 개선 및 통행 안전성 등 보조간선도로의 기능확보로 교통 편익 증진과 지역간 교류 활성화에 따른 지역균형발전을 도모하고자 추진하는 사업임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2029.

○ 위 치 : 공주시 유구읍 동해리 ~ 사곡면 운암리(지방도629호)

○ 규 모 : L=7.23km , B=10.0m (2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,021백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	44,021	120	100	200	43,601
국 비
시 도 비	44,021	120	100	200	43,601
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중 1%)

○ ‘21. 11. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ ‘22. 03. : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 공고 및 평가

○ ‘22. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ‘22. 07. : 착수보고회 개최

○ ‘22. 11. : 주민의견 청취 공고 및 주민설명회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지방어항(삽시도항)건설사업

담당자

수산자원과 김창만(☎635-4139)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삽시도항 내 정온수역 확보를 통한 원활한 어항이용 및 지역민 재산보호

○ 어업 및 지역적 특성에 맞는 어항시설의 적정규모 판단과 평면배치 및 경제적 안정단면 결정 등 합리적인 어항시설 설계

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.(6년)

○ 위 치 : 보령시 오천면 삽시도리 삽시도항 일원

○ 규 모

- 북방파제 180m연장(352m→532m), 남방파제 70m연장(340m→410m)

- 기존 북방파제 상치보강 270m, 선착장 보강 25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 167억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	167	0	3	30	134
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	167	-	3	30	134
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ ’21. 06. 21. : 어항개발계획(변경) 고시(충청남도 고시 제2021-253호)

○ ’21. 10. 20. : 주민설명회 개최

○ ’22. 01. 10. : 1차분 준공

□ 향후계획

○ ’22. 12. : 2차분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지방어항(효자도항)건설사업

담당자

수산자원과 엄종식(☎635-4138)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 효자도 남측선착장은 가장 선박이 많이 접안하는 위치로 섬의 중간에 위치하여 원산도에 가려지는 지형으로 위치적으로 정온하여 효자도의 대부분 선박들이 접안하고 있는 실정이며, 선착장(100m) 외에는 별도의 접안시설이 없음

◦ 어선의 안전정박과 어획물 양육·유통 등 수산업 기반시설로서 역할은 물론 어촌관광, 교통, 지역주민 생활의 중심지로서 미래 지향적인 종합기능을 수행할 수 있도록 어항 기본시설을 구축하여 어촌주민의 삶의 질 향상 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.(5년)

○ 위 치 : 보령시 오천면 효자도리 효자도항 일원

◦ 방파제 130m, 호안 46m(방파호안 26m, 연결호안 20m), 물양장 135m, 선양장 20m, 남측 선착장 연장 5m, 준설 및 매립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 148억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	148	-	3	30	115
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	148	-	3	30	115
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ ’15. 12. : 개발계획 및 정비계획 수립완료

○ ’17. 04. : 공유수면 매립기본계획 반영

○ ’21. 06. : 어항개발계획(변경) 고시(충청남도 고시 제2021-256호)

○ ’21. 07. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ ’23. 03. : 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음