개별 지방채 발행사업 추진현황(별지 10)

사업명

충남육아종합지원센터 건립

담당자

복지보육정책과

신은주(☎635-4251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저출산 극복을 위한 건전한 양육ㆍ교육 기반 시설 집적화 마련

○ 자연놀이뜰, 홍예공원과 연계한 원스톱 양육ㆍ보육서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024(4년)

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 목리 1403

○ 규 모 : 1개동(지하 2층, 지상 3층)

부지면적	연면적	건축면적	층수(지하 2층 / 지상 3층)
1,803㎡ (546坪)	3,230㎡ (971坪)	535㎡ (162坪)	‣ (지하1층) 영유아놀이터 ‣ (1층) 사무실, 그림책도서관, 장난감도서대여실 ‣ (2층) 프로그램실, 상담실, 세미나실 등 ‣ (3층) 대강당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,127백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,127	1,390	351	8,386	5,000
지 방 채	5,900			5,900
국 비	1,000	390	351	259
시 도 비	7,227	1,000		1,227	5,000
시군구비
특교세	1,000			1,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 시설공사, 20%)

○ 착공 확인 측량실시 및 가시설물 설치(’23.3.2~3.18)

○ 기초파일(S.I.P) 공사 시공(’23.3.19~4.9)

○ C.I.P 시공 및 가이드월 설치(’23.4.10~)

○ 토공 및 흙막기 공사 완료(’23.6)

○ 지하 2층 기초 공사 착수(’23.7)

□ 향후계획

시설공사 재착공	⇨	시설공사 준공	⇨	센터 개원
(’23.3월)		(’24.4월)		(’24.하반기)

사업명

충남501호 병원선 대체건조

담당자

보건정책과 정성민(☎010-5401-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 병원선 대체건조를 통한 운항 안전성 확보

○ 진료 공간 확충 및 설비 현대화를 통한 질 높은 보건·의료 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.12.03. ~ 2023.06.28.

- 기본 및 실시설계 : 2020.12.03. ~ 2021.07.28.

- 신규 병원선 건조 : 2021.11.04. ~ 2023.06.28.

○ 위 치 : 부산광역시 사하구 동일조선

○ 규 모 : 친환경 병원선 1척 건조(환자수송선 1척 포함)

- 선체 : 총톤수 320톤, 전장 49.9m, 폭 9m, 깊이 3.6m

- 기관 : 주기관 7,200마력(3,600마력 x 2대), 추진기 워터제트 타입

- 최대속력 / 승선정원 : 20노트 / 24명

- 친환경 적용사항 : 하이브리드 시스템 추진기 구 동 가능

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,338백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,338	8,338	1,035
지 방 채	2,000	-	1,012
국 비	8,225	6,225	23
시 도 비	2,113	2,113	-
시군구비	-
기 타	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023.06.28. : 신규 병원선 건조 준공

□ 향후계획

○ 2023.07.(1주) : 준공 검사 실시

○ 2023.07.(2주) : 신규 병원선 대천항 최종인도 및 준공금 지급 → 사업종료

○ 2023.08.29. : 신규 병원선 취항식 개최

사업명

재난관리기금 전출

담당자

자연재난과 유양근

(☎041-635-3256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재난 및 안전관리기본법에 근거, 재난관리에 드는 비용에 충당하기 위해 매년 적립해야하는 법정 의무기금

□ 사업개요

○ 재난 및 안전관리 기본법』 제67조에 따라 최근 3년 동안의 『지방세법』에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 법정 적립액 확보 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 재난관리기금 전출금(의무예치금 확보) : 27,357백만원(지방채 16,200, 도 11,157)

- 기금 실집행액 : 12,562백만원

※『재난 및 안전관리 기본법』 제67조에 따라 최근 3년 동안의『지방세법』에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액 확보 필요에 따른 차입

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

[ 2022년도 추진실적 ]

○ (추진실적) 12,562백만원(재해 사전예방사업 등 6개 사업 지원)

구분	합계 (단위 : 백만원)	재해 사전예방 사업	8.8.~8.17.호우 응급복구비	염수분사장치 설치	심의수당	코로나19 충남형 긴급재난지원금	도립노인용양권 음압장비 설치
집행액	12,562	2,209	600	265	1	9,469	18

□ 향후계획

○ 각종 재난 발생으로 인한 피해 시 기금 적기 지원

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

재해구호기금 전출

담당자

자연재난과 손아영

(☎041-635-3251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재난발생 시 신속한 이재민 구호 및 지원을 위한 재해구호기금 법정적립금 적립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 대 상 : 도내 15개 시군

○ 규 모 : 충남형 긴급 재난지원금 등 7개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 재해구호기금 전출금(의무예치금 확보) : 43,499백만원(지방채 8,100, 도 35,399)

- 기금 실집행액 : 41,192백만원

※『재해구호법』 제15조에 따라 최근 3년 동안의『지방세법』에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 1000분의 5에 해당하는 금액 확보 필요에 따른 차입

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

[ 2022년도 추진실적 ]

○ (추진실적) 41,192백만원(충남형 긴급 재난지원금 등 7개 사업 지원)

구분	합계 (단위 : 백만원)	충남형 긴급 재난지원금	코로나19 생활치료센터 운영비	무더위쉼터 냉방비	재해구호 물자 구입 등	이재민 구호지원	호우피해 소상공인 지원	기타
집행액	41,192	35,399	2,792	99	196	183	454	2,069

□ 향후계획

○ 각종 재난 발생으로 인한 피해 시 기금 적기 지원 및 연내 지방채 이자 상환

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

충남지식산업센터 건립

담당자

미래산업과 전재우(☎635-3955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중소기업의 안정적 기업 활동 공간 제공

○ 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 불당동 650-3번지

○ 규 모 : 부지 4,510㎡, 연면적 14,471㎡(지하1층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	32,238	20,677	11,561	0	0
지 방 채	7,700	6,500	1,200	-	-
국 비	12,666	11,666	1,000	-	-
시 도 비	10,372	1,011	9,361	-	-
시군구비	0	-	-	-	-
기 타	1,500	1,500	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 3. : 공사 착공식(2020. 12월 착공)

○ 2022. 4. : 센터 관리 및 운영에 관한 조례 제정·공포

○ 2022. 12. : 센터 준공(2023. 3. 준공식 완료)

□ 향후계획

○ 충남지식산업센터 시설 운영·관리 및 기업(기관) 입주율 제고 추진(TP공조)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 총사업비 34,352백만원에서 2022년 6월 3차 조정을 통해 공사비 및 감리비 2,114백만원 감액으로 총사업비 32,238백만원으로 조정(국비 2,114백만원 감)