◈10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지 9)

사업명

도립공원 사유지 매입

담당자

산림자원연구소 문정민

(☎635-6971)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연생태계 보존 및 안전한 도립공원 관리를 위한 도유재산 확충 필요

○ 도립공원 내 사유재산권 제약에 따른 토지소유자 및 주민 민원 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2023년

○ 위 치 : 대둔산도립공원 내

○ 규 모 : 총면적 3,744,631㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,034백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,034	-		5,034	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,034	-	-	5,034	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진완료)

○ (2023년 매수필지) 3필지 3,731,827㎡(금5,034,172,170원)

- 충남 논산시 벌곡면 수락리 산14-1

- 충남 논산시 벌곡면 수락리 산29번지

- 충남 논산시 벌곡면 113-3

※ 등기이전 완료(2023. 7. 10.)

□ 향후계획

○ 매수토지 지속적인 관리 등

사업명

고암-역재(지방도609호) 확포장 공사

담당자

도로철도항공과   최호준

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 홍성 이남권역(청양,보령,부여 등)과 내포신도시와의 연계성 제고를 위한 지방도 609호, 국도29호와 연계된 노선 필요

○ 서해선(홍성～송산) 복선전철 개통으로 유입되는 인구의 홍성 이남권역(청양,보령,부여 등)으로 분산하여 지역균형 발전도모

○ 홍성역 주변 도심～내포신도시 연계를 통한 원도심 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025

○ 위 치 : 홍성군 홍북읍 고암리 일원

○ 규 모 : 연장=1.24㎞, 폭=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,000	-	300	4,000	6,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,000	-	300	4,000	6,700
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0 %)

○ (‘23. 02.) 도로구역 결정(변경) 고시

○ (’23. 02.) 보상 착수

○ (’23. 03.) 공사 착공

□ 향후계획

○ (‘23. ~ ’25) 보상 및 공사 추진

사업명

충남도청 주차장 및 다목적 광장 조성사업

담당자

운영지원과 박주영 (☎635-3570)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 주변 유휴부지를 활용, 주차장 및 다목적 광장을 조성하여 도시 경관을 개선하고 도민 불편사항 해소 및 도심 속 공원 조성을 통해 도민 편의공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8월 ~ 2023. 12월

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 539

○ 규 모 : 도민마당(주차장), 잔디광장, 바닥분수 및 충남길 등 13,238.4㎡ 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,600	3,400	200	3,000
국 비	500			500
시 도 비	6,100	3,400	200	2,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 설계비 2억 편성(’21년 1회 추경) → 기본․실시설계 발주(’21.8.) → 설계 완료(’22.6.)

○ 도 공공디자인 진흥위원회 심의․의결(’22.5.) / 계약심사‧일상감사 등 행정절차 이행(’22.10.)

○ 공사 착공(’22.12.) → 동절기 공사중지(’22.12.29.) → 공사 재착공(’23.03.02.)

○ 천연잔디 매각, 토공사, 경계석 및 화강석블록 공사 중 : ’23.3.~7.

□ 향후계획

○ 조경 식재, 조경시설물 설치공사 추진 및 준공 : ’23. 7~12.

○ 도민 개방 및 시설 이용 : ’24. 1.부터

사업명

(재)충청남도청소년진흥원

이전․건립

담당자

여성가족정책관 이용호 (☎635-4985)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 지역 안착을 위한 청소년진흥원의 지원 인프라 강화 필요

○ 청소년 지원시설의 상당수가 북부권에 집중해 있어 지원정책의 지역별 소외현상이 나타난 만큼 도내 중남부 지역 청소년의 불균형 해소를 위한 거점 마련 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 목리 888-10(내포신도시 내)

○ 규 모 : (부지) 6,594.5㎡, (건물) 1동(연면적 8,930㎡, 지하1층~지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,820
국 비
시 도 비	27,820	-	9	9	260
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   0%)

○(‘21. 8.) 건립 기본계획 수립

○(’21. 9.) 공유재산심의위원회 원안 가결(건립)

○(’22. 2.) 정기 제1차 지방재정투자심사 승인

○(’22. 12.) 충남청소년진흥원 이전 건립계획 취소 방침

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 충남여성가족플라자 건립과 연계 추진

- 설계공모 및 실시 설계(‘23. 5. ~ ’24. 12.)

- 건축 착공(‘25) 및 완공(’26)

사업명

충청남도 노동안전문화회관

담당자

일자리노동정책과 조경애 (☎635-3414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업재해로부터 안전한 노동환경을 구축하고 체계화 된 산업재해 예방 활동 지원을 위한 노동안전문화회관 건립하여 산업안전교육 홍보, 실태조사 및 정책연구 안전체험 교육장 운영으로 통해 산업재해 예방과 산재사망사고 감축에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 :  ‘22.1. ~ 22.12.31.

○ 위 치 : 충남경제진흥원(아산시 염치읍 송곡리)

○ 규 모 :  건물 연면적 1,598.04㎡, 지상3층/ 토지 991㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20			20
국 비
시 도 비	20			20
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 노동안전문화회관 건립 추진계획(’20.9.17.)

○ 공유재산 심의(‘21.7.) : 세정과

○ 공유재산 관리계획 승인(’21.9) : 의회(행정문화위원회)

○ 지방재정 투자사업 심사(‘22.3.) : 예산담당관

○ 예산편성(’22.3. 제1회추경) : 총1,415백만원(시설비 1,400/ 부대비용 15)

○ 노동안전문화회관 건축기획용역(‘22.4.~6월) : 어반트리건축사(사)

○ 공공건축 심의(’22.5) : 건축도시과

○ 노동안전문화회관 건립계획 변경(‘22.10.)

○ ‘22년 예산잔액(1,395백만원) 정리추경 시 삭감

□ 향후계획

○  노동안전문회관 건립 취소

사업명

충청권 통일플러스센터 건립

담당자

자치행정과        정재희

(☎635-3602)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수도권 및 집경지역에 평화통일 인프라 집중에 따른 지역 격차를 해소하기 위한 지역별 거점센터 구축

○ 충청권 560만이 소통하는 남북교류·통일교육 종합 플랫폼 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2025년

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 937번지(적십자사 충남지사 옆)

○ 규 모 : 연면적 2,100㎡(부지 3,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	-	-	4,000	6,000
국 비	4,000	-	-	2,000	2,000
시 도 비	6,000	-	-	2,000	4,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ (공모선정)「충청권 통일+센터」 통일부 공모 선정(’21.4.)

○ (행정절차) 지방재정영향평가(’21.6), 공유재산심의(’22.6.), 지방재정투자심사(’22.8.), 공유재산관리계획 의결(’22.9.), 공공건축심의(’22.10.), 건설본부 의뢰(’22.12.)

○ (건축추진) 설계공모(’23.3.~5.), 기본·실시설계(’23.6.~12.)

□ 향후계획

○ 설계용역 완료(’23.12.) 및 건축공사 발주(’24.1분기)

○ 센터 전시체험 공간 및 콘텐츠 조성 기본계획 수립(’23년), 용역 추진(’24년)

□ 사업변경 내역

○ 건립 연면적 조정(’23.2.) : 당초 2,500㎡ → 변경 2,100㎡/△400㎡

사업명

충남광역먹거리통합지원센터 및 유기농산업복합서비스지원단지 조성

담당자

농식품유통과      이정아

(☎635-4161)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교·공공급식을 위한 통합지원센터 및 대도시 광역 직거래 매장 확대에       따른 물류·유통 수급 조절 등 광역 컨트롤타워 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 부여군 남면 내곡리 174-4번지 일원

○ 규 모 : 지상1층, 연면적 3,120㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000				8,000
국 비
시 도 비	8,000				8,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 광역먹거리통합지원센터 건립사업 추진계획 방침 결재(‘21.12.)

○ 부지매입(‘22.4.), 공공건축물 심의(’22.11.)

○ 실시설계 공모 추진계획 수립(‘23.3.)

○ 기존 건축물(지장물) 철거공사 실시설계 용역 의뢰(‘23.4.)

○ 실시설계 공모 심사위원회 구성(’23.6.)

□ 향후계획

○ 실시설계 공모 업체 선정(‘23.8.)

○ 영향평가(교통영향, 재해 등), 개발행위 및 건축 인허가 추진(’23.9.~10.)

○ 공사업체 선정 및 착공(‘23.12.)

사업명

노화~평촌(지방도619호) 확포장 사업

담당자

도로철도항공과 최호준

(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 619호는 국도 21호, 국도 29호, 지방도 618호, 지방도 616호,지방도 610호와 연계되는 노선으로 예산군 응봉면 노화리와 예산군 응봉면 평촌리 구간에 대해 장래 기반시설 및 관광시설 개발 완료로 인한 교통량 증가에 따른 적정 차로수 확보

○ 주변 시설에 대한 통행 안전성을 확보하고 간선기능을 강화하여 교통편익증진과 지역간 교류 활성화에 따른 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2022 ~ 2029

○ 위 치 : 예산군 응봉면 노화리 ~ 평촌리(지방도619호)

○ 규 모 : 연장=3.48㎞, 폭=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,723백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	34,723	-	-	-	34,723
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	34,723	-	-	-	34,723
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : ?%)

○ (‘22. 06.) 지방재정 투자심사 완료

○ (’22. 12.) 기본 및 실시설계 착수

○ (‘23. 06.) 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ (’24. 12.) 기본 및 실시설계 완료

○ (‘25. ~ ’29) 보상 및 공사 추진

사업명

동물위생시험소 당진지소 신축

담당자

동물위생시험소 장훈

(☎635-7047)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1990년 건축 이후 33년간 사용되어온 노후 석면 건축물로, 근무자 안전이 위협받고 있을 뿐만 아니라 실험실도 위해물질 취급에 따른 안전이 취약

○ 또한, ｢연구실 설치운영에 관한 기준｣에 따라 연구·실험공간과 사무공간을 분리 운영해야하는 상황에 있어 향후 업무 수요를 감당할 수 있는 시설물 신축추진이 시급한 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2024년 12월 (2년)

○ 위 치 : 충청남도 당진시 용연동 854번지(현 당진지소 철거 후 신축)

○ 규 모 : 대지면적 3,779㎡ / 지상2층 / 연면적 1,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,700		20		5,680
국 비
시 도 비	5,700		20		5,680
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공유재산심의회 심의의결(‘22. 4.) 및 공유재산관리계획 제출(’22. 9.)

○ 지방재정투자심사(중앙) 승인(‘22. 8.)

○ 사업계획 사전검토 완료(’22. 12.) 및 공공건축심의 완료(‘23. 1.)

○ 설계공모 완료(‘23. 6.) 및 실시설계 착수(’23. 7.)

□ 향후계획

○ ‘24. 2. 설계완료

○ ’24. 7. 착공 (‘25. 6. 준공예정)

사업명

충남 친환경 모빌리티 AI융합지원사업

담당자

미래산업과 이준열 (☎635-2236)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특화산업(친환경 모빌리티)과 인공지능의 융합·활용을 지원하여, 생산공정 최적화, 품질혁신, 비용절감 등 지역산업 경쟁력 및 생산성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 1. ~ 2023. 12. 31. (20개월)

○ 대 상 : 도내 친환경 모빌리티 분야 7개 수요기업

○ 내 용 : 친환경 모빌리티 분야 인공지능 솔루션 개발 및 현장 적용 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,211백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,211		3,605.5	3,605.5
국 비	3,732		1,866	1,866
시 도 비	2,000		1,000	1,000
시군구비
지 방 채
민간자본	1,479		739.5	739.5
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

○ 2022.  4. : 과학기술정보통신부(정보통신산업진흥원) 공모 선정

○ 2022.  5. : 1차년도 사업 업무협약 체결

○ 2022.  9. : 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2022. 10. : 인공지능 기술 개발 공간(실증랩) 개소

○ 2023.  2. : 2차년도 사업 업무협약 체결

○ 2023.  6. : 사업추진상황 점검(제조데이터 전처리 156.1%, 솔루션 실증 49.4% 완료)

□ 향후계획

○ 2023.  8. : 제조공정 내 인공지능 솔루션 도입 및 시범운영 방문, 전문가 자문을 통한 사업 추진상황 점검

○ 2023. 12. : 공인시험인증기관(TTA)을 통한 솔루션 생산성 향상률(7%) 검증 및 사업종료에 따른 AI솔루션 실증랩 자체 활용방안 수립·검토

○ 2024.  2. : 사업 실적보고 및 정산

사업명

국가 재난 슈퍼박테리아-신종바이러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단기술 개발 기반 구축 사업

담당자

산업육성과        이동제

(☎635-3930)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신개념의 마이크로바이옴 의약품이 난치성 질환의 차세대 대안으로 대두되고 있어, 마이크로바이옴 의약품의 상용화 지원 및 마이크로바이옴 진단기술 개발 지원을 위한 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026(5년)

○ 위 치 : 천안아산역 R&D 집적지구 내(아산시 배방읍)

○ 내 용 : 마이크로바이옴 의약품 상용화 개발센터 구축 및 개발 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,909백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,909	-	3,363	8,227	14,319
국 비	10,000	-	1,740	1,892	6,368
시 도 비	5,874	-	240	2,514	3,120
시군구비	9,785	-	1,333	3,771	4,681
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	250	-	50	50	150
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ’22. 12. : 상용화 개발센터 실시설계 실시

○ 주요성과 : 장비구축(6종 9대), 기업지원 9개사, 인력양성 1명

□ 향후계획

○ ’22. 12. ~ ’24. 1. : 상용화 개발센터 건축설계 및 착공

사업명

초실감 디스플레이용 스마트센서모듈 기술지원 플랫폼 구축사업

담당자

산업육성과 손유미

(☎635-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 센서사업에 기반한 충남의 신성장동력 확보와 중소기업의 접근성 향상을       위한 센서 모듈 관련 기술 및 제작 지원 플랫폼 구축

□ 사업개요

○ 기  간 : 2023. 1.~2023. 12. ※ 총 사업기간 : ′22년~′24년(3년)

○ 위  치 : 충남TP 디스플레이센터(충남 아산시 음봉면 연암산로 88)

○ 사업량 : 인프라구축(장비구축 21종), 센서 종합기술지원(시제품, 기술컨설팅,                 인증 등), 전문 인력 양성(12건, 36명) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,480	-	3,066	3,291	2,123
국 비	5,936	-	2,146	2,304	1,486
시 도 비	1,044	-	370	437	237
시군구비	1,500	-	550	550	400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ (`18년) 산업부 스마트특성화 지역거점지원사업 반영

○ (`19 ~ 20년) 스마트센서 사업기획 및 기업수요조사(천안 103, 아산 77개업체)

○ (`21. 4.) 스마트특성화 기반구축사업 공모 지원대상(적합)사업 선정

○ (`22. 4.) 스마트특성화 기반구축사업 최종 공모 선정

○ (`22. 10.) 협약체결 및 1차년도 사업비 지원

○ (`23. 6.) 2차년도 사업비 지원

□ 향후계획

○ 기업선정평가 및 전문 인력 양성 추진 : 8월 중

○ 사업 진행상황 점검 : 수시

○ 사업추진 및 성과 평가 등 : ~ ′24. 2월까지

사업명

충남 권역 재활병원 건립

담당자

장애인복지과      이영섭

(☎635-4278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지체 및 발달장애 등 재활치료를 통한 일상생활 적응 능력 향상

○ 공공재활서비스 접근성 향상을 통한 재활의료 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 아산시 용화동

○ 규 모 : 지하1층 지상4층, 150병상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,500	743	4,373	12,000	32,384
국 비	13,500	527	4,000	5,000	3,973
시 도 비	25,200	151		3,000	22,049
시군구비	10,800	65	373	4,000	6,362
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ '17.6. : 복지부, 권역별 재활병원 건립사업 공모 선정

○ ’19.10. : 기본설계 및 사업계획 변경 : 사업비 증(270 → 350억원)

○ ’20.12. : 실시설계 및 사업계획 변경(’21.11.) : 사업비 증(350 → 495억원)

○ ’22.10. : 행안부 중앙 지방재정투자 심사 조건부 승인

○ ’23.7.13. : 조달청 신축공사 업체 선정

□ 향후계획

○ ’23.8. 공사 착공

○ ’25.6. 충남권역 재활병원 준공

○ ‘25.10. 충남권역 재활병원 개원

사업명

구강악안면 메카노 바이올로지 연구

담당자

미래산업과 신혜원 (☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 정부 지역균형발전위원회에서 충청남도 공약으로 국립치의학연구원/미래의료 클러스터 조성 추진

- 타 경쟁 지자체(부산, 대구, 광주 등)에도 치의학 MRC선도연구센터를 진행하고 있기 때문에 본 연구센터 사업의 성공적 수행을 위하여 지속적인 지원 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 6. ~ 2028. 2.

○ 위 치 : 충남 천안시 동남구 단대로 119(단국대학교 천안캠퍼스)

○ 규 모 : 메카노바이올로지 치의학 연구센터 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,220	1,600	2,250	2,250	9,120
국 비	9,450	1,050	1,400	1,400	5,600
시 도 비	700	100	100	100	400
시군구비	1,200	-	200	200	800
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	2,770	150	350	350	1,920
기 타	1,100	300	200	200	400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 물리적, 역학적, 복합적 인자가 제어된 메카노 플랫폼을 개발하고, 메카노 기전 연구 진행

○ 메카노 센싱인자 중심의 세포질 및 핵 내 변화 기전을 심층 분석, 메카노 활성을 통한 세포 기능 증진 연구 진행

□ 향후계획

○ 생물리적·생역학적 플랫폼 이용한 안면 및 구강조직 관련 세포들 메카노 기전 심화 연구

○ 생체조직 모사체에서 공배양을 통한 메카노 기전 연구

사업명

산업혁신기반구축사업(대학혁신기반센터UIC)

담당자

미래산업과 신혜원 (☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 향후 국내기업의 기술 경쟁력 제고를 위해서는 대학의 디지털 헬스케어 혁신연구성과 실용화, 이종산업간 네트워크를 통한 융복합 기술 발전, 산학연병 연계 협력을 통한 제품화·사업화 촉진을 위해서 대학혁신기반센터 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. ~ 2024. 12.

○ 위 치

- 충남 천안시 동남구 단대로 119, 단국대학교 산학협력관 내

- 충남 아산시 순천향로 22, 순천향대학교 산학협력관 및 학예관 내

- 충남 서산시 해미면 한서1로 46, 한서대학교 심운관 내

○ 규 모 : 대학혁신기반센터(UIC)구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,739백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,739	0	2,815	3,462	3,462
국 비	5,600	-	1,600	2,000	2,000
시 도 비	60	-	-	30	30
시군구비	120	-	40	40	40
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	2,259	-	675	792	792
기 타	1,700	-	500	600	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 수혜기업 사업화 매출액 ‘22년도 30.3억원, ’23년도 31억원

○ 수혜기업/지원기관 고용 성과 ‘22년도 11명, ’23년도 13명

○ 산학협력 기업 기술이전 ‘22년도 0.75억원, ’23년도 2.7억원

□ 향후계획

○ 전주기적인 지원을 통해 기업 지원 우수성과를 도출할 수 있는 프로그램 운영

○ 차세대 디지털 헬스케어 및 디스플레이·디자인 분야의 융·복합된 기술을 발굴하여 각 산업분야간 융합으로 시너지 효과를 발생시킬 수 있는 방안 모색

사업명

충청권 이차전지 핵심소재 기술 실증 및 평가지원 플랫폼 구축

담당자

탄소중립경제과 한승화   (☎635-2262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 이차전지 산업 경쟁력 우위 확보를 위한 충남-충북 초광역형 사업으로 중소기업의 이차전지 양산화, 셀 제조 및 평가지원을 위한 실효성 있는 기업지원 체계 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 충남TP, 충북TP

○ 내 용 : 이차전지 셀 제조 및 소재·부품 성능평가 지원체계 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,906백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,906			3,837	10,069
국 비	9,606			2,488	7,118
시 도 비	1,040			260	780
시군구비	1,560			520	1,040
지 방 채	0			0	0
민간자본	0			0	0
기 타	1,700			569	1,131

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2022.  4. : ‘23년 지역산업거점기관지원사업의 적합사업으로 선정(산업통상자원부)

○ 2022. 11. : 지방재정투자심사 조건부 승인

○ 2023.  4. : 2023년 스마트특성화기반구축사업 공모 선정

○ 2023.  6. : 관계기관 협약 체결

○ 2023.  7. : 사업 추진을 위한 운영위원회 개최, 도 출연금 지급

□ 향후계획

○ 소재·부품분석, 소형 셀 제조, 중대형 셀 제조 등 장비구축을 통한 기업 수요 기반 시험장비 구축 및 평가 전문화 기관화 추진

○ 이차전지 관련 기업지원 및 전문가 양성을 위한 교육 컨텐츠 개발/교육

사업명

지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업

담당자

고등교육정책담당관 백미래  (☎635-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남(친환경차부품)·대전(ICT)·세종(자율주행서비스)의 주력산업 융합·확장으로 미래 모빌리티 혁신 생태계 조성 및 메가시티 기반 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021.6.1.~2026.2.28.(5년간)

○ 추진조직 : DSC(대전·세종·충남) 지역혁신플랫폼

○ 참여기관 : 3개 지자체(충남·대전·세종), 24개 대학, 69개 기업·기관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,411억원  ※ 국비 70%, 지방비 30%

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,411	682	682	682	1,364
국 비	2,388	478	478	478	956
시 도 비	1,023 (충남 486)	204 (충남 97)	204 (충남 97)	204 (충남 97)	408 (충남 194)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 교육부 공모「2021년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」 선정(‘21.6.)

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」1차년도 사업 추진(‘21.6.~’22.4.)

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」2차년도 사업 추진(‘22.5.~’23.3.)

○ 대전·세종·충남 고등교육혁신특화지역 신규 지정(‘22.9., 교육부)

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」 3차 연도 사업 추진(‘23.4.~)

□ 향후계획

○ 3차 연도 사업계획서 수립(’23.8.) 및 사업비 집행상황 점검(수시)

○ 고등교육혁신특화지역지정 규제특례 적용 후속조치

※ 참여대학 간 관련 협약 체결, 이동수업 운영방침 마련, 현장실습지원비 확대 안내

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2차연도(‘22년) 충남 부담 사업비 97.2억원→99.1억원(1.9억원* ↑)

* 1차 연도 연차평가 결과, 2차 연도 국비 9억원 증액에 따른 지방비 4억원 증액 반영

사업명

2023년 세계유산 축전

담당자

문화유산과 박용희

(☎635-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계문화유산 가치의 확산 및 세계유산의 향유

○ 백제역사유적지구를 중심으로 한 문화관광의 성장동력 거점 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 1~ 12.  ※ 축전기간 : 7. 7.~2023. 7. 23.

○ 위    치 : 백제역사유적지구 8개소(공주2, 부여 4, 익산 2)

○ 규    모 : 공식행사, 가치확산프로그램 28개, 가치향유프로그램 8개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계				3,500
국 비				2,000
시 도 비				450
시군구비				1,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2022. 9. : 문화재청 ‘세계유산 축전’ 공모사업 선정

○ 2023. 2. : 2023 세계유산축전 워크숍 및 자문회의

○ 2023. 3. : 2023 세계유산축전-백제역사유적지구 사업계획 수립

○ 2023. 4. : 세계유산축전 TF팀 구성 (총감독 외 5명)

○ 2023. 4.~6. : 축전 세부프로그램 구체화, 현장 안전점검 등 추진

○ 2023. 7. : 2023 세계유산축전-백제역사유적지구 개최

□ 향후계획

○ 2023. 8.~12. : 사업정산 및 평가 보고회