(단위 : 백만원)
사 업 명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업 완료 예정 연도	투자 심사 연도	진척률
		기투자	’23년 집행액	’24년	’25년 이후
산업 디지털 전환 적합성 인증 및 실증기반 구축사업	25,580	4,160	3,860	7,840	9,720	2026	2023	31%
무창포IC~웅천(2)(지방도606호) 확포장 사업	8,400	-	200	151	8,049	2027	2023	10%
대봉~흥산(지방도606호) 확포장 사업	19,420	-	305	2	19,113	2029	2023	10%
홍동우회(지방도609호) 도로건설사업	304	0	304	-	-	-	2023	0%
전국노인체육대회	800	-	800	-	-	2023	2023	100%
해외 투자유치설명회	868	-	868	-	-	2023	2023	100%
서해 복선전철 내포역(가칭) 신설	27,100	-	6,000	14,000	7,100	2025	2023	35%
중견기업-지역얼라이언스(동맹) 구축지원	7,211	-	1,355	1,463	4,393	2027	2023	20%
신계-관정(지방도691호) 확포장 사업	22,100	-	305	400	21,395	2028	2023	10%
장선-복룡(지방도643호) 확포장 사업	21,000	-	305	400	20,295	2028	2023	10%
당정-남전(지방도617호) 확포장 사업	16,500	-	300	405	15,795	2028	2023	10%
충남 이스포츠 상설경기장 건립	27,530	-	2,000	11,746	13,784	2025	2023	5%
홍예공원 정비사업	29,000	-	753	1,156	27,091	2025	2023	5%
수소상용차 부품 성능 검증 평가기반 구축	9,001	-	2,401	2,600	4,000	2026	2023	50%
소통협력공간 조성	14,400	6,200	1,100	1,385	5,715	2025	2023	60%

09. (별지9) 개별 투자심사 사업의 추진현황

(단위 : 백만원)
사 업 명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업 완료 예정 연도	투자 심사 연도	진척률
		기투자	’23년 집행액	’24년	’25년 이후
AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화사업	11,663	-	3,470	4,440	3,753	2025	2023	70%
메타버스 기반 산업단지 고도화	13,264	-	4,268	4,186	4,810	2025	2023	70%
휴먼마이크로바이옴 분자제어 연구센터	16,925	-	2,050	2,275	12,600	2029	2023	15%
수소기술 혁신연구센터	11,123	-	1,237	1,666	8,220	2030	2023	15%
혁신형 미래의료 연구센터	8,279	-	1,954	2,175	4,150	2026	2023	15%
충남 도립파크골프장 조성사업	21,000	-	1,000	2,000	18,000	2026	2023	5%
해양바이오 전략소재 메타플랫폼화 원천기술 개발	7,634	-	2,251	2,376	3,007	2025	2023	15%
멀티오믹스 기반 친환경 양돈 플랫폼 구축	9,234	-	542	852	7,840	2032	2023	15%
충남 디지털· 게임기업(산업) 육성	9,000	-	220	820	7,960	2023~	2023	11%
안면도관광지 제방도로 확포장 공사	12,000	-	800	-	11,200	2026	2023	7%
서산의료원 신관증축	47,393	2,000	-	16,936	28,457	2026	2013	5%
국방대 체력단련장 조성	39,819	17,037	6,000	11,782	5,000	2025	2023	50%
충남 예술의 전당 건립	122,696	17,496	1,000	1,900	103,300	2028	2023	1%
충남형 도시리브 투게더 건립(첫사업)	393,000	-	-	90,900	302,100	2026	2023	5%
탄소중립 실증 인프라 구축사업	48,570	-	2,370	11,430	34,770	2027	2023	15%
충청남도동물위생시험소당진지소 신축	8,194	-	428	2,621	5,145	2025	23	5%

사업명

산업 디지털 전환 적합성 인증 및 실증기반 구축사업

담당자

산업육성과 김현혜(☎635-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인공지능·산업데이터 산업의 수출경쟁력 강화 및 국내 산업의 지능화를 진행하기 위해 산업 데이터 기반의 인공지능 핵심 기술을 보호하고 성능 및 품질을 평가하는 기반 구축 필요

○ 이에 따라, 아산 R&D집적지구에 ‘인공지능 종합 성능 인증센터’를 구축하여 국제 표준 인증 허브로서 국내 기업의 산업 디지털 전환 고도화 경쟁력 확보와 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10월 ~ 2026. 12월

○ 위 치 : 아산역 R&D집적지구(아산시 배방읍)

○ 규 모 : 인공지능 종합 성능 인증센터 건축 1개동(지하1층 ~ 지상7층 / 대지면적 6,504㎡, 연면적 17,276㎡ 중 전용면적 4,000㎡), 장비구축 21종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,580백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,580	4,160	3,860	7,840	9,720
국 비	9,680	1,940	1,940	1,920	3,880
시 도 비	4,000	-	400	2,000	1,600
시군구비	6,000	-	600	3,000	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	5,900	2,220	920	920	1,840

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

○ 인공지능 종합 성능 인증센터 기본 및 실시설계 진행(‘23. 10. ~)

○ 구축 목표 장비 21종 중 6종 구축 및 5종 발주 완료(’24. 7.)

□ 향후계획

○ 인공지능 종합 성능 인증센터 기본 및 실시설계 완료(‘24. 11.)

○ 인공지능 종합 성능 인증센터 공사 착공(’25. 2.) 및 준공(‘26. 12.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경(기존 : 25,600백만원 ⇢ 변경 : 25,580백만원)

- AI 국제 표준화 협력을 위한 전담기관(KIAT) 행정비용 편성을 위해 2024년도 국비 2천만원 감액(기존: 9,700 ⇢ 변경 : 9,680)

사업명

무창포IC~웅천(2차) 지방도 확포장공사

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보령시 웅천읍 관당리 ~ 죽청리 구간 지방도 606호선으로 물동량 증가 및 무창포항 관광객 증가 예상으로 장래 교통수요에 효율적으로 대처하고 지역주민 및 관광객 등에게 질 높은 교통서비스를 제공하고자 시행하는 사업에 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027년

○ 위 치 : 보령시 웅천읍 관당리 ~ 죽청리

○ 규 모 : 연장=1.30km, 폭=20.0m(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,400	-	200	151	8,049
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,400	-	200	151	8,049
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘23. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수(설계진도율 50%)

□ 향후계획

○ ‘25. 01. : 기본 및 실시설계 용역 완료 및 보상절차 추진

○ ’25. 07. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

대봉~흥산 지방도 확포장공사

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로폭원의 부족 및 선형불량 구간 개선으로 교통편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2029년

○ 위 치 : 청양군 남양면 대봉리 ~ 흥산리(지방도606호)

○ 규 모 : 연장=4.6km, 폭=10.0m(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,420백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,420	-	305	2	19,113
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	19,420	-	305	2	19,113
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(기본 및 실시설계용역 : 10%)

○ 기본설계(관련계획검토, 현황조사, 노선선정 등) 완료

○ 실시설계(세부측량, 토질조사 등) 진행 중(설계진도율 40%)

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료(‘25. 7.)

- 연계용역(설계VE 외 4건) 준공금 지급: 265 백만원(~‘25. 7.)

- 기본 및 실시설계용역 준공금(잔금) 지급: 317 백만원(’25. 7.)

사업명

홍동우회 (지방도609호) 도로건설사업

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설기준 미달구간에 대해 시설개량 통한 통행 안전성 확보 및 고암~역재 지방도 확포장 사업과 연계하여 간선도로의 기능 확보로 교통 편익증진과 지역간 교류 활성화에 따른 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년)

○ 위 치 : 홍성군 홍동면 운월리 ∼ 홍성군 홍동면 운월리(지609호)

○ 규 모 : L=1.2km, B=10m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 304백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	304	-	304	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	304	-	304	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 주민설명회 개최결과 다수의 주민 반대의견으로 사업 타절 결정

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

전국노인체육대회

담당자

체육진흥과 이인호(☎ 635-3351)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인 건강증진을 위한 노인체육 활성화 저변 확대 및 대화합의 장 마련

○ 건강한 신체활동을 제공함으로써 성공적인 노년생활을 영위

○ 노인의 건강증진과 생활체육 저변 확대 및 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 위 치 : 천안시

○ 규 모 : 10개 종목, 6,557명 참여(선수·임원 4,557, 운영요원 2,000)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 800백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	800	-	800	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	400	-	400	-	-
시군구비	400	-	400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 9. 10. ~ 12. 천안시에서 전국노인체육대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 제2회 전국노인체육대회 개최 예정(아산시)

사업명

해외 투자유치 설명회

담당자

투자통상정책관 정승원

(☎ 635-3351)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미·중 분쟁의 영향으로 유럽기업들의 중국투자가 위축되는 가운데,

독일에서 투자유치 설명회를 개최하여, 미래 신성장동력 확보 및

첨단 소부장 GVC 선점 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10. 31. ~ 11. 1.

○ 위 치 : 독일 프랑크푸르트

○ 규 모 : 국내외 기업 100여개사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 868백만원(2023년)

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	868	-	868	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	868	-	868	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’23.10.31. 해외투자설명회 및 수출상담회 추진

○ ’23.11.1.  충청남도 독일사무소 개소식 추진

□ 향후계획

○ 사업추진 완료

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업비 1,000백만원 중 120백만원 타부서(문화정책과) 배분

사업명

서해선 복선전철 내포역 신설

담당자

도로철도항공과 조민희(☎635-2835)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수도권 연계 고속철도 서비스망을 구축하여 충남혁신도시 공공기관·기업 유치 및 지역발전 도모

○ 지역주민의 수도권 접근성 개선 등 교통편익 증진과 지역 간 교류 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2025년

○ 위 치 : 충청남도 예산군 삽교읍 삽교리 86-1

○ 규 모 : 역 신설 1식(선하역사), 주차장, 광장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,100백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,100	-	6,000	14,000	7,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20,000	-	4,500	11,000	4,500
시군구비	7,100	-	1,500	3,000	2,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ ‘23.  1. : 내포역 신설 사업시행협약 체결(도, 예산군, 철도공단)

○ ‘23.  5. : 내포역 관련 노반공사 착수(철도공단)

○ ‘24.  7. : 내포역 관련 건축, 시스템분야 설계 중(철도공단)

□ 향후계획

○ 서해선(홍성~송산) 복선전철 본선 우선 개통(’24. 10.)

○ 내포역 개통 및 서해선 복선전철 전체사업 준공(‘26.)

사업명

중견기업-지역얼라이언스(동맹) 구축지원

담당자

산업육성과 김종환(☎635-3921)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중견기업과 대학·혁신기관·지자체 등이 협력하여 전문 연구인력 양성·공급, 기술혁신 역량강화, 지역사회 상생 등을 추진을 위해 ｢중견-지역 혁신얼라이언스｣(동맹) 구축·지원

- 문제중심 학습 PBL(Problem-based learning)을 통해 연구개발 능력을 겸비한 석·박사 전문인력 양성, 사전 채용계약으로 지역일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4월 ~ 2027. 12월(57개월)

○ 위 치 : 천안시․아산시․서산시

○ 규 모 : 석․박사급 인력양성 50명(배출 40, 취업 10), 혁신제춤형 R&D 5개 과제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,211백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,211	-	1,355	1,463	4,393
국 비	4,500	-	900	900	2,700
시 도 비	900	-	180	180	540
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,811	-	275	383	1,153
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)  ※ 1차년도 사업완료

○ (인력양성) 채용조건형 석사 인력양성 2명, 재직자 석박사 인력양성 2명

○ (R&D) 친환경 미래차 경량화 기술개발[㈜코넥] 등 2개 과제 추진

□ 향후계획 연차별 ※ 연차별 계속사업 추진

○ (인력양성) 채용조건형 및 재직자 중심 석박사 인력양성

○ (R&D) 소규모 도심형 물류운송 시스템 기술개발 등 R&D 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

신계~관정(지방도691호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 승천삼거리~석곡삼거리 구간 첨두시 교통량 집중으로 확장 등 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2028년

○ 위 치 : 천안시 동남구 목천읍 신계리 ~ 성남면 용원리

○ 규 모 : 연장=3.4km, 폭=10.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,100백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,100	-	305	400	21,395
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	22,100	-	305	400	21,395
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘21. 12. : 제3차 충청남도 도로건설․관리계획(2021~2025) 반영

○ ‘23. 05. : 2023년 정기 제2차 지방재정투자사업 심사 완료

○ ’23. 12. : 낙찰자 선정 및 용역 착수(설계진도율 30%)

○ ’24. 02. : 주민설명회 개최

○ ’24. 06. : 연계용역 착수(설계VE 등 5건)

□ 향후계획

○ ’25. 05. : 기본 및 실시설계 완료

○ ’25. 08. : 보상계획 공고

○ ’26. 03. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

장선~복룡 지방도 확포장공사

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 643호 구간은 광역교통시설 KTX 공주역 및 탄천IC를 연결하는 노선으로 공주시 이인면과 논산시를 연계하는 간선도로 기능 담당

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2028년

○ 위 치 : 공주시 탄천면 장선리 ~ 이인면 복룡리(지방도643호)

○ 규 모 : 연장=3.7㎞, 폭=10.0m (2차로 확포장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	21,000	-	305	400	20,295
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	21,000	-	305	400	20,295
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘23. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수(설계진도율 30%)

○ ‘24. 02. : 주민설명회 개최

○ ’24. 03. : 관계기관 협의 완료

□ 향후계획

○ ‘24. 8. : 중간보고회 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

당정-남전(지방도617호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 최호준(☎635-7537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서천군 종천면 및 마서면에 위치한 지방도 617호는 장항항 및 장항국가생태산업단지와 연결되는 도로로 차량 통행이 잦으나 일부 차로폭 및 곡선부 회전반경 협소하여 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2028년(6년)

○ 위 치 : 서천군 종천면 당정리 ~ 서천군 마서면 남전리(지617호)

○ 규 모 : L=5.9km, B=10m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,500백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,500	-	300	405	15,795
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	16,500	-	300	405	15,795
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계용역 및 연계용역 추진중(설계진도율 30%)

□ 향후계획

○ 실시설계 완료 후 건설기술심의 및 인허가 추진

○ 공사 및 건설사업관리용역 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 투자심사 시 연장 5.5km로 검토하였으나, 주민설명회 및 관계기관 협의를 통해 사업 연장 5.9km로 변경하였음.

사업명

충남이스포츠 상설경기장 건립

담당자

문화정책과 조경화(☎3829)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남의 미래 신성장동력으로 이스포츠 산업 육성

□ 사업개요

○ 기간 : 2023 ~ 2025년

○ 위치 : 충남 아산시 배방읍 장재리 2135-1번지(KTX 천안아산역 인근)

○ 규모 : 부지면적 5,400㎡ / 연면적 3,805㎡ / 지하1층, 지상3층

※ (주요시설 및 장비) 주경기장 450석, 보조경기장 80석, 대회용 PC, 무대용 LED

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,530백만원 * 부지매입비 포함(74.6억원)

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,530	-	2,000	11,746	13,784
국 비	4,000	-	1,000	1,000	2,000
시 도 비	23,530	-	1,000	10,746	11,784
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(진척률 : 5%)

○ (’24. 1.) 설계 공모 및 용역사 선정(종합건축사무소 림)

○ (’24. 2.) 충남 이스포츠 상설경기장 건립 전문가 자문단* 구성

* 건축/시스템구축/실내디자인/이스포츠/운영·시설 총 5개 분야 12명

○ (’24. 6.) 부지매입 및 소유권 등기이전 완료

○ (’24. 8.) 녹색건축·에너지 효율·BF 예비인증 등 절차 진행

□ 앞으로

○ (’24.  9.) 충청남도 건설기술심의 수검     ※ 실시설계 최종보고회(9월)

○ (’24. 11.) 이스포츠 상설 경기장 시공사 선정(입찰) 및 착공 ※ 기공식 예정

○ (’25. 12.) 이스포츠 상설 경기장 건립 준공

사업명

홍예공원 정비사업

담당자

공공기관유치과 이준범

(☎635-3389)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내포신도시 대표공원인 홍예공원의 명소화, 차별화 부족, 수목 생육불량 및 고사, 편의시설 부족 등 전면 정비가 필요함에 따라, 홍예공원 정미사업을 추진하고 내포신도시 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10월 ~ 2025. 12월

○ 위 치 : 내포신도시 홍예공원 일원

○ 규 모 : 홍예공원 기반시설 재정비(274,738㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,000	-	753	1,156	27,091
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15,000	-	753	656	13,591
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타(부담금)	14,000	-	-	500	13,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계용역 추진 중

□ 향후계획

○ ‘24. 10. : 설계완료 및 공사발주

○ ’25. 12. : 공사 완료

사업명

수소상용차 부품 성능 검증 평가기반 구축

담당자

산업육성과 손유미(☎635-2253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 자동차산업 급성장으로 수소상용차 시장 선점을 위한 성능       평가 기반 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4.~2026. 12.(3년 9개월)

○ 위 치 : 예산군 예산읍 수철길 10(충남TP 미래자동차센터)

○ 규 모 : FCEV 부품시험평가센터 리모델링, 장비구축(5종6대), 기업지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,001백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,001	-	2,401	2,600	4,000
국 비	5,000	-	1,200	1,200	2,600
시 도 비	1,200	-	360	420	420
시군구비	2,800	-	840	980	980
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1	-	1	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1단계 50%)

○ FCEV센터 전기·냉각시설 설계(’23.12.)

○ 1차년 장비 1종1대 계약(’24.2.)

○ 2차년 장비 2종2대 조달 공고(’24.5.)

□ 향후계획

○ FCEV센터 전기·냉각시설 증설 완료(~’24.12.)

○ 1차년 장비 1종1대 설치(~’24.10.)

○ 2차년 장비 2종2대 계약(~’24.下.)

○ 장비활용 기업 지원(~’24.下.)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

소통협력공간 조성

담당자

새마을공동체과 신동훈

(☎635-3472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 고유성(특색)을 이용하여 지역 방문과 정착을 활성화할 수 있는 중소도시의 경쟁력 증진 필요 → 로컬브랜딩(지역의 브랜드화) 육성 추진

○ 소통협력공간 조성을 통해 로컬브랜딩 발굴 및 지역문제해결 등 도내 혁신활동 지원으로 지역주도 성장 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 아산시 온천대로 1496 온양온천역 2층

○ 규 모 : 3,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,400백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,400	6,200	1,100	1,385	5,715
국 비	7,000	6,000	500	500	-
시 도 비	5,600	200	600	635	4,165
지 방 채	1,800	-	-	250	1,550

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60.3%)

○ 설계 공모 및 당선작 선정(’24. 5.) 후 기본 및 실시설계 중

□ 향후계획

○ 설계용역 완료(’24. 11.) → 설계용역 완료(’24. 11.) → 착공(’24.12.)        → 준공(’24. 상반기)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 166억원, (변경) 144억원(△22억원, 국비 감소)

○ 사업기간 : (당초) 2020~2024, (변경) 2020~2025(조성지 변경에 따른 지연)

사업명

AI·메타버스 기반 재난안전관리 체계 강화사업

담당자

미래산업과 강진애(☎635-3961)

□ 사업목적 및 필요성

○ 각종 재난사고 사전 예측‧대응을 강화하는 AI‧메타버스 융합 재난 안전 기술 실증 추진을 통해 재난안전 관리체계 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 1. ~ 2025. 12. 31.(2년 9개월)

○ 위 치 : 공주시 일원

○ 규 모 : 도로안전분야 실증처 7개소(교차로, 어린이보호구역 등)

생활안전분야 실증처 1개소(신관공원 주무대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,663백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,663	-	3,470	4,440	3,753
국 비	6,000	-	2,000	2,500	2,000
시 도 비	3,500	-	1,000	1,500	1,000
민간자본	2,163	-	470	940	753

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 도로위험이벤트 판단 알고리즘 개발 및 테스트베드 7개소 구축

○ 대규모 행사장 테스트베트 1개소 구축 및 현장장비 설치

○ 통합관제시스템 메타버스 기반 3D 데이터 구축

□ 향후계획

○ 도로‧생활안전분야 솔루션 현장적용 및 검증(’24. 8.~)

○ 생활안전 솔루션 소프트웨어 인증 추진(’24. 11.)

○ 통합관제플랫폼, 군중/밀집 감시시스템 고도화 및 도로안전 솔루션 정확도 향상(’25. 1.~)

사업명

메타버스 기반 산업단지 고도화

담당자

미래산업과 이준열(☎635-2236)

□ 사업목적 및 필요성

○ 메타버스 플랫폼·콘텐츠 등을 활용한 비대면 협업, 실시간 원격 대응 등 제조혁신 서비스 구축, 향후 산단 전체로 확산 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6. 1. ~ 2025. 12. 31.(2년 7개월)

○ 위 치 : 천안 제2일반산업단지(1곳), 당진 아산국가산업단지(2곳)

○ 규 모

- 메타버스 산업단지 통합 관제·운영관리 플랫폼 개발

- 생산·품질관리·공정 최적화 등 메타버스 콘텐츠 8종 개발·실증

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,264백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,264	-	4,268	4,186	4,810
국 비	6,950	-	2,300	2,150	2,500
시 도 비	3,475	-	1,150	1,075	1,250
민간자본	2,839	-	818	961	1,060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 메타버스 산업단지 통합 관제·운영관리 플랫폼 개발

- 산업단지 메타버스 파일럿 플랫폼 개발 완료, 플랫폼 내 기능 개선·보완·추가 등을 위한 관계 기관 간 회의 지속

○ 생산·품질관리·공정 최적화 등 메타버스 콘텐츠 8종 개발

- 제조혁신 메타버스 서비스 8종 개발 완료, 하반기 수요처 내 기술 실증 진행을 위한 인프라 구축 추진 중

□ 향후계획

○ 충남 메타버스 산업단지 플랫폼 개발 완료(~`24. 12.)

○ 산업단지 내 메타버스 서비스(플랫폼·콘텐츠) 확산 추진(`25. 1.~)

사업명

휴먼마이크로바이옴 분자제어 연구센터

담당자

미래산업과 신혜원(☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마이크로바이옴 엑소좀(전신 순환 신호전달자)의 분자제어 연구를
통한 염증 기반 감염/대사질환 치료 원천기술 확보

○ 마이크로바이옴 신진 연구 의사과학자/의과학자 양성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6. 1. ~ 2030. 2. 28.(6년 9개월)

○ 위 치 : 순천향대학교(충남 아산시 순천향로 22)

○ 규 모 : 연구개발과제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,925백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,925	-	2,050	2,275	12,600
국 비	9,325	-	1,050	1,275	7,000
시 도 비	700	-	100	100	500
시군구비	1,400	-	200	200	1,000
민간자본	5,500	-	700	700	4,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기 구축된 PMC센터의 공간 및 장비·시설을 적극 활용하여 MRC센터
개선공사 완료(‘23. 9.)

○ 센터연구의 중요성 등에 대한 학교 차원의 체계적인 홍보 추진

□ 향후계획   ※ 3그룹으로 나누어 연구개발 추진

○ (1그룹) 기 구축 감염 동물모델에서 유효성 확립 균주의 광범위 동물
유효성 검증 및 유효성분 탐색

○ (2그룹) 마이크로바이옴 유래 엑소좀 성분 확인 및 염증조절 기전 연구

○ (3그룹) 대사 변화에 따른 마이크로바이옴 조사 및 분석

사업명

수소기술 혁신연구센터

담당자

미래산업과 신혜원(☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고효율 고내구성을 갖는 수전해 셀과 연료전지 셀 개발 및 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. 1. ~ 2030. 2. 28.(6년 6개월)

○ 위 치 : 단국대학교 천안캠퍼스(충남 천안시 동남구 단대로 119)

○ 규 모 : 연구개발과제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,123백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,123	-	1,237	1,666	8,220
국 비	8,941	-	1,125	1,366	6,450
시 도 비	600	-	-	100	500
시군구비	300	-	-	50	250
민간자본	1,282	-	112	150	1,020

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ RLRC 연구센터 개소식 개최(‘24. 1. 25.)

□ 향후계획

○ 금속지지형 고체산화물 연료전지 전해질 및 전극 소재 개발

○ 고성능 촉매 소재를 위한 나노소재(0차원) 개발

○ 고성능 촉매 소재를 위한 나노소재(2차원) 조성 제어

○ 다공성 금속지지체 개발

사업명

혁신형 미래의료 연구센터

담당자

미래산업과 신혜원(☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 외상성 손상에 의한 난치성 질환 극복을 위해 다학제적 지식을 바탕으로
새로운 치료 기술 개발이 가능한 융합형 전문 임상의사과학자 인력 양성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 1. ~ 2026. 12. 31.(3년 9개월)

○ 위 치 : 단국대학교 의과대학 부속병원(충남 천안시 동남구 망향로 201)

○ 규 모 : 연구개발과제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,279백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,279	-	1,954	2,175	4,150
국 비	5,100	-	1,275	1,275	2,550
시 도 비	400	-	100	100	200
시군구비	400	-	-	200	200
민간자본	2,379	-	579	600	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ (1세부) AI 분석용 데이터 플랫폼 구축 및 실용화

○ (2세부) 3D 프린팅을 활용하여 맞춤형 골조의 분화능 최적화

○ (3세부) 안면근신경 손상 동물모델에 스크리닝 재료, 줄기세포 도입

○ (4세부) 외상성 동물 모델 확립 및 치료기술의 효능 검증

○ (5세부) 융합치료전략 적용 줄기세포 스페로이드 최적화

□ 향후계획   ※ 5그룹으로 나누어 연구개발 추진

○ (1세부) AI 시스템 실제 중증 외상환자 적용 및 성능 검증

○ (2세부) 근조직 모사 이식재 제작 및 최적화

○ (3세부) 최적화된 후보 생체재료 복합 적용 시의 시너지 재생 효과 확인

○ (4세부) 외상성 동물 모델 확립 및 치료기술의 효능 검증

○ (5세부) 광융합치료 적용 줄기세포 스페로이드 최적화

사업명

충남 도립파크골프장 조성사업

담당자

체육진흥과 이창희(☎635-3866)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한파크골프협회 충남도 이전, 파크골프장 조성 및 복합 스포츠

인프라 구축을 통해 대한민국 파크골프 메카 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘23. 12. ~ ‘26. 6.

○ 위 치 : 청양군 남양면 구룡리 산52-1번지 일원(舊 구봉광산)

○ 규 모 : 파크골프장(108홀, 231,433㎡) ‧ 클럽하우스(연면적 3,230㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	21,000	-	1,000	2,000	18,000
국 비	3,000	-	-	-	3,000
시 도 비	18,000	-	1,000	2,000	15,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본‧실시설계 착수(’23.12.), 연계용역 착수(환경‧재해 등, ’24.1.), 기본설계 착수보고회(’24.4), 건축기획 착수보고회(’24.5), 공공건축 심의(’24.4.~7.)

□ 향후계획

○ 공유재산 심의(’24.8.), 공공건축 설계 공모 및 건축설계 착수(’24.8.), 파크골프장‧클럽하우스 착공 및 준공(’24.12.~’26.6.)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액(예정) : 당초 210억(국 30, 도 180) → 변경 290억(국 30, 도 260)

‧ 토목공사비(발파암 발견) 및 건축공사비(자재‧인건비) 증가(80억원 추가 소요)

‧ (당초) 도비 180억(건축 78, 토목 102) / (변경) 도비 260억(건축 123, 토목 137)

사업명

해양바이오 전략소재 메타
플랫폼화 원천기술 개발

담당자

미래산업과 신혜원(☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화력발전소 유래 폐에너지 저감 기초원천기술을 활용한 고부가
미세조류의 대량생산, 고부가 전략소재의 제품화 플랫폼 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 1. ~ 2025. 12. 31.(2년 9개월)

○ 위 치 : 순천향대학교(충남 아산시 순천향로 22)

○ 규 모 : 연구개발과제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,634백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,634	-	2,251	2,376	3,007
국 비	4,900	-	1,500	1,400	2,000
시 도 비	2,359	-	643	858	858
민간자본	375	-	108	118	149

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 단계별 배양 시스템 구축(5L, 3톤, 60톤)

○ 미세조류 세포 전처리 기법 개발 및 원재료 품질시험 완료

○ 화력발전소 실증 단지 확보 : 서부발전 외 1개소 구축 중

○ 미세조류 기반 시제품 개발(음료, 탈모케어, 사료 첨가제)

□ 향후계획

○ 화력발전소 유래 연소가스 및 온배수를 이용한 수온 조절 및 관리 기술 적용 연구

○ 배양시스템을 활용한 하이브리드 배양 기술의 모듈화(단계별)

○ 선정된 미세조류 외 활용 가능 소재 연구

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 8,234.2백만원 → 7,634.2백만원(△600백만원)

- 정부 R&D 예산 감축 방침에 따른 2024년 국비 변경(2,000백만원 → 1,400백만원)

사업명

멀티오믹스 기반 친환경 양돈 플랫폼 구축

담당자

미래산업과 신혜원(☎635-3953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오믹스 분석 및 AI를 활용한 양돈산업의 미래융합형 바이오시스템
구축을 통한 원천기술 집약화

○ 양돈 농가에 디지털 기반의 스마트 양돈 바이오시스템 실용화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. 1. ~ 2032. 8. 31.(9년)

○ 위 치 : 단국대학교 천안캠퍼스(충남 천안시 동남구 단대로 119)

○ 규 모 : 연구개발과제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,234백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,234	-	542	852	7,840
국 비	6,762	-	385	602	5,775
시 도 비	450	-	50	50	350
시군구비	400	-	-	50	350
민간자본	1,622	-	107	150	1,365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ㈜제일회사와 저탄소 친환경 사료 개발 진행 중(연구개시 ‘24. 1. 1.)

○ 충남 농가 가축질병예방 교육 및 악취저감·조절을 위한 기술 세미나 개최

○ ’글로벌 역량강화 및 국내 양돈산업 현황 파악을 위한 특강‘ 진행

□ 향후계획

○ 악취제어 미생물 확보, 기능성 사료 선정

○ 양돈 악취 및 생산성 사양 실험

○ 스마트축산협업센터 준비 위원회 발족

사업명

충남 디지털·게임기업 육성

담당자

문화정책과 최윤미(☎3829)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남지역 게임산업 활성화 여건조성 및 디지털·게임기업 육성

○ 우수 게임기업 도내 유치 및 팁스형 유니콘 기업 육성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023 ~ 계속

○ 사업내용 : 게임기업을 포한한 콘텐츠 기업 전반에 대한 투자펀드

조성으로 우수기업 유치 및 팁스형 유니콘* 기업으로 육성

* 팁스형 유니콘 기업가치 10억 이상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	-	220	820	7,960
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,000	-	220	820	7,960

□ 추진상황(진척률 : 11%)

○ (’23. 3.~12.) 충남형 TIPS R&D 자금 지원(2개사), 도내 기업유치(2개사)

○ (’23. 6.~7.) 충남 디지털콘텐츠·게임산업 타당성 및 전략수립 연구용역

○ (’23. 11.) 벤처투자조합 1호 결성(215억 규모, 출자 6억원)

○ (’24.  8.) 벤처투자조합 2호 결성(500억 규모, 출자 15억)

□ 앞으로

○ (’24.~’26.) 유망 디지털콘텐츠‧게임기업 발굴 및 우수기업 집중 지원

- 펀드 운영을 통한 직접투자로 콘텐츠‧게임기업 성장 지원

【 연차별 추진계획 】

구 분(단 위 사 업)		민 선 8 기 임 기 중				2027 ~
		2023	2024	2025	2026
펀드조성 및 운영	벤처투자조합 조성 및 운영 (투자액의 200% 지역투자)	• 투자조합 출자 계획 수립 • 펀드조성	• 펀드조성완료 • 6억원 출자	• 펀드운영 • 4.5억원 출자	• 펀드운영 • 4.5억원 출자	• 투자회수 • 회수된 투자금 재투자를 통한 신규 펀드 조성
기업 지원	충남형 TIPS R&D* 자금지원프로그램*(총 30건)	• 기업지원 2건	• 기업지원 2건	• 기업지원 13건	• 기업지원 13건	• 성공사례 도출
	청년 신규 고용창출 인건비 지원사업(총 200명)			• 100명 채용지원	• 100명 채용지원	• 충남도 정주 성공사례 도출

사업명

안면도관광지 제방도로 확포장 공사

담당자

개발전략과 강태민(☎635-2923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광지 개발에 따른 관광객 증가 및 관광산업 활성화를 통한 지역경제 발전도모

○ 제방도로 4차로 확장을 통해 차로 불일치로 인한 교통체증 및 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1월 ~ 2026. 4월

○ 위 치 : 충청남도 태안군 안면읍 승언리~중장리(도시계획도로)

○ 규 모 : 도로 확포장 [L=1.0km, B=25.0m (기존2차로⇒확장4차로)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,000	-	800	-	11,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	12,000	-	800	-	11,200
시군구비	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ 실시설계용역 및 기타 용역 추진 중

○ 인허가 관련 관계기관 협의

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 기타용역 준공 (’24. 12.)

○ 공사 인·허가 및 착공 (’25. 1.)

사업명

서산의료원 신관증축

담당자

보건정책과 김진열(☎635-4305)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감염병 및 중증응급환자 치료를 위한 인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 서산의료원 옆 주차장(서산시 중앙로 149)

○ 규 모 : 연면적 13,000㎡(지하2층/지상3층)

- 지하 1,2,3층 : 기계전기실, 지하주차장 150대

- 1층 : 응급의료센터 / 2층 : 호흡기센터, 심뇌혈관센터

- 3층 : 일반 및 호흡기 전담병동 90병상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,393백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	47,393	2,000	-	16,936	28,457
국 비	23,696.5	1,000	-	8,468	14,228.5
시 도 비	23,696.5	1,000	-	8,468	14,228.5

□ 추진상황

○ (’21. 05.) 신관 증축 지원계획 통보('21년 : 설계비 국비 10억)

○ (’22. 08.) 충청남도 공유재산심의회 승인

○ (’23. 03.) 중앙재정투자심사(1차) 조건부 승인

○ (’23. 08.) 설계용역 계약심사 및 계약심의위원회 심의 완료

○ (’23. 10.) 설계용역 제안공모평가회 및 설계업체 선정

○ (’24. 04.~) 사업계획 변경 및 기본설계 심의신청

□ 향후계획

○ (’24. 12.) 기본 및 실시설계, 조달청 원가심사

○ (’25. 03. ~ ’26. 12.) 착공 및 준공

사업명

국방대 체력단련장 조성

담당자

공공기관유치과 정상혁(☎635-2942)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국방대학교 논산 이전에 따른 이전기관 지원 및 이전공공기관 종사자 정주여건 조성

○ 우리도가 수립한 이전지원계획(`10.10.)에 반영된 사업으로서 기관 간 신뢰보호 측면에서 이행 필요

○ 체력단련장 이용인구 유입 등에 따른 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7월 ~ 2025. 12월

○ 위 치 : 충청남도 논산시 양촌면 황산벌로 1040(국방대학교)

○ 규 모 : 체력단련장(골프장) 9홀 (대지면적: 247,084㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,819백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	39,819	17,037	6,000	11,782	5,000
국 비	9,819	9,819	-	-	-
시 도 비	30,000	7,218	6,000	11,782	5,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 토목 및 조경 공정률 70%, 옥외 통신/전기공사 공정률 30%

○ 건축 공사 착공

□ 향후계획

○ `24. 12. 토목 및 조경공사 공정률 90%, 건축공사 공정률 30%, 옥외 통신/전기공사 공정률 100%

○ `25. 12. 완공 및 개장준비

사업명

충남 예술의 전당 건립

담당자

문화정책과 이설(☎635-3835)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민의 문화예술 욕구 부응, 문화 자족도시로의 기반 마련을 위한 충남 예술의전당 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2028년

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 887 외 1필지

○ 규 모 : 부지면적 29,746㎡, 연면적 14,080㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 122,696백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	122,696	16,496	1,000	1,900	103,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	122,696	16,496	1,000	1,900	103,300
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(진척률 : 1%)

○ (’23. 8.) 행안부 지방재정 투자심사 통과(조건부)

○ (’24. 6.) 국제지명 설계공모 심사 및 당선작 선정

□ 앞으로

○ (’25. 6.) 계획·중간·실시설계 완료

○ (’28. 9.) 공사 준공

사업명

충남형 도시리브투게더 건립

(첫사업 출자금)

담당자

건축도시과 양대남(☎635-4666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년 및 신혼부부 등 ‘내 집 마련 꿈’ 기회 제공을 위한 분양전환(6년 임대) 공공임대주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년

○ 위 치 : 홍성 내포신도시 RH-16BL(공동주택용지)

○ 규 모 : 공공주택 949호(전용면적 84㎡) 및 부대복리시설(지하1층~지상25층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 약 3,930억원(道 출자금 1,675, 기금 711, 임대보증금 1,544)

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	393,000	-	-	90,900	302,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	154,700	-	-	48,500	106,200
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	238,300	-	-	42,400	195,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ’24. 4. 사업승인 및 착공

□ 향후계획

○ ’24.  9. 견본주택건립 및 입주자모집 공고

○ ’26. 12. 공사완료 및 입주

사업명

탄소중립 실증인프라 구축사업

담당자

산업육성과 최윤진(☎635-3934)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탄소중립을 실현하기 위하여 배출된 CO2를 흡수하여 처리하는 CCU기술개발 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년)

○ 위 치 : 충남 서산시 대산읍 평신1로 595-10

○ 규 모 : 센터 구축(3층, 1,638m2), 실증 및 분석장비(40종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,570백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	48,570	-	2,370	11,430	34,770
국 비	27,970	-	970	5,600	21,400
시 도 비	9,300	-	500	2,715	6,085
시군구비	9,300	-	500	2,715	6,085
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	400	400	1,200
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 1차년도 장비 발주(΄23.12.)

○ 센터 건축설계 발주(΄24.2.)

○ 센터 건축설계 완료(΄24.7.)

□ 향후계획

○ 센터 및 이산화탄소 현장포집설비 착공(‘24. 하반기)

○ 센터 및 이산화탄소 현장포집설비 준공(‘25. 상반기)

○ 기업지원 및 인력양성사업 추진(~‘27. 12.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 건축비 증액에 따른 지방비 추가반영(건축비 물가상승분)

(단위 : 백만원)

구 분			계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
기정	계(100%)		45,970	2,370	13,830	16,110	11,830	1,830
	국 비(60.8%)		27,970	970	8,000	10,000	8,000	1,000
	지방비(34.8%)		16,000	1,000	5,430	5,710	3,430	430
		도 비	8,000	500	2,715	2,855	1,715	215
		시 비	8,000	500	2,715	2,855	1,715	215
	민 간(4.4%)		2,000	400	400	400	400	400
변경	계(100%)		48,570	2,370	11,430	18,510	11,830	1,830
	국 비(57.6%)		27,970	970	5,600	12,400	8,000	1,000
	지방비(38.3%)		18,600	1,000	5,430	5,710	3,430	430
		도 비	9,300	500	2,715	4,155	1,715	215
		시 비	9,300	500	2,715	4,155	1,715	215
	민 간(4.1%)		2,000	400	400	400	400	400

사업명

충청남도동물위생시험소

당진지소 신축

담당자

동물위생시험소 운영지원과

이찬우(☎635-7008)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후지소 신축으로 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하여 민원인  불편 해소, 농가 서비스 질 향상, 직원 근무의욕 고취 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 9.

○ 위 치 : 당진시 용연동 854(역천로 632-18)

○ 규 모 : 지상2층(연면적 1,191.72㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,194백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,194	-	428	2,621	5,145
국 비	-	-	-	1,500	-
시 도 비	8,194	-	428	1,121	5,145
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 당진지소 신축 기본계획 수립('21. 9.)

○ 당진지소 신축 공유재산심의회('22. 4.) 및 지방재정투자심사('22. 8.)

○ 당진지소 공사 착공('24. 8.)

○ 설계용역 및 공사 계약심사, 일상감사 등 완료('24. 5.)

□ 향후계획

○ 당진지소 공사 준공('25. 9.)

□ 사업변경 내역

○ 철거 및 건축공사 설계용역('23.7. ~ '24.3.) 추진 중, 공사비 증가

(원자재가격 및 인건비 상승 등)에 따라 총사업비 변경

※ (총사업비) 당초 6,954백만원 → 변경 8,194백만원(1,245백만원, 17.8%↑) 향상을 위한 사업으로 소요 예정