(별지 9) 개별 투자심사 사업의 추진현황

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업	258,651	199,235	59,416	-	-	2025	2022	100%
지역지능화혁신인재양성 사업	19,758		1,500	2,610	15,648	2031	2024	12.5%
충청권 통일플러스센터 건립	13,740	8,853	2,907	4,882	-	2025.11.	2022	66.7
소통협력공간 조성	15,687	6,187	3,007	5,793	700	2025	2023	85
재난안전산업 진흥시설 조성지원사업 (화재분야)	27,918	7,240	8,061	6,552	6,065	2026	2024	-
미래모빌리티 열관리시스템 성능 검증 기반 구축	11,000		2,996	3,288	4,716	2027	2024	30
(가칭)충남 혁신산업펀드 1호 조성	111,200	0	111,200	0	0	2032	2024	100%
(가칭)충남 탄소중립펀드 1호 조성	44,000	0	44,000	0	0	2032	2024	100%
(가칭)충남 모빌리티펀드 1호 조성	50,500	0	50,500	0	0	2032	2024	100%
안면도관광지 제방도로 확포장 공사	12,000	800	-	5,000	6,200	2026	2023	20
충남혁신도시 복합혁신센터 건립	25,300	-	-	1,000		2029	2024	추진중
베이밸리 비전선포 기념 슈퍼콘서트	500	-	500	-	-	2024	2024	100
충남 권역 재활병원 건립	49,500	16,118	14,000	19,382	-	2025	2022	65
서산의료원 신관 증축	47,393	2,000	16,936	28,457	-	2027	2023	20
전국 청년 축제 '피크타임 페스티벌'	500	-	490	290	500	2024년	2024년	100
섬문화예술플랫폼 건립	30,000	-	154	11,667	14,733	2026	2024	15
충남 이스포츠 상설경기장 건립	29,510	2,000	11,260	8,824	7,426	2026	2023	8 (공정률)
충남 디지털·게임 기업(산업) 육성	79,050	70,270	820	530	7,430	2026	2023	60
충남 예술의 전당 건립	122,696	16,496	2,350	4,600	99,250	2028	2023	15
충남 도립파크골프장 조성사업	29,000	20	448	5,582	22,950	2027	2025	15
충남광역먹거리통합지원센터 및 유기농 산업복합서비스 지원단지 조성사업	29,500	9,500	5,000	3,500	-	2026	2022	60
신가~구만 (지방도619호)확포장사업	8,460	-	217	302	7,941	2029	2024	설계중
규암~신리 (지방도625호)확포장사업	29,700	-	372	663	28,665	2029	2024	설계중
인주-염치(지624호) 확포장사업	183,600	217	688	910	181,785	2028	2024	설계중
연산-조동1(지691호) 확포장사업	48,800	-	400	265	48,135	2029	2024	설계중
장암-석성(지611호) 확포장사업	40,900	-	350	505	40,045	2029	2024	설계중
모촌도로(지697호) 선형개량공사	6,275	261	34	1,626	4,354	‘27	2024	15
지방도634호 고남도로 선형개량공사	6,300	250	250	1,000	5,050	2027	2024	10%
지방도603호 내리도로 위험도로 구조개선공사	8,100	1,206	139	2,450	4,444	2027	2024	9%
서산∼명천 지방도(649호) 확포장사업	47,200	70	61	905	46,164	2029	2024	설계중
충남형 도시리브 투게더 건립(첫사업)	393,000	-	90,900	168,300	133,800	2026	2023	14
동물위생시험소 당진지소 신축	8,194	47	1,656	6,491	-	2025	2023	83
동물위생시험소 부여지소 신축	9,853	-	-	415	9,438	2028	2023	-
동물위생시험소 태안지소 신축	9,305	-	-	-	9,305	2030	2023	-
도립공원 사유지 매수	46,400	5,034	4,951	5,300	30,845	2031	2024	21.5

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘24년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

지자체-대학 협력기반 지역혁신사업

담당자

고등교육정책담당관 나봉균(☎635-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대전·세종·충남(DSC) 미래모빌리티 혁신 생태계 조성

○ 지역혁신플랫폼 구축을 통한 DSC공유대학 및 세종·내포 공동캠퍼스 운영

○ 모빌리티 신산업 기술고도화, 기업지원, 창업활성화를 통한 지속가능한 지역혁신 생태계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 6. ~ 2025. 2 (4년)

○ 위 치 : 대전, 세종, 충남 3개지자체, 24개 대학, 354개 지역혁신기관

○ 규 모 : 14대 대과제, 63개 세부과제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 258,651백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	258,651	199,235	59,416
국 비	181,055	139,464	41,591
시 도 비	77,596	59,771	17,825

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ DSC공유대학 구축·운영

○ 모빌리티 소재부품장비 인재양성 및 지역경쟁력 강화

○ 모빌리티 ICT분야 산업선도 생태계 구축

□ 향후계획

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 총괄 정산 ('25. 9.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 (당초) 2단계('24년) 사업비 68,600백만원(국비 48,000, 지방비 20,600)
(현재) 2단계('24년) 사업비 59,416백만원(국비 41,591, 지방비 17,825)

※ ‘2024년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 단계평가’ 결과(C등급)로 국고지원금 62억원 감액, 매칭 지방비 27억원 감액

○ 사업기간 (당초) 2021. 6. ~ 2026. 2 (5년)
(현재) 2021. 6. ~ 2025. 2 (4년)

※ 5차년도 사업은 ‘2024년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 기본계획(교육부)’에 따라 '25. 2. 사업 종료 이후 ‘지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’로 통합

사업명

지역지능화혁신인재양성 사업

담당자

고등교육정책담당관 나봉균(☎635-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남권 지능기술 도입과 주력산업 전환 활성화를 위한 교육ㆍ연구개발 및 결과물 축적·공유를 통하여 지역 기업의 지능화 기여

○ 충남 지능화 혁신을 통한 반도체/디스플레이/해양수산/모빌리티 석박사 전문인력 양성 및 지능화 혁신연구 수행

○ ‘지능화 기술개발’, ‘기업성장 지원’, ‘지능화 인재양성’을 통한 ‘충남 미래 주력산업 혁신 생태계 조성’을 사업 목표화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 3. ~ 2031. 12 (7년 6개월)

○ 위 치 : 호서대학교

○ 규 모 : 반도체·디스플레이·해양수산 분야 지역지능화(AI, 빅데이터, 5G 등) 혁신 연구 개발 및 석·박사 고급 인력 인재양성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,758백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,758		1,500	2,610	15,648
국 비	15,000		1,000	2,000	12,000
시 도 비	510			90	420
시군구비	990		80	100	810
지 방 채
민간자본	158		20	20	118
기 타	3,100		400	400	2,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12.5%)

○ 반도체 패키징 최적구조의 산업체 수요조사 및 선행기술 분석

○ 지역 제조기업 대상 지능화 기술 적용 파악 및 요구사항 분석

○ 해양 연안어업 어획량 증가 위한 데이터 분석 플랫폼 모델 수립

□ 향후계획

○ 충남 지역기업 반도체·해양수산·제조 지능화 적용

○ 충남 지역지능화 혁신 재직자 석·박사 인력양성 모집

사업명

충청권 통일플러스센터 건립

담당자

자치행정과 이만규(☎635-3602)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수도권 및 집경지역에 평화통일 인프라 집중에 따른 지역 격차를 해소       하기 위한 지역별 거점센터 구축

○ 남북교류협력 사업의 종합 플랫폼으로 통일교육, 남북협력사업 지원, 북한       이탈주민 지원, 북한자료 등 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2025년

○ 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 937번지(적십자사 충남지사 옆)

○ 규 모 : 연면적 2,200㎡(부지 3,000㎡) / 지하1층~지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	13,740	8,853	2,907	4,882	-
국 비	4,000	4,000	1,888	-	-
시 도 비	9,740	2,953	1,019	4,882	-
시군구비
지 방 채		1,900
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ (공모선정) 「충청권 통일+센터」 통일부 공모 선정(’21.4.)

○ (행정절차) 지방재정영향평가(’21.6), 공유재산심의(’22.6.), 지방재정투자심사(’22.8.),

공유재산관리계획 의결(’22.9.), 공공건축심의(’22.10.), 건설본부 의뢰(’22.12.)

○ (건축추진) 설계공모(’23.3.~5.), 기본·실시설계(’23.6.~‘24.6), 건축 착공(’24.8.)

센터 전시 콘텐츠 용역 착공(’24.9.)

□ 향후계획

○ 건축물 준공(’25.11.), 실내 전시 콘텐츠 용역 준공(’26.1.), 센터 개관(’26.2.)

사업명

소통협력공간 조성

담당자

새마을공동체과 서기숙(☎635-3472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 고유성(특색)을 이용하여 지역 방문을 활성화할 수 있는 중소도시 경쟁력 증진 필요 → 지역의 브랜드화 육성 추진

○ 소통협력공간 조성을 통해 로컬브랜딩 발굴 및 지역 문제 해결 등 도내 혁신 활동 지원으로 지역주도 성장 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 10.

○ 위 치 : 아산시 온천대로 1496 온양온천역 2층

○ 규 모 : 3,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,687백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,687	6,187	3,007	5,793	700
국 비	7,000	6,000	1,000
시 도 비	6,887	187	207	5,793	700
지 방 채	1,800		1,800
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 설계공모(’24. 4.) 및 설계자 결정(’24. 5.), 설계 추진(’24. 6.)

○ 설계 완료(’25. 1.) 및 착공(’25. 4.), 철거공사 완료(’25. 6.)

□ 향후계획

○ 단열재 설치(’25. 8.), 기계 및 전기통신소방공사(’25. 7~10.)

○ 공사 준공(’25. 10.), 센터 입주 및 운영(’25. 11.~)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비: (당초) 166억원 → (변경) 144억원(△22억원, 국비 감소)

○ 사업기간: (당초) 2020~2024 → (변경) 2020~2025(조성지 변경에 따른 지연)

사업명

화재안전산업 진흥시설 조성지원사업

담당자

안전정책과 박용희(☎635-5624)

□ 사업목적

○ 재난안전산업의 육성 및 R&D 인프라 개선을 위해 재난안전 제품·기술의

｢연구장비 구축 - 기술개발 - 성능평가 - 인증체계 - 판로개척｣ 지원 등

기능을 일괄 수행하는 통합 지원시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024~2026(3년)

○ 위 치 : 충청남도 홍성군 갈산면 산단로 516(일반산업단지)

○ 규 모 : 부지면적 20,691.10㎡

-  제1시험동 1,170㎡, 제2시험동 1,094.33㎡, 소재평가동 353.98㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,918 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	27,918	7,240	8,061	6,552	6,065
국 비	7,000	-	543	3,457	3,000
시 도 비	3,500	-	750	1,250	1,500
시군구비	3,500	-	219	1,781	1,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	13,918	7,240	6,549	64	65
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ (1차년도-진흥시설 조성단계) 진흥시설 건립, 화재실증 시험 환경조성 장비 구축

- 시험·평가 장비 구축, 기술 및 정책 분석 등을 통해 기술 경쟁력 강화와        제도 개선의 기반을 마련

□ 향후계획

○ 시험·평가 장비 12종 추가 구축(2025년-4종/2026년-8종)

○ 재난안전산업 진흥시설(행정안전부) 지정(2025. 9.)

○ (2차년도-운영 단계) 재난안전제품 화재 실증 시험·평가장비 운용, 관련기업

신제품·신기술 향상 지원 및 R&D 과제 발굴·연구

○ (3차년도-운영 고도화 단계) 화재안전산업 제품·기술 성능시험 평가장비 구축 완료,

재난 현장 시험장(Test Bed Chamber) 조성 및 연계 R&D 사업 실증

사업명

미래모빌리티 열관리시스템

성능검증 기반구축

담당자

산업육성과 자동차산업팀

박지현(☎635-2253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내연기관차의 전동화도 빠르게 전환되고 있어 전기차의 효율적인 열관리가필요한 상황으로 전기차의 부품, 실제차 기반의 인증·평가 지원을 통해 자동차부품기업의 기술경쟁력 강화

○ ’24년 산업부 공모에 선정되어 연차별 사업계획에 따라 사업 추진 중

□ 사업개요

○ 기   간 : 2024년~2027년(4년)

○ 사업주관 : 충남테크노파크

○ 위   치 : 예산군 예산읍 충남TP 미래자동차센터 내

○ 규   모 : 열관리시스템 종합지원센터 건축(지상 1층 연면적 694.21㎡), 장비 2종 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원 (국비 500, 도비 300, 예산군비 300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,000		2,996	3,288	4,716
국 비	5,000		1,200	1,280	2,520
도 비	3,000		898	1,004	1,098
예산군비	3,000		898	1,004	1,098

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’24년 산업부 공모 선정(’24. 4.)

○ 전자협약 체결 완료(’24. 5.)

○ 지방재정투자심사 완료(’24. 6.)

○ 장비 2종 국가장비도입심의 승인(’24. 9.)

○ ’24년 도비 지원(8.98억원)(’24. 12.)

○ 기술 지도 등 기업지원 8건 완료(’24. 12.)

○ ’25년 도비 지원(10.04억원) (’25. 6.)

○ 총사업비 증액 검토보고 예산실 협의(’25. 7.)

○ 열관리 종합지원센터 설계 용역사 선정(’25. 8.)

□ 향후계획

○ ’26년, ’27년 사업비 확보

○ 열관리시스템 종합지원센터 실시설계 완료(’25. 10.)

○ 기업지원 9건 완료(’26. 12.)

○ 열관리시스템 종합지원센터 공사 착공(’25. 12.) 및 준공(’27. 2.)

○ 장비 2종 구축완료(’27. 2.)

→ 구축 완료 예정 장비(2종)의 활용률 제고를 통한 미래모빌리티 열관리 센터의 수익성 유지를 위해 지속적인 모니터링이 필요

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 110억원에서 117.97억원으로 증액

- ’24년 지방재정투자심사시에 적용한 건축비 산출 단가의 현행화, 장비의 효율적 운영 방안을 적용한 건축 공사, 전력 배전설비 추가 공사, 설계비감리비 상승분 반영이 필요한 상황 이에따라 총사업비 7.97억원 증액

사업명

(가칭)충남 혁신산업펀드 1호 조성

담당자

일자리기업지원과 김상은(☎635-3415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신산업(도 주력산업 및 국가 12대 전략기술)을 영위하는 도내 기업에게 벤처투자 자본을 지원함으로써 우수기업 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024~2032

○ 규 모 : 총 1,112억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  111,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	111,200		111,200
국 비
시 도 비	3,000		3,000
시군구비
지 방 채
민간자본	108,200		108,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 티에스 2024-16 M&A 성장조합 결성 완료 (2024.6.28.)

○ 도내 기업 중 혁신사업을 영위하는 기업에 60억원 투자 약정 체결 (향후 3년간)

□ 향후계획

○ 도내 본점 또는 공장을 둔 충남 기업에 60억원 이상 투자

□ 사업변경 내역

○ 총 사업비는 (당초) 250억원→ (변경)1,112억원으로, 한국성장금융(금융위원회 산하 민간투자기관)이 주요 출자자(400억원)로 참여한 정책펀드로 민간 자본이 당초 70억원에서 1,082억원으로 증액되었음. (도비 변동 없음)

사업명

(가칭)충남 탄소중립펀드 1호 조성

담당자

일자리기업지원과 김상은(☎635-3415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남도는 탄소중립경제특별도를 선포하고 기후위기 대응 정책을 선도적으로 추진하고 있으며, 기후테크 기업에 투자함으로써 도내로 기업 유치 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024~2032

○ 규 모 : 총 440억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	44,000		44,000
국 비	29,250		29,250
시 도 비	4,000		4,000
시군구비
지 방 채
민간자본	7,250		7,250
기 타	3,500		3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 디쓰리 미래환경 벤처투자조합 제2호 결성 완료 (2024.8.27.)

○ 도내 기업에 80억원(모빌리티 기업 20억원, 기후테크 기업 60억원) 투자 약정 체결 (향후 3년간)

□ 향후계획

○ 도내 본점 또는 공장을 둔 충남 기업에 80억원 이상 투자

□ 사업변경 내역

○ 총 사업비는 (당초) 250억원→ (변경) 440억원으로, 국비는 (당초) 150억원→(변경) 292.5억원, 도비는 (당초) 30억원→ (변경) 40억원으로 변경되었고, 민간 자본이 당초 70억원에서 72.5억원으로 증액되었음.

사업명

(가칭)충남 모빌리티펀드 1호 조성

담당자

일자리기업지원과 김상은(☎635-3415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남도는 내연기관 중심의 모빌리티 클러스가 구축되어있으나, 기존 산업을 미래모빌리티 산업으로 전환하고, 펀드조성을 통해 미래모빌리티 관련 기업 적극 유치 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024~2032

○ 규 모 : 총 505억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  50,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	50,500		50,500
국 비
시 도 비	2,000		2,000
시군구비
지 방 채
민간자본	40,500		40,500
기 타	8,000		8,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 하나-케이앤 지역혁신 투자조합 결성 완료 (2024.12.27.)

○ 도내 기업에 40억원(모빌리티 기업 20억원) 투자 약정 체결 (향후 3년간)

□ 향후계획

○ 도내 본점 또는 공장을 둔 충남 기업에 40억원 이상 투자

□ 사업변경 내역

○ 총사업비는 (당초) 250억원→(변경) 505억원으로, 당초 펀드 출자자의 구성이 모태펀드(국비) 포함이었으나, 본 조합은 산업부, 산업은행과 협약을 통한 R&D 정책펀드로 변경되어, 도비는 (당초) 30억원→(변경) 20억원으로 변경되었고, 민간 자본이 당초 70억원에서 40,500억원으로 증액되었음.

사업명

안면도관광지 제방도로 확포장공사

담당자

개발전략과 조원희 (☎635-2923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광지 개발에 따른 관광객 증가 및 관광산업 활성화를 통한 지역경제 발전도모

○ 제방도로 확장(2차로→4차로)을 통해 차로 불일치로 인한 교통체증 및 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027년

○ 위 치 : 충청남도 태안군 안면읍 중장리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 [L=1.12km, B=22m (2차로→4차로)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024	2025년	2026년 이후
계	12,000	800	-	5,000	6,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	12,000	800	-	5,000	6,200
시군구비	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘24. 2. : 실시설계용역 착수

○ ‘25. 2. : 실시설계용역 완료

○ ’25. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료

□ 향후계획

○ ’26. 3. : 공사 착공

○ ’27. 7. : 공사 준공

사업명

충남혁신도시 복합혁신센터 건립

담당자

공공기관유치과 정우철(☎635-2943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신도시의 이전공공기관 종사자의 정주여건 제고를 위하여 혁신도시별로 지원되는 국비(99억)를 통한 복합문화 시설 조성사업으로 그동안 충남은 ‘혁신도시 예정지구’가 없어 교부되지 못해왔으나 올하반기 국비교부를 시작으로 사업추진

* 지원근거 : 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제34조

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025 ~ 2029년

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 목리 일원(업무 11용지)

○ 규 모 : 연면적 3,816㎡, 3층(지상3, 지하1)

○ 시 설 : 키즈문화센터(1층), 청소년문화공간(2층), 다목적체육관(3층) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,300백만원*

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,300			1,000	28,943
국 비	9,900			500	9,400
시 도 비	7,700			250	7,450
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	7,700			250	7,450

* 지방재정 투자심사 결과이며, 국토부와 협의를 통해 총사업비는 추후 확정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 기본구상 및 운영방안 연구용역 추진 중(’25. 3.)

○ 지방재정투자심사, 공공건축사업 사전검토, 공공건축심의위원회 완료

□ 향후계획

○ (예산확보) 총사업비 협의 및 하반기 국비 교부(국토부), 지방비 편성(道 예산담당관, 예산군)

○ (설계용역) 기본구상 연구용역 완료 후 설계 추진(’25. 下. ~ ’26. 11.)

○ (공사추진) 설계 완료 후 공사 발주 후 추진(’26. 上~)

사업명

베이밸리 비전선포 기념 슈퍼콘서트

담당자

개발전략과 조경찬(☎635-4732)

□ 추진목적 및 필요성

○ 베이밸리는 민선8기 핵심정책 사업으로 대한민국 미래 100년 먹거리를 만들기 위한 충남도의 대담한 프로젝트임

- 국가차원의 지원없이는 추진이 어려운 상황으로 베이밸리 인지도 제고를 위한 전국민 대상 행사 개최 필요

○ 또한, 지난 2년동안 수립한 베이밸리 비전과 전략, 성과를 대내외에 알리고 이를 기념하기 위한 1호 사업 조기완공 기념식*을 맞아

* 베이밸리 1호사업 아산만 순환철도 조기완공 기념식 개최(‘24.11.21. / 인주역)

○ 전국민과 함께할 수 있는 문화행사 ’슈퍼콘서트‘를 개최

- 베이밸리 1호사업 조기완공을 기념하고, 베이밸리의 성과를 대내외 각인함과 동시에 힘찬 출발을 알리는 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 11. 29.(금) 18:30~21:00

○ 장 소 : 경찰인재개발원 차일혁홀(아산)

○ 규 모 : (인원) 1,700명 (출연) 22팀, 방송 녹화 TV조선 방영(‘24.12.14.)

○ 내 용 : 공연행사, 부대행사, 행사장 조성 및 홍보 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024	2025년	2026년 이후
계	500	-	500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	-	500	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 베이밸리 비전선포 기념 슈퍼콘서트 개최(’24. 11. 29.)

사업명

충남 권역 재활병원 건립

담당자

장애인복지과 배재권(☎635-4279)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지체 및 발달장애 등 재활치료를 통한 일상생활 적응 능력 향상

○ 공공재활서비스 접근성 향상을 통한 재활의료 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~2025년

○ 위 치 : 아산시 용화동 460–17

○ 규 모 : 150병상(지하 1층, 지상 4층), 연면적 11,712㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 495백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	49,500	16,118	14,000	19,382	-
국 비	13,500	9,500	4,000	-	-
시 도 비	25,200	3,171	5,000	17,029	-
시군구비	10,800	3,447	5,000	2,353	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 65.0 %)

○ 영서의료재단에 우리 도 기부채납 조건으로 건립 위탁(’17.12. 업무협약)

○ 실시설계 및 사업계획 변경 : 사업비 증(’20.12. 270억원 → 495억원)

○ 행안부, 재정투자심사 조건부 승인(’22.12., 500억 초과 시 타당성 조사 등)

○ 착공(’23.08., 우일건설,)

○ 권역재활병원 설립 및 운영지원 조례 제정(’25.03.) 및 민간위탁 의회 동의(’25.04.)

□ 향후계획

○ 공유재산(기부채납) 심의 절차 추진(’25.8.~)

○ 수탁기관 선정 심사위원회 심의 및 협약 체결(’25.9.~10.)

○ 준공 및 개원준비(~26.2) → 개원(’26.3)

사업명

서산의료원 신관 증축

담당자

보건정책과 길  훈(☎635-4305)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감염병 및 중증응급환자 치료를 위한 인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 서산의료원 옆 주차장(서산시 중앙로 149)

○ 규 모 : 연면적 9,000㎡(지하2층/지상3층)

- 지하 1,2,3층 : 기계전기실, 지하주차장 78대

- 1층 : 응급의료센터 / 2층 : 호흡기센터, 심뇌혈관센터

- 3층 : 일반병동 40병상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,393백만원

				(단위 : 백만원)
구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	47,393	2,000	16,936	28,457	-
국 비	23,696.5	1,000	8,468	14,228.5	-
시 도 비	23,696.5	1,000	8,468	14,228.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ (’21. 05.) 신관 증축 지원계획 통보('21년 : 설계비 국비 10억)

○ (’22. 08.) 충청남도 공유재산심의회 승인

○ (’23. 03.) 중앙재정투자심사(1차) 조건부 승인

○ (’23. 08.) 설계용역 계약심사 및 계약심의위원회 심의 완료

○ (’23. 10.) 설계용역 제안공모평가회 및 설계업체 선정

○ (’24. 04.) 사업계획 변경 및 기본설계 심의신청

○ (’24. 08.) 사업계획 변경 및 기본설계 심의 승인

□ 향후계획

○ (’25. 8.) 실시설계 완료, 조달청 원가심사, 공사발주

○ (’25. 10. ~ ’27. 08.) 착공 및 준공

사업명

전국 청년 축제 '피크타임 페스티벌'

담당자

청년정책관 인성주(☎635-3986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년의 날을 맞이하여 전국 청년들이 충남에 모여 젊은 충남 조성

○ 청년이 주도적으로 참여하고 소통할 수 있는 문화행사를 기획․추진하여 충남의 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 9. 27.(금) 14:00~22:00 / 9. 28.(토) 13:00~19:00

○ 위 치 : 충남 아산시 신정호 (아산시 신정로 616)

○ 규 모 : 전국 청년 25,000명 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,380	-	490	290	600
국 비	-		-	-	-
시 도 비	1,130		340	290	500
시군구비	250		150	-	100
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024 피크타임 페스티벌 개최 완료

- (청년정책 교류) 교육부 비롯 전국 33개의 대학·기업·단체 등 기관이 참여하여 80여개 정책홍보·체험 부스 운영, 전국 청년정책 간 공유

- (청년의 축제주도) 청년 마켓(청년 생산 식음료 판매), 청년 소통 프로그램(부캐왕 선발 등), 지역 청년 아티스트 공연 등 청년이 주도하는 행사 개최

- (탄소중립 행사) 행사장 내 재활용 가능한 다회용기 사용, 모바일 리플렛 활용(입장권 내 QR코드), 폭죽 행사 제외 등 저탄소·친환경 축제 추진

□ 향후계획

○ 전국청년축제 ‘2025 피크타임 페스티벌’ 개최(’25. 9. 예정)

○ 2026년도 전국청년축제 개최 준비(기본계획 수립, 예산확보, 개최지 선정 등)

사업명

섬문화예술플랫폼 건립

담당자

문화정책과 이설(☎635-3830)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구감소 및 고령화로 활기를 잃어가는 섬 지역에 문화 기반시설 확충과 새로운 해양 문화예술 개발을 통한 활성화 도모 및 지역발전 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3개년)

○ 위 치 : 충남 보령시 오천면 원산도리 1859번지

○ 규 모 : 부지면적 9,886㎡, 연면적 3,989㎡, 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원(도 18,000, 시 12,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	30,000	-	154	11,667	18,179
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	18,000	-	92	7,000	10,908
시군구비	12,000	-	62	4,667	7271
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ (‘23. 5. ~ 11.) 타당성조사 및 기본‧운영계획 수립 용역 추진

○ (‘23. 11.) 섬문화예술플랫폼 건립계획 수립

○ (‘24. 7. ~ 10.) 설계공모 및 당선작 선정, 설계용역 계약

○ (‘24. 10. ~ ’25. 8.) 설계용역 착수보고회 개최(‘24.11.) 등 설계 추진

□ 향후계획

○ (‘25. 8.) 설계완료

○ (‘25. 8. ~ 9.) 시공사 선정

○ (‘25. 9. ~ ‘26. 12.) 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액 : 당초 279억원(도 167, 시 112) → 변경 300억(도 180, 시 120)

- 설계 진행에 따른 총사업비 변경

사업명

충남 이스포츠 상설경기장 건립

담당자

문화정책과 최윤미(☎635-3823)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고부가가치 사업인 이스포츠 산업 활성화를 통해 충남의 이스포츠 관련

기업육성, 전문인력 양성 및 청년 일자리 창출  ⇨ 이스포츠 산업 선순환 생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ∼2026. 11.

○ 위 치 : 아산시 배방읍 장재리 2135-1번지(아산시 강소특구 내)

○ 규 모 : 부지 5,400㎡ / 지하 1층, 지상 3층 / 주경기장 429석, 보조경기장 74석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,510백만원(국비 4,000, 도비 25,510)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29,510	2,000	11,260	8,824	7,426
국 비	4,000	1,000	1,000	554	1,446
도 비	25,510	1,000	10,260	8,270	5,980

※ 기투자비용 2023년(1차년도) 사업비 내역 반영, 2024년 도비 부지매입비 반영

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실제 시공단계 / 8%)

○ (’22. 11. ~ ’23. 4.) 경기장 건립 기본계획 및 타당성 조사 추진

○ (’24.  1. ~ ’24. 9.) 기본·실시설계(김광현 총괄건축가 등 자문위원회 운영)

※ 착수 보고회(2.1.), 전문가 자문회의(3회), 중간‧최종 보고회(4.30. / 9.24.)

○ (’24. 12.) 공사업체 선정 완료
- 건축 : 운진건설(예산군 소재)       - 전기 : 동조전력(서천군 소재)
- 통신 : 디지정보시스템(천안시 소재) - 소방 : 엠제이(주)(태안군 소재)

○ (’25. 2. 28.~) 공사 실착공  ※ ‘25. 2. 21. 신축공사 착수보고회

- 가시설 및 터파기 공사 완료, 지하층 기초/골조공사 추진 중

□ 향후계획

○ (’25.  8.) 이스포츠 경기장 운영계획 수립

○ (’26. 11.) 공사 준공

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	기 존	변 경	증 감	비 고
총사업비	27,530	29,510	증 1,980	-
공사비	16,400	17,620	증 1,220	경기장 규모유지
부지매입비	7,460	7,460	-	1㎡ 1,362,000원
용역비(설계)	2,530	3,270	증 740	건설사업관리 포함
운영비, 시설부대비	1,140	1,160	증 20

※ 400석 이상 경기장 규모 유지, 실질 시공기간(18개월 이상) 고려 사업비 증액

사업명

충남 디지털·게임기업(산업) 육성

담당자

문화정책과 최윤미(☎635-3823)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충남 소재 콘텐츠 기업을 우수기업으로 육성 및 민간투자 유치를 통해

기업가치가 검증된 우수기업 충남으로 본사 이전 유치

⇨ 민선8기 공약, 디지털·게임산업을 주도하는 디지털 수도 충남 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ∼2026.

○ 목 표 : ’26년까지 기업가치 10억 이상 ‘충남형 TIPS형 유니콘 기업’ 30개사 육성

○ 구 성 : 투자조합 1식 및 민간이전전 지원사업 2식

- 벤처투자조합

- 민간이전 지원산업 및 지역인재 일자리 제공, 우수지역기업 투자 유치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 790.5억원(국비 450, 도비 90, 민간 244.5, 기타 6)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	79,050	70,270	820	530	7,430
국 비	45,000	45,00	-	-
도 비	9,000	220	820	530	7,430
민 간	24,450	24,450	-	-
기 타	600	600	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 충남 콘텐츠‧게임기업 육성 1호 펀드(국비 150, 민간 59, 기타 6억원) 조성(’23.12.)

○ 충남 콘텐츠 기업 벤처투자조합 2호 조성 업무협약 체결(’24.6.)

○ 충남 콘텐츠‧게임기업 육성 2호*펀드 중기부 승인 및 조성(’24. 8.)

* 2호 편드 조성액 50,050백만원(국비 30,000, 도비 1,500, 민간 18,550)

○ 콘텐츠기업과 지역인재 매칭으로 신규 일자리 창출(‘24년 7명, ’25년 7명)

○ 벤처투자조합 1호 투자 확정(12억원) 기업* 본점 소재지 충남 이전(’25. 5. 23.)

* 북아이피스(교육콘텐츠 저작권 거래 플랫폼 쏠북 운영)

□ 향후계획

○ 지역 콘텐츠기업 투자유치 지원 및 충남 이전 가능한 역외 기업 발굴

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	기 존(1호)	변 경(2호)	증 감	비 고
총사업비	27,508	50,050	증 22,542
국 비	10,000	30,000	증20,000
시도비	9,000	1,500	△7,500
민 간	7,400	18,550	증 11,150
기 타	1,108		△1,108

○ 당초 투자심사받은 275억 규모의 펀드(1호)는 조성 완료 후 신규 펀드(2호)

조성으로 사업비 변경

사업명

충남 예술의 전당 건립

담당자

문화정책과 임현준(☎635-3824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도민의 문화예술 욕구 부응, 문화 자족도시로의 기반 마련을 위한 충남

예술의 전당 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2028년

○ 위 치 : 충남 예산군 삽교읍 목리 765 외 1필지

○ 규 모 : 부지면적 29,746㎡, 연면적 14,080㎡, 지하1층/지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 122,696백만원(도비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	122,696	16,496	2,350	4,600	99,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	122,696	16,496	2,350	4,600	99,250
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ (‘23. 4.) 충남 예술의 전당 건립 추진 계획 수립

○ (‘23. 8.) 행안부 지방재정 투자심사 통과(조건부)

○ (‘24. 6.) 국제지명 설계공모 당선작 선정

○ (‘24. 8. ~ ‘25. 8.) 설계용역 계약 및 설계 추진

□ 향후계획

○ (‘25. 10.) 설계완료

○ (‘25. 10. ~ ‘26. 3.) 행정절차 이행 및 시공사 선정

○ (‘26.  3. ~ ‘28. 10.) 착공 및 준공

사업명

충남 도립파크골프장 조성사업

담당자

체육진흥과 한상락(☎635-3865)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어르신을 비롯한 도민의 여가·건강 증진과 고령화 사회 대응을 위해 파크골프 교육·경기 기반을 조성하고, 대회 유치와 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 12. ~ 2027. 6.

○ 위 치 : 청양군 남양면 구룡리 산52-1번지 일원(舊 구봉광산)

○ 규 모 : 파크골프장 108홀, 클럽하우스교육센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29,000	20	448	5,582	22,950
국 비	3,000	0	0	3,000	0
시 도 비	26,000	20	448	2,582	22,950
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본 및 실시설계용역 추진 중

□ 향후계획

○ 2025. 9. : 충청남도 도시계획위원회 및 청양군 도시·건축 공동위원회 심의

○ 2025. 10. : 실시설계 작성 및 제반 인허가 수행

○ 2025. 11.~ : 공사 발주

○ 2027. 6.~ : 공사 준공

사업명

충남광역먹거리통합지원센터 및
유기농산업복합서비스지원단지 조성사업

담당자

농식품유통과 이보영(☎635-4162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경농업에 대한 소비자의 인식 제고 및 소비촉진 유도를 위해 교육·체험·소비·문화 등의 종합서비스를 제공하는 단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2026년

○ 위 치 : 부여군 남면 내곡리 174-4 일원

○ 규 모 : 부지면적 25,744㎡ / 연면적 1,493㎡ / 지하1층, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,000	9,500	5,000	3,500
국 비	9,000	4,750	2,500	1,750	-
시 도 비	4,500	2,375	1,250	875	-
시군구비	4,500	2,375	1,250	875	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 유기농산업복합서비스 지원단지 공모사업 선정(‘21.7.)

○ 기본계획 승인(’22.9.)

○ 기본 및 실시설계 완료(’24.12.)

○ 건축공사 발주(‘24.12.)

○ 건축인허가 완료(‘25.6.)

□ 향후계획

○ 착공 및 준공(’25.08.~‘26.12.)

○ 유기농산업복합서비스 지원단지 운영(’27.3.)

□ 사업변경 내역

○ 충남광역먹거리통합지원센터은 건립중단(‘24.7.)으로 유기농복합단지만 사업추진

- 사업규모 : (당초) 부지 43,040㎡, 연면적 5,642㎡  →  (변경) 부지 25,744, 연면적 1,493

- 총사업비 : (당초) 26,000백만원* → (변경) 18,000백만원 * 토지매입비 제외

- 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2024년 → (변경) 2021 ~ 2026년 ※ 사업계획 변경에 따른 지연

사업명

신가~구만(지방도 619호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2029년

○ 위 치 : 예산군 삽교읍 용동리 일원

○ 규 모 : 연장=1.72km, 폭=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,460	-	217	302	7,941
국 비
시 도 비	8,460	-	217	302	7,941
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24. 3. : 지방재정 투자심사 완료

○ '24. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '25. 9. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '26. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

규암~신리(지방도 625호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2029년

○ 위 치 : 부여군 규암면 규암리 ~ 신리 일원

○ 규 모 : 연장=2.1km, 폭=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	29,700	-	372	663	28,665
국 비
시 도 비	29,700	-	372	663	28,665
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24. 3. : 지방재정 투자심사 완료

○ '24. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '25.12. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '26. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 투자심사 시 2024~2026에 추진하고자 하였으나, 설계 미완료로 2024~2029로 사업기간 변경

사업명

인주~염치(지방도 624호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2031년

○ 위 치 : 아산시 인주면 금성리 ~ 염치읍 염성리 일원

○ 규 모 : 연장=11.67km, 폭=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 183,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	183,600	217	688	910	181,785
국 비
시 도 비	183,600	217	688	910	181,785
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24. 6. : 지방재정 투자심사 완료

○ '24.11. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '25.12. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '27. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

사업명

연산~조동(지방도 691호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2029년

○ 위 치 : 논산시 연산면 연산리 ~ 벌곡면 조동리 일원

○ 규 모 : 연장=4.0km, 폭=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	48,800	-	400	265	48,135
국 비
시 도 비	48,800	-	400	265	48,135
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24. 6. : 지방재정 투자심사 완료

○ '24. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '26. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '27. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

사업명

장암~석성(지방도 611호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2029년

○ 위 치 : 부여군 장암면 하황리 ~ 석성면 봉정리 일원

○ 규 모 : 연장=0.9km, 폭=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	40,900	-	350	505	40,045
국 비
시 도 비	40,900	-	350	505	40,045
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24. 6. : 지방재정 투자심사 완료

○ '24.10. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '25.12. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '26. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

사업명

모촌도로 선형개량공사

담당자

동부사무소 구재현(☎635-7623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로선향 불량 등 시설기준 미달구간으로 최근 3년간 교통사고 지속발생 및 사망사고 발생으로 개선 필요

○ 시설기준 미달구간에 대해 시설개량 통한 통행 안전성 확보로 보조간선도로의 기능 확보와 교통 편익 증진 및 지역 간 교류 활성화에 따른 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2027년

○ 위 치 : 논산시 양촌면 모촌리 ~ 논산시 양촌면 남산리

○ 규 모 : L=0.68km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,275백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,275	261	34	1,626	4,354
국 비
시 도 비	6,275	261	34	1,626	4,354
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ’24. 5. 소규모 환경영향평가 협의 완료

○ ‘25, 6, 도로규역(변경)결정 완료

○ ’25. 8. 보상계획 공고

□ 향후계획

○ ‘25. 12. 공사 착공

○ ’27. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

지방도634호 고남도로 선형개량공사

담당자

도로철도항공과 김예린(☎4682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서산시 성연면 고남리 일원 고남저수지를 인접하여 통과하는 기존도로의 선형이 도로의 시설기준 미달 등 선형 불량으로 최근 3년간 교통사고 지속발생 및 사망사고 발생으로 개선 필요

○ 시설기준 미달구간의 선형을 개량하여 주행 안전성과 도로의 서비스수준 향상을 통한 보조간선도로의 기능 확보와 교통편익증진 및 지역간 교류 활성화에 따른 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ～ 2027년(5년)

○ 위 치 : 충청남도 서산시 성연면 고남리 ~ 170-1번지 일원

○ 규 모 : L=0.8km, B=9.50m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,300	250	290	1,000	5,050
국 비
시 도 비	6,300	250	250	1000	5,050
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 12. : 충청남도 도로건설.관리계획 반영

○ 2023. 06. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 12. : 도로구역 결정(변경) 고시 및 보상계획 공고

○ 2025. 03. : 손실보상 협의(1차)

○ 2025. 04. : 손실보상 협의(2차)

○ 2025. 08. : 손실보상 협의(3차)

□ 향후계획

○ 2025. 09. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지방도603호 내리도로 위험도로 구조개선공사

담당자

도로철도항공과 김예린(☎4682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태안군 이원면 내리 일원의 지방도603호선 선형 불량구간에 대하여 운전자의 주행안전성 및 쾌적성을 도모하기 위한 선형개량 사업을 시행하여 안전하고 원활한 교통소통과 도로이용자의 안전과 편의를 제공하기 위하여 본과업을 시행하고자 함

○ 시설기준 미달구간에 대해 시설개량 통한 통행 안전성 확보로 보조간선도로의 기능 확보와 교통편익증진 및 지역간 교류 활성화에 따른지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ～ 2027년(5년)

○ 위 치 : 충청남도 태안시 이원면 내리 992-1 ~ 874-2번지 일원

○ 규 모 : L=1.04km, B=9.50m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,100	1,206
국 비
시 도 비	8,100	1,206	139	2,450	4,444
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 2021. 12. : 충청남도 도로건설.관리계획 반영

○ 2023. 06. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 11. : 도로구역 결정(변경) 고시 및 보상계획 공고

○ 2025. 03. : 손실보상 협의(1차)

○ 2025. 04. : 손실보상 협의(2차)

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

서산~명천(지방도 649호) 확포장사업

담당자

도로철도항공과 강현수(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확장을 통한 안전성 확보 및 주변지역과의 연계성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2031년

○ 위 치 : 서산시 음암면 부산리 ~ 성연면 명천리 일원

○ 규 모 : 연장=4.47km, 폭=18.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	47,200	-	61	905	46,234
국 비
시 도 비	47,200	-	61	905	46,234
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ '24.10. : 지방재정 투자심사 완료

○ '25. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ '26.11. : 기본 및 실시설계용역 준공 및 보상 착수

○ '27. : 공사 착공 예정

□ 사업변경 내역(해당사항 없음)

사업명

충남형 도시리브투게더 건립(첫사업)

담당자

주택도시과 김혜란(☎635-4663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년 및 신혼부부 등 ‘내 집 마련 꿈’기회 제공을 위한 분양전환(6년 임대)

공공임대주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년

○ 위 치 : 홍성 내포신도시 RH-16BL(공동주택용지)

○ 규 모 : 공공주택 949호(전용면적 84㎡) 및 부대복리시설(지하1층~지상25층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,930억원(道 출자금 1,675, 기금 711, 임대보증금 1,544)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	393,000		90,900	168,300	133,800
국 비
시 도 비	117,500		61,300	21,000	35,200
시군구비
지 방 채	50,000			50,000
민간자본
기 타	225,500		29,600	97,300	98,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ ’24.  4. 사업계획승인 및 착공

○ ’24.  9. 견본주택 건립 및 입주자 모집 공고

□ 향후계획

○ ’26. 12. 공사 완료

○ ’27.  1. 입주 예정

사업명

동물위생시험소 당진지소 신축

담당자

동물위생시험소 운영지원과

이찬우(☎635-7008)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후지소 신축으로 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하여 민원인 불편 해소,       농가 서비스 질 향상, 직원 근무의욕 고취 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 10.

○ 위 치 : 당진시 용연동 854(역천로 632-18)

○ 규 모 : 지상2층(연면적 1,191.72㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,194백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,194	47	1,656	6,491	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,194	47	1,656	6,491	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

○ 당진지소 신축 기본계획 수립('21. 9.)

○ 당진지소 신축 공유재산심의회('22. 4.) 및 지방재정투자심사('22. 8.)

○ 당진지소 공사 착공('24. 8.)

○ 설계용역 및 공사 계약심사, 일상감사 등 완료('24. 5.)

□ 향후계획

○ 당진지소 공사 준공('25.10.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 철거 및 건축공사 설계용역('23.7. ~ '24.3.) 추진 중, 공사비 증가

(원자재가격 및 인건비 상승 등)에 따라 총사업비 변경

※ (총사업비) 당초 6,954백만원 → 변경 8,194백만원(1,245백만원, 17.8%↑) 향상을 위한 사업으로 소요 예정

○ 침수피해 복구대책 마련 및 피해액 보상으로 3.5억원 소요 예정

사업명

동물위생시험소 부여지소 신축

담당자

동물위생시험소 운영지원과

이찬우(☎635-7008)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후지소 신축으로 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하여 민원인 불편 해소,       농가 서비스 질 향상, 직원 근무의욕 고취 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2028. 4.

○ 위 치 : 부여군 성왕로352번길 32-4

○ 규 모 : 연면적 약 1,200㎡(부지 4,309㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,853	-	-	415	9,438
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,853	-	-	415	9,438
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ '25. 9 ~ 26. 6 (10개월) : 설계용역 추진

□ 향후계획

○ '25. 9. : '26년도 본예산 1차 사업비(2,939백만원) 요구

○ '26. 9. ~ 12. (3개월) : 건축물 철거 완료 및 문화재 시굴조사 실시
※ 시굴조사 결과, 문화재 발견시 사업 중지 후 발굴조사로 변경(기한 연장)

○ '26. 9. : '27년도 본예산 2차 사업비(6,499백만원) 요구

○ '27. 1. ~ '28. 3. (14개월) : 건설공사 및 감리 실시

○ '28. 4. : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동물위생시험소 태안지소 신축

담당자

동물위생시험소 운영지원과

이찬우(☎635-7008)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후지소 신축으로 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하여 민원인 불편 해소,       농가 서비스 질 향상, 직원 근무의욕 고취 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2023. 1. ~ 2030. 4.

○ 위 치 : 태안군 태안읍 굴포길 37

○ 규 모 : 연면적 약 1,200㎡(부지 4,309㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,305백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,305	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,305	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ '21. 8. : 노후지소 3개소(당진,부여,태안) 신축계획 수립

○ '23. 8. : 공유재산심의회 및 지방재정투지심사 - 가결

○ '23. 8. : 공공건축심의 - 가결

※ 태안지소 관련 예산 미반영 ('24년, '25년 예산 요청)

□ 향후계획

○ 태안지소 공사를 위한 설계 예산(′25년 3회 추경 반영) 요구 (415백만원)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도립공원 사유지 매수

담당자

도립공원과 서슬기(☎635-7690)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연생태계 보존 및 안전한 도립공원 관리를 위한 도유재산 확충 필요

○ 도립공원 내 사유재산권 제약에 따른 토지소유자 및 주민 민원 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2031.

○ 위 치 : 3개 도립공원(덕산, 칠갑산, 대둔산)

○ 규 모 : 145필지(덕산 46, 칠갑산 60, 대둔산 39) / 2,464ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	46,400	5,034	4,951	5,300	30,845
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	43,340	5,034	1,951	5,300	30,845
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.5%)

○ ’22~’23년 : 1차년도 사유지매수 완료(3필지, 373ha, 50.3억원)

○ ’23~’24년 : 2차년도 사유지매수 추진(13필지, 50억원)

□ 향후계획

○ 3차년도 사유지매수 사전 행정절차 이행(19필지, 384ha, 53억원)